93/2020-77066(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-9956/2019

03 сентября 2020 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску  

общества с ограниченной ответственностью «ОРЕЛАГРОПРОМ» к обществу с ограниченной ответственностью «ВИА-СТРОЙ» об обязании безвозмездно устранить недостатки, о взыскании госпошлины. В судебном заседании участвуют представители: от истца: ФИО2., по доверенности от 01.10.2019 № 97/ап-2019, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности № 1 от 27.01.2020, удостоверение  адвоката № 1296.  

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ОРЕЛАГРОПРОМ» удовлетворить.  

Обязать обществу с ограниченной ответственностью «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 20 календарных дней с даты вступления в  силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в металлоконструкциях,  изготовленных по договору № 07 от 16.04.2018г.:  

- выполнить монтажные накладки из листа той же марки металла и толщиной не  менее наименьшей толщины стенок свариваемых (стыковыми швами) деталей  металлоконструкций: трубы колонн Kl, К2, КЗ (труба профильная 300x10мм, 75 шт.),  ферм Ф-1 (труба 120x80x5мм), распорок Р-1 (уголок 75x5мм), прогонов П (уголок  100x63x6мм) оси А-Б-Г-Д, р.1-15;  

- очаги коррозии на металлоконструкциях зачистить до металла, обезжирить и  восстановить лакокрасочное покрытие согласно условиям договора № 07 от 16.04.2018г на  100 кв.м.  

Обязать обществу с ограниченной ответственностью «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 20 календарных дней с даты вступления в  силу настоящего решения безвозмездно устранить недостатки в работах, выполненных  по договору подряда № 08СМ от 16.04.2018:  

- в монтажных соединениях распорок Р-1 (уголок 75x5мм) с накладками колонн К1  (лист 100x10, лист 180x10), выполненных сварными швами H1 - 5:  

в пролете р. 1-2 ось А швы переварить; 

в пролете р. 2-3 ось А нижние швы подварить и выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

в пролете р. 3-4 ось А р. 3 сварной шов подварить и выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

в пролете р. 3-4 ось А р. 4 шов переварить; 

в пролетах р. 4-5 ось А, р. 5-6 ось А, р. 6-7 ось А, р. 7-8 ось А нижние швы  подварить и выполнить в соответствии с требованиями проектной документации;  

в пролете р. 8-9 ось А р. 8 сварной шов подварить и выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

в пролете р. 13-14 ось А р. 14 сварной шов подварить и выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

в пролете р. 1-7 ось Д нижние швы подварить и выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

- в монтажных соединениях вертикальных связей СВ2, СВЗ (уголок 75x5мм) с  колоннами К2, выполненных с помощью накладок (п. 5 лист 500x10мм, п. 6 лист  260x10мм, п. 7 лист 415x10мм, п. 8 лист 100x10мм, п. 9 лист 280x10мм) сварными швами  H1- 5:  

- в сварном соединении п.7 с прогоном П шов переварить; 

- длину швов вокруг уголков на накладках выполнить в соответствии с  требованиями проектной документации;  

- на нижнем монтажном узле р.4-5 ось Б сварные швы заварить, трубу  демонтировать и восстановить лакокрасочное покрытие.  

В случае неисполнения решения суда в установленный 20-дневный срок с даты  вступления в силу настоящего решения, взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>» в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «ОРЕЛАГРОПРОМ» неустойку в размере  259 574 руб. 40 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ОРЕЛАГРОПРОМ» расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 600 руб.  00 коп.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОРЕЛАГРОПРОМ» из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 8 400 руб. 00 коп.,  уплаченную по платежному поручению № 3610 от 14.10.2019.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОРЕЛАГРОПРОМ»  денежные средства в сумме 300 000 руб. 00 коп., перечисленные по платежному  поручению № 833 от 19.03.2020 на оплату экспертизы с депозитного счета Арбитражного  суда Курской области.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий  месяца со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Беседина