1111111481_5705335  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск «7» февраля 2023 года Дело № А19-20982/2022 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кашковой  А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖКС» (ОГРН:1153850030476, ИНН:  3811043018, адрес: 664081, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ТРУДОВАЯ  УЛИЦА, ДОМ 111)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХСТРОЙКОНСАЛТ»  (ОГРН: 1163850074970, ИНН: 3849059313, адрес: 664003, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ИРКУТСК ГОРОД, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 19, ОФ.1)  

третье лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА (ОГРН: 1053808211610;  ИНН:3808131271, адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д.14)  

об обязании устранить недостатки работ, взыскании 1 589 732 руб. 69 коп.  

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить полностью. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТЕХСТРОЙКОНСАЛТ» в срок до 31.05.2023 устранить недостатки выполненных работ  по договору от 19.07.2019 № 12 на выполнение работ для благоустройства дворовой  территории многоквартирного дома по адресу: ул. Трилиссера, 91 в г. Иркутске путем  проведения следующих работ:  

- очистить поверхность асфальтового покрытия от земли, песка и мелкой пыли на  проезжей части площадью 922 кв.м. и на тротуарах площадью 188 кв.м.;  

- произвести разделку трещин в асфальтовом покрытии на проезжей части  площадью 922 кв.м. и на тротуарах площадью 188 кв.м.;  

- загерметизировать продольные и поперечные трещины в асфальтовом покрытии  путем залития битумной мастикой в соответствии с действующей технологией с  применением специального оборудования на проезжей части площадью 922 кв.м. и на  тротуарах площадью 188 кв.м.;  

- загерметизированные трещины на асфальтовом покрытии присыпать песком на  проезжей части площадью 922 кв.м. и на тротуарах площадью 188 кв.м.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТЕХСТРОЙКОНСАЛТ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ  СИСТЕМАМИ» 1 589 732 руб. 69 коп. – неустойка, 8 000 руб. – расходы по оплате  государственной пошлины.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ТЕХСТРОЙКОНСАЛТ» (ОГРН: 1163850074970, ИНН: 3849059313, адрес: 664003,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ДЗЕРЖИНСКОГО УЛИЦА, ДОМ 19, ОФ.1)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 26 897 руб. 33 коп.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

Судья Е.Ю. Колосова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 18.04.2022 0:04:00

 Кому выдана Колосова Елена Юрьевна