АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-16505/2021

город  Вологда

25 февраля  2022 года

 

Резолютивная часть решения  объявлена 22 февраля  2022  года.

Текст решения в полном объеме изготовлен 25 февраля 2022  года. 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Дегтяревой Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании  материалы дела по исковому заявлению индивидуального  предпринимателя  ФИО2 к муниципальному учреждению культуры  «Климовское социально-культурное объединение» о внесении изменений в контракт от 25.05.2021 № 0830500000221001022,

при участии от истца – ФИО3 по доверенности от 08.02.2022, 

у с т а н о в и л:

индивидуальный  предприниматель  ФИО2  (ОГРНИП 31435370270020 1, далее – Предприниматель)  обратился в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к муниципальному учреждению культуры  «Климовское социально-культурное объединение» (ОГРН 

<

***>, далее – Учреждение) о внесении изменений в контракт от 25.05.2021 № 0830500000221001022 в части продления сроков выполнения работ  до 31 августа 2022 года. 

В обоснование исковых требований предприниматель  сослался на возникновение в процессе исполнения контракта обстоятельств, которые не позволили выполнить работу в предусмотренный договором срок, а также статьи 450, 451, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Представитель  истца в судебном заседании требования поддержал. 

Учреждение в отзыве на иск не возражало против внесения изменений в контракт. 

В судебном заседании 15.02.2022  в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв до 09 час 00 мин 22.02.2022. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет по адресу: http://vologda.arbitr.ru. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела до и после перерыва представителей не направил, в связи с чем дело  рассмотрено в соответствии со статьями 136, 137, 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела,  25.05.2021 между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Заказчик) заключен контракт № 0830500000221001022 (далее – контракт)  на выполнение работ по капитальному  ремонту здания Дворца культуры и спора д. Климовское МКУ «Климовское СКО».

Согласно пункту 2.1 контракта цена работ составляет 13  052 543 руб. 90 коп. 

В пункте 3.1 контракта указаны сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по  30 ноября 2021 года.

Предприниматель  указал, что в процессе исполнения обязательств по контракту возникли обстоятельства, которые не позволили выполнить работу в установленный срок. Истец указывает на  выявление дополнительного объема работ, длительное время согласования дополнительных  работ и получение разрешения, в связи с чем  в срок завершить работы не представлялось возможным. В частности, отметило, что письмом от 15.11.2021 уведомило заказчика о невозможности выполнения работ в срок по причине сложившейся обстановки.  

В связи с тем, что Учреждение  указало  на невозможность внести изменения в контракт в части продления срока выполнения работ, Предприниматель обратились в арбитражный суд с настоящим иском.

Обязательства сторон в рассматриваемом случае установлены договором, правовое регулирование которого определяется главой 37 ГК РФ и Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения муниципальных нужд, осуществляются на основе муниципального контракта на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд.

В силу пункта 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 767 ГК РФ, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ по общему правилу изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором.

Статья 451 ГК РФ устанавливает возможность изменения договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. При этом под существенным изменением обстоятельств понимается их изменение настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Изменение договора по таким причинам допускается, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

В части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей и статьей 95 названного Закона.

Согласно пункту 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Материалами дела подтверждается, что изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру и условиям оборота. Невозможность выполнения  работ в срок в связи с выявлением дополнительного объема работ, его согласованием не отрицается ответчиком. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела, расторжение контракта противоречит общественным интересам, поскольку работы являются социально значимыми.

С учетом обоснованных  обстоятельств невозможности завершения работ в срок, суд приходит к выводу   о наличии правовых оснований для удовлетворения требований истца. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 ГК РФ.

Досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Ответчик возражений относительно удовлетворения исковых требований не представил.

Таким образом, исковые требования подлежит удовлетворению. 

Поскольку истец в судебном заседании   просил понесенные им судебные расходы по уплате государственной пошлины по итогам рассмотрения дела не распределять, соответственно, оснований отнесения на ответчика расходов истца по уплате государственной пошлины не имеется.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

р е ш и л :

внести в контракт «Капитальный ремонт здания Дворца культуры и спора д. Климовское МКУ «Климовское СКО»» 25.05.2021 № 0830500000221001022, заключенный между  индивидуальным предпринимателем  ФИО2 и  муниципальным учреждением культуры  «Климовское социально-культурное объединение», следующие изменения:

пункт 3.1 контракта изложить в следующей редакции: «Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 31 августа 2022 года». 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                      Е.В. Дегтярева