АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке части 1 статьи 176 АПК РФ)

Дело № А74-6870/2024

29 января 2025 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Чумаченко Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ю.В.Девяшиной рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании в течение одного дня со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение в соответствии с условиями договора от 01.08.2022 № 20.1900.3380.22 и пункта 10 технических условий;  

об обязании выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовании со всеми заинтересованными организациями;  

о выполнении строительства ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 22-39 ПС Западная - г. Абакан, промзона до РУ - 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ.;  

о выполнении строительства ТП-10/0,4 кВ; 

о выполнении строительства ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств;  

о выполнении монтажа комплекса коммерческого учета электрической энергии; 

о взыскании 27 608 руб. 69 коп. неустойки за период с 02.08.2023 по 01.08.2024 (за 366 дней);  

о взыскании 356 391 руб. 31 коп. убытков в виде упущенной выгоды за период с 02.08.2023 по 02.12.2024;  

о взыскании 25 000 руб. судебной неустойки за каждый календарный день неисполнения решения суда, по истечении одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу по день его фактического исполнения,  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "МК плюс" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 102, 110, 167 - 171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования частично. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в срок, не превышающий одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, исполнить условия договора от 01.08.2022 № 20.1900.3380.22 об осуществлении технологического присоединения, а именно выполнить:  

- проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством,  

- строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 22-39 ПС Западная - г. Абакан, промзона до РУ - 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП10 кВ уточнить проектом,  

- строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором необходимой мощности. Место установки, тип и параметы оборудования определить проектом,  

- строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4 кВ уточнить проектом,  

- монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442),  

2. Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 75 608 руб. 69 коп., в том числе 27 608 руб. 69 коп. неустойки, 48 000 руб. убытков, а также 8101 руб. 82 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований. 

3. В случае неисполнения настоящего решения в части исполнения условий договора от 01.08.2022 № 20.1900.3380.22 об осуществлении технологического присоединения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 судебную неустойку в размере 3 000 руб. за каждый календарный день неисполнения решения суда по настоящему делу, по истечении одного месяца с момента вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.  

4. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета 1 661 руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд (г. Красноярск) в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Чумаченко Т.В.