ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-255222/16-96-2290

г. Москва

24 апреля 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2017 года

Полный текст решения изготовлен 24 апреля 2017 года

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Гутник П.С., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по исковому заявлению ОАО «УМИС»

к ответчику ЗАО «Город»

о взыскании 28 598 328,82 руб.

в судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 05.12.2016

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 18.01.2017

УСТАНОВИЛ:

ОАО «УМИС»  просит взыскать с  ЗАО «Город» задолженность в размере 24 020 715 руб. 71 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами  в размере 4 577 613 руб. 11 коп.

 Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик требования не признал согласно доводам отзыва, заявил о пропуске истцом срока исковой давности.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что между истцом ОАО «УМИС» (Генподрядчик) и ответчиком ЗАО «Город» (Субподрядчик) был заключен договор № УМИС97/12СП от 15.10.2012, в соответствии с условиями которого, Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генподрядчика своими силами и средствами, строительно-монтажные работы по устройству железобетонных конструкций, в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию по приложению №4 и с результатом работ сдать Генподрядчику ,при строительстве «Жилой дом с подземной автостоянкой» расположенного по адресу: 

<

...>, далее по тексту именуется «Объект», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 2.5 договора стоимость оказываемых Генподрядчиком услуг (предоставление технической документации, координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана имущества) по настоящему договору составляет 5 %, в т.ч. НДС 18 % от стоимости общего объема работ, выполняемых Субподрядчиком ежемесячно, и удерживается при оплате Генподрядчиком стоимости выполненных Субподрядчиком объемов работ.

В обоснование исковых требований истцом указано на то, что в рамках указанного договора в соответствии с п.2.5. договора истец оказал, а ответчик принял генподрядные услуги на общую сумму 5 275 588, 90 руб., что подтверждается подписанными обеими сторонами актами, которые до настоящего времени не оплачены, и задолженность ответчика составляет 5 275 588,90 руб.

В соответствии с п. 12.8 договора в случае предъявления к Генподрядчику надзорными и контролирующими органами, а также Заказчиком штрафных санкций, за нарушения положений действующего законодательства РФ, вызванных действиями (бездействием) Субподрядчика по настоящему договору, последний обязуется возместить Генподрядчику убытки в размере штрафных санкций в течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления такого требования Генподрядчиком, а также уплачивает штраф в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) руб.00 коп.

Истцом указано на то, что в соответствии с п. 12.8 договора на ответчика был наложен штраф в размере 89 800 руб., при этом, ответчик обязанность по уплате штрафа признал в актах № 383 и 396 от 30.09.2013г.

Кроме того, в обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ОАО «УМИС» оказало, а ЗАО «Город» приняло, но не оплатило оказанные услуги без заключения договора: предоставление строительной техники с обслуживающим персоналом на общую сумму 16 265 513, 35 руб., предоставление в пользование опалубочного оборудования на общую сумму 428 877,42 руб., предоставление в пользование бытовых помещений на общую сумму 316 625 руб., услуги по вывозу мусора на общую сумму 713 338, 02 руб.; возмещение за потребляемую электроэнергию и дизельное топливо на общую сумму 677 741,02 руб.,  поставка дизельного топлива на сумму 253 232 руб., а всего фактически оказано услуг на сумму 17 977 585, 79 руб.

 В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с ч. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик оплатить эти услуги.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить задолженность, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что после выполнения ответчиком работ истцом уже была удержана сумма стоимости услуг генподрядчика в размере 3% и 5% от стоимости выполненных СМР в порядке п.2.4, и 2.5. Договора на сумму 12 331 270.40 руб.

Суд пришел к следующим выводам.

Согласно Договору субподряда № УМИС 97/12СП от 15.10.2012 Ответчик (Субподрядчик) обязуется выполнить по заданию Истца (Генподрядчик) своими силами и средствами строительно-монтажные работы (СМР) по устройству железобетонных конструкций, подготовить исполнительскую документацию и с результатом работ сдать Генподрядчику при строительстве Объекта - жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Москва, ул.Академика Виноградова, вл.7, корп. 11.

Согласно п.2.1 Договора, Дополнительного соглашения к нему №4 от 01.06.2013 г. цена Договора составила ориентировочно 154 863 000 руб., включая НДС 18%.

Сроки выполнения работ определены п.3.1. Договора и Дополнительного соглашения к нему № 4 от 01.06.2013г.: начало работ - 15.10.2012 г., окончание работ - 15.11.2013г.

Порядок и объемы выполнения работ определены п. 3.2, п.3.4 Договора, Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), Дополнительным соглашением к Договору №4 от 01.06.2013 г. Как следует из указанных условий Договора, работы по Договору должны выполняться поэтапно.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ определен п.4.1-4.7 Договора и производится ежемесячно, подтверждается Актами выполненных работ (КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По окончании срока выполнения работ, установленного п.3.1. Договора стороны подписывают итоговый Акт сдачи-приемки, подтверждающий выполнение всего комплекса работ по Договору и передачу Генподрядчику исполнительной и иной документации по выполненным работам. Также стороны Договора составляют Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию.

В соответствии с п.2.3. Договора оплата за выполненные Субподрядчиком СМР должна производиться ежемесячно, согласно предъявленного Субподрядчиком счета на основании документов: исполнительской документации, журнала учета выполненных работ, подписанных сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), отчета об израсходованных давальческих материалов Генподрядчика, акта сдачи-приемки оказанных Генподрядчиком услуг.

Оплата выполненных Субподрядчиком СМР осуществляется путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика с зачетом всех ранее произведенных платежей (в том числе по счетам поставщиков материалов и изделий).

При этом согласно п.2.4. - 2.5 Договора, Дополнительного соглашения к нему №2 от 31.05.2013г. Генподрядчик ежемесячно удерживает из платежей согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): стоимость фактически переданных Генподрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, оборудования с учетом транспортных и заготовительных расходов, а также расходов на хранение в размере 3% от стоимости материалов, изделий, оборудования; стоимость оказываемых Генподрядчиком Субподрядчику услуг (предоставление технической документации, координация работ, охрана имущества) в размере 5% от стоимости общего объема работ, выполняемых субподрядчиком ежемесячно.

Также согласно п.п.2.6-2.9. Договора в порядке компенсации затрат Генподрядчика на предоставление Субподрядчику в пользование вертикального транспорта, механизмов и оборудования, затрат электроэнергии и воды, затрат на вывоз мусора со строительной площадки возводимого Объекта, а также в счет оплаты Генподрядчику за предоставленные Субподрядчику бытовые помещения и туалеты на строительной площадке, Генподрядчик производит удержания от суммы выполненных СМР, согласно Справке о выполненных работах и затратах (КС-3) в следующих размерах: фактической стоимости затрат по предоставлению Генподрядчиком Субподрядчику вертикального транспорта, механизмов и оборудования (подтверждается двухсторонним актом); фактической стоимости затраченных Субподрядчиком при выполнении работ электроэнергии и воды (подтверждается двухсторонним актом приема-передачи); стоимости затрат Генподрядчика по вывозу мусора с территории строительства Объекта в размере 0,1% от подлежащей оплате стоимости выполненных работ по справке КС-3; платы за предоставление Генподрядчиком Субподрядчику бытовых помещений и туалетов из расчета 6 000 руб. за одно бытовые помещение или туалет (подтверждается двухсторонним актом приема-передачи).

Также согласно п.6.1. Договора в порядке резервирования ежемесячно из стоимости выполненных СМР удерживаются суммы на обеспечение Субподрядчиком качества выполненных работ в размере 5% от стоимости выполненных СМР за отчетный месяц. Удержанная сумма подлежит возврату по истечении 24 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию.

Во исполнение Договора № УМИС 97/1201 от 15.10.2012 г. Субподрядчик выполнил СМР на общую сумму 154 140 880 руб. за период октябрь 2012г. - декабрь 2013 г.

Как следует из материалов дела, из данной суммы выполненных работ была удержана сумма стоимости услуг Генподрядчика в размере 3% и 5% от стоимости выполненных СМР в порядке п.2.4, и 2.5. Договора на сумму 12 331 270.40 руб.

Оплате подлежало, согласно Справкам о стоимости выполненных работ и затрат за период октябрь 2012г. - декабрь 2013 г. всего 141 809 609,60 руб.

При этом работы выполнялись Субподрядчиком, сдавались Генподрядчику и принимались им ежемесячно, что подтверждается актами выполненных работ (КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), представленных в материалы дела.

Согласно п.2.6. Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по предоставлению вертикального транспорта, механизмов и оборудования за период февраль2013-декабрь 2013 на общую сумму 16 125 533,35 руб., согласно Актам, представленных в материалы дела.

Согласно п.2.6. Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по предоставлению опалубочного оборудования за период декабрь 2012, январь-марь 2013, июнь 2013 на общую сумму 492 077,42 руб., согласно Актам, представленных в материалы дела.

Согласно п.2.6. Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику дизтопливо в период выполнения СМР на общую сумму 749 360 руб., согласно Актам и товарной накладной, представленных в материалы дела.

Согласно п.2.7 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по предоставлению электроэнергии и воды за период декабрь 2012, январь-марь 2013, июнь 2013 на общую сумму 834 270,23 руб., согласно Актам, представленных в материалы дела.

Согласно п.2.8 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по вывозу мусора со строительной площадки Объекта период декабрь 2012, январь-марь 2013, июнь 2013 на общую сумму 834 270,23 руб., согласно Актам, представленных в материалы дела.

Согласно п.2.9 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по аренде бытовок на строительной площадке Объекта на общую сумму 564 000 руб., согласно Актам, представленных в материалы дела.

Кроме того, Генподрядчиком предъявлено Субподрядчику сумма штрафов в размере 89 800 руб.

Таким образом, по договору № УМИС 97/12СП от 15.10.2012г. согласно Справкам об оплате выполненных работ и затрат (КС-3) за весь период строительства (октябрь 2012 - декабрь 2013) подлежали оплате выполненные Субподрядчиком СМР на сумму 141 809 609,60 руб. с учетом удержаний на материалы 3% и 5% резервирование качества работ, в то же время, услуги Генподрядчика по тому же договору за тот же период составили всего 19 006 191,16 руб., Генподрядчиком оплачено в счет выполненных Субподрядчиком СМР по Договору № УМИС 97/12СП от 15.10.2012г. всего 122 574 500 руб., таким образом, со стороны Генподрядчика оплачено и предоставлено услуг на сумму всего 141 580 691,16 руб. (19 006 191,16+122 574 500), долг в пользу Субподрядчика по договору № УМИС 97/12СП от 15.10.2012г. составляет 228 918.44 руб. 

Таким образом, задолженность Ответчика (Субподрядчика) перед Истцом (Генподрядчиком) по договору № УМИС 97/12СП от 15.10.2012г. отсутствует.

Согласно Договору субподряда № УМИС 96/12СП от 02.07.2012Ответчик (Субподрядчик) обязуется выполнить по заданию Истца (Генподрядчик) своими силами и средствами строительно-монтажные работы (СМР) по устройству железобетонных конструкций, подготовить исполнительскую документацию и с результатом работ сдать Генподрядчику при строительстве Объекта — Всеросийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России по адресу: Москва, ул. Давыдковская, д.7».

Согласно п.2.1 Договора цена Договора составила 25 200 000 руб., Дополнительным соглашением №2 от 12.10.2012 г. к Договору стороны договорились о дополнительных СМР на сумму 3 459 340 руб., Дополнительным соглашением №3 от 15.10.2012 г. к Договору стороны договорились о дополнительных СМР на сумму 10 500 000 руб.

Сроки выполнения работ определены п.3.1. Договора и Дополнительными соглашениями № 2 от 12.10.2012 г. и №3 от 15.10.2012 г. к Договору: начало работ - 10.06.2012 г., окончание работ -30.12.2012г.

Порядок и объемы выполнения работ определены п. 3.2 - 3.4 Договора, Графиком производства работ (Приложение №2 к Договору), Дополнительными соглашениями к Договору № 2 от 12.10.2012 г. и №3 от 15.10.2012 г.

Как следует из указанных условий Договора, п. 4.1. Договора, работы по Договору должны выполняться поэтапно с ежемесячным оформлением приемо-сдаточной документации по форме КС-2 и КС-3.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ определен п.4.1-4.7 Договора и производится ежемесячно, подтверждается Актами выполненных работ (КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

По окончании срока выполнения работ, установленного п.3.1. Договора стороны подписывают итоговый Акт сдачи-приемки, подтверждающий выполнение всего комплекса работ по Договору и передачу Генподрядчику исполнительной и иной документации по выполненным работам. Также стороны Договора составляют Акты приемки скрытых работ и систем, подлежащих закрытию.

В соответствии с п.2.3. Договора оплата за выполненные Субподрядчиком СМР должна производиться ежемесячно, согласно предъявленного Субподрядчиком счета на основании документов: исполнительской документации, журнала учета выполненных работ, подписанных сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), отчета об израсходованных давальческих материалов Генподрядчика, акта сдачи-приемки оказанных Генподрядчиком услуг.

Оплата выполненных Субподрядчиком СМР осуществляется путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика с зачетом всех ранее произведенных платежей (в том числе по счетам поставщиков материалов и изделий).

При этом согласно п.2.4. - 2.5 Договора, Дополнительного соглашения к нему №2 от 31.05.2013г. Генподрядчик ежемесячно удерживает из платежей согласно Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): стоимость фактически переданных Генподрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, оборудования с учетом транспортных и заготовительных расходов, а также расходов на хранение в размере 3% от стоимости материалов, изделий, оборудования; стоимость оказываемых Генподрядчиком Субподрядчику услуг (предоставление технической документации, координация работ, охрана имущества) в размере 3% от стоимости общего объема работ, выполняемых субподрядчиком ежемесячно.

Также согласно п.п.2.6.-2.9. Договора в порядке компенсации затрат Генподрядчика на предоставление Субподрядчику в пользование вертикального транспорта, механизмов и оборудования, затрат электроэнергии и воды, затрат на вывоз мусора со строительной площадки возводимого Объекта, а также в счет оплаты Генподрядчику за предоставленные Субподрядчику бытовые помещения и туалеты на строительной площадке, Генподрядчик производит удержания от суммы выполненных СМР, согласно Справке о выполненных работах и затратах (КС-3) в следующих размерах: фактической стоимости затрат по предоставлению Генподрядчиком Субподрядчику вертикального транспорта, механизмов и оборудования (подтверждается двухсторонним актом); фактической стоимости затраченных Субподрядчиком при выполнении работ электроэнергии и воды (подтверждается двухсторонним актом приема-передачи); стоимости затрат Генподрядчика по вывозу мусора с территории строительства Объекта в размере 0,1% от подлежащей оплате стоимости выполненных работ по справке КС-3; платы за предоставление Генподрядчиком Субподрядчику бытовых помещений и туалетов из расчета 6 000 руб. за одно бытовые помещение или туалет (подтверждается двухсторонним актом приема-передачи).

Также согласно п.6.1. Договора в порядке резервирования ежемесячно из стоимости выполненных СМР удерживаются суммы на обеспечение Субподрядчиком качества выполненных работ в размере 5% от стоимости выполненных СМР за отчетный месяц. Удержанная сумма подлежит возврату по истечении 24 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию.

Во исполнение Договора № УМИС 96/12СП от 02.07.2012 г. Субподрядчик выполнил СМР на общую сумму 30 269 338,83 руб. за период июль 2012г. - декабрь 2012 г.

Из этой суммы выполненных работ удержана сумма стоимости услуг Генподрядчика в размере 3% и 5% от стоимости выполненных СМР в порядке п.2.4, и 2.5. Договора на сумму 2 421 547,11 руб.

Оплате подлежало, согласно Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 31 за период июль 2012г. - декабрь 2012 г. всего 27 847 791.72 руб.

При этом работы выполнялись Субподрядчиком, сдавались Генподрядчику и принимались им ежемесячно, что подтверждается актами выполненных работ (КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), представленным в материалы дела.

Согласно п.2.6. Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику материалы, изделия и оборудование за период июль 2012-декабрь 2012 на общую сумму 1 817 402,79 руб. согласно Актам, представленным в материалы дела.

Согласно п.2.7 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по предоставлению электроэнергии за период июль 2012- декабрь 2012 на общую сумму 167 408,64 руб., согласно Актам, представленным в материалы дела.

Согласно п.2.8 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по вывозу мусора со строительной площадки Объекта период июль 2012-декабрь 2012 на общую сумму 31 266,89 руб., согласно Актам, представленным в материалы дела.

Согласно п.2.9 Договора Генподрядчик предоставил Субподрядчику ежемесячные услуги по аренде бытовок на строительной площадке Объекта на общую сумму 532 625,00 руб., согласно Актам, представленным в материалы дела.

Кроме того, Генподрядчиком предъявлено Субподрядчику сумма штрафов в размере 89 800 руб.

Таким образом, по договору № УМИС 96/12СП от 02.07.2012г. согласно Справкам об оплате выполненных работ и затрат (КС-3) за весь период строительства (июль 2012 - декабрь 2012) подлежали оплате выполненные Субподрядчиком СМР на сумму 27 847 791.72 руб. с учетом удержаний на материалы 3% и 5%  резервирование качества работ.

В то же время, услуги Генподрядчика по тому же договору за тот же период составили всего 1 677 283,90 руб., Генподрядчиком оплачено в счет выполненных Субподрядчиком СМР по Договору № УМИС 96/12СП от 02.07.2012г. всего 25 787 631,37 руб.

Таким образом, со стороны Генподрядчика оплачено и предоставлено услуг на сумму всего 27 464 915.27 руб., долг в пользу Субподрядчика по договору № УМИС 96/12СП от 02.07.2012г. составляет 382 876.45 руб., задолженность Ответчика (Субподрядчика) перед Истцом (Генподрядчиком) по договору № УМИС 96/12СП от 02.07.2012г. отсутствует.

Кроме того, ответчик заявил о применении срока исковой давности.

В силу ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

По смыслу ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Как следует из статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок  исковой давности устанавливается в три года.

Требования истцом заявлены относительно услуг генподряда по актам от октября 2013 года, признанных ответчиком штрафа в актах от 30.09.2013.

В соответствии с п. 2.5 договора стоимость оказываемых Генподрядчиком услуг (предоставление технической документации, координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана имущества) по настоящему договору составляет 5 %, в т.ч. НДС 18 % от стоимости общего объема работ, выполняемых Субподрядчиком ежемесячно, и удерживается при оплате Генподрядчиком стоимости выполненных Субподрядчиком объемов работ.

В настоящем случае истец не мог не знать о нарушении своего права и о надлежащем ответчике, поскольку истец и ответчик являются сторонами договора, на основании которого заявлены требования, договором сроки платежей определены, кроме того, действие договора распространено на период, предшествующий дате его заключения. Таким образом, ничто не препятствовало истцу обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав своевременно, в течение срока исковой давности.

Таким образом, учитывая, что истец обратился в суд с настоящим иском 22.12.2016 (согласно штампа канцелярии Арбитражного суда города Москвы), истцом пропущен срок исковой давности.

Руководствуясь п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд,  применив срок исковой давности в отношении требований истца в части задолженности, отказывает в удовлетворении указанного требования в полном объеме.

Требования о взыскании суммы процентов за пользование чужими денежными средствами также не подлежат удовлетворению в связи с отказом во взыскании суммы задолженности, на которую они были начислены.

 Поскольку при принятии искового заявления к производству, истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, согласно п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, госпошлина в размере 165 992 руб. подлежит взысканию с истца в доход Федерального бюджета Российской Федерации.

На основании статей 196, 200, 309, 310, 395, 702, 711, 740, 746, 779  Гражданского кодекса Российской Федерации  руководствуясь ст.ст. 9, 65, 71, 110, 167, 170, 176, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ОАО «УМИС» в доход федерального бюджета Российской Федерации 165 992 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

  Судья                                                                                                     П.С. Гутник