АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А15-9866/2023

14 июня 2024 г.

г. Махачкала

          Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2024 г.

          Решение в полном объеме изготовлено 14 июня 2024 г.

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рашидовой З.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению 

 Службы строительного надзора Астраханской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Буран» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании исполнить требования, содержащиеся в предписании об устранении нарушений законодательства от 02.08.2023 №2,

в отсутствие представителей,

УСТАНОВИЛ:

Служба строительного надзора Астраханской области (далее – служба, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Буран» (далее – общество) об обязании исполнить требования, содержащиеся в предписании об устранении нарушений законодательства от 02.08.2023 №2.

          Общество в отзыве на заявление в удовлетворении требований службы просит отказать в связи с исполнением предписания.

          В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие сторон, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.

          Изучив доводы заявления, отзыва на него, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

          Как следует из материалов дела, на основании разрешений на строительство от 31.01.2022 №30-RU30301000-4-2022, от 18.02.2022 №30-RU30301000-12-2022 и от 06.06.2023 №30-12-48-2023 общество осуществляло строительство многоэтажного жилого дома по адресу: 

<

...>.   

        На основании распоряжения от 21.04.2023 №02-94/23-р службой проведена проверка выполнения обществом работ – завершение этапа работ по земляным работам на объекте капитального строительства.

          По результатам проверки составлен акт от 15.05.2023 №1, в котором отражен факт непредоставления в службу документации по этапу работ: «Завершение этапа работ по земляным работам на объекте капитального строительства»; ведения строительства с отступлением от проектной документации; направления извещения о сроках завершения работ (земляные работы) в службу в апреле 2023 года, при этом работы были выполнены в декабре 2023 года.

          15.05.2023 службой вынесено предписание об устранении нарушений при строительстве объекте капитального строительства №1 со сроком исполнения – 30.06.2023.

          29.06.2023 общество направило в службу извещение №1 об устранении нарушений.

           На основании распоряжения от 14.07.2023 №02-161/23-р службой проведена проверка исполнения обществом предписания от 15.05.2023 №1, в ходе которой установлен факт неисполнения обществом указанного предписания. Результаты проверки отражены в акте от 02.08.2023 №1.

           По результатам проверки службой вынесено предписание от 02.08.2023 №2, в которое обязывает общество в срок до 29.09.2023 устранить нарушения обязательных требований.

          Неисполнение требований указанного предписания от 02.08.2023 №2 послужило основанием для обращения службы в арбитражный суд.

          Из предписания от 02.08.2023 №2 следует, что обществом в нарушение части 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство ведется с отступлением от проектной документации Раздел 6 «Проект организации строительства» 823/19-3-ПОС том.6; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 823/19-3-ООС Том 7. Обществу предписано в срок до 29.09.2023 привести строительную площадку в соответствие с требованиями утвержденной проектной документации. Выполнить работы в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации, указанной в пункте 1 столбец 2 данной таблицы.

          В отзыве на заявление общество указывает, что мероприятия по устранению нарушений, указанных в предписании, устранены 29.12.2023, о чем в службу было направлено извещение №2.

          Службой представлены возражения на отзыв общества, в котором указывает, что извещение №2 об устранении нарушений поступило 12.02.2024.

         12.04.2024 службой проведен инспекционный визит в отношении общества на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

...>», предметом которого являлось проверка исполнения предписания от 02.08.2023 №2. По результатам проверки составлен протокол осмотра от 22.04.2024 №2.

         23.04.2024 составлен акт инспекционного визита №1, в котором зафиксирован факт отсутствия нарушения обязательных требований, являющихся предметом инспекционного визита службы.

         Таким образом, из указанных возражений службы на отзыв общества следует, что на дату проведения судебного разбирательства требования об устранении нарушений, содержащиеся в предписании от 02.08.2023 №2 хоть и с нарушением установленного срока, но фактически устранены, что подтверждается приложенным к возражениям актом инспекционного визита от 23.04.2024 №1.

         Поскольку на момент рассмотрения дела предписание от 02.08.2024 №1 фактически исполнено обществом, в удовлетворении требований службы об обязании общества исполнить указанное предписание следует отказать. 

         Руководствуясь статьями 156,167,170,198,201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

в удовлетворении требований Службы строительного надзора Астраханской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отказать.

 

          Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья                                                                Ш.М. Батыраев