053/2022-140983(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А66-1200/2022

г. Тверь

22 ноября 2022 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску по иску Администрации Макса- тихинского района Тверской области, Тверская область, поселок городского  типа Максатиха (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата госрегистрации  12.11.2002г.),  

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Газстрой», Московская область, город Люберцы (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  госрегистрации 25.06.2003 г.),  

третьи лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ривзаводская средняя общеобразовательная школа», Тверская область, Макса- тихинский район, поселок Ривицкий, Государственное казенное учреждение  Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», город Тверь  

об обязании выполнить гарантийные обязательства и устранить дефекты,  

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-171, 176 АПК  РФ, суд,  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газстрой», Московская область, город Люберцы (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата госрегистрации 25.06.2003 г.) в месячный срок с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту № 01363000002818000109-0133449-02 от  10.12.2018г. и устранить дефекты, обнаруженные в ходе эксплуатации здания  детского сада на 60 мест в поселке Ривицкий Максатихинского района Тверской области, отраженные в акте осмотра детского сада на 60 мест в пос. Ривицкий по адресу: 

<

...> от 20.10.2022г., а именно:  

1. Лакокрасочное покрытие пола в теневых навесах отслаивается; 2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров в трещинах; 3. Разрушается бетонная отмостка; 

4. Малые архитектурные формы требуют ремонта;  

5. Крепление ограждения к столбам выполнено не по технологии производителя;  

6. Желоба водосточной системы имеют механические повреждения;  

7. В подвальных помещениях стоит вода; 

8. Места ввода наружных коммуникаций в здание протекают;  9. Наружные дверные блоки промерзают;  

10. На оконных откосах плесень; 

11. Оконные блоки смонтированы с грубыми нарушениями требований  

ГОСТ 30971-2012, что привело к многочисленным протечкам и промерзаниям  

конструкций; 12. Запорная арматура оконных блоков не отрегулирована; 

13. Оконные створки местами не открываются по причине минимального  

зазора или его отсутствия между рамой и подоконной доской ;  

14. Керамогранитная плитка на цоколе и крыльцах бухтит и отваливается;  15. Протечка кровли над музыкальным залом, в том числе окна выходов  

на кровлю; 

16. В системе наружной канализации стоит вода, в трубах имеется отложения ила;  17. В музыкальном зале требуется косметический ремонт потолка;  

18. Трещины по потолкам и стенам, в некоторых помещениях;  19. Керамическая плитка бухтит в пищеблоке;  

20. Деревянные балки и прогоны стропильной системы рассохлись, образовались трещины;  21. Нарушение парогидроизоляция на скатной кровле.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газстрой»,  

Московская область, город Люберцы (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

дата госрегистрации 25.06.2003 г.) в доход федерального бюджета РФ 6000  

руб. 00 коп. государственной пошлины в установленном порядке. Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке ст. 319 АПК РФ после вступления решения в законную силу. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.  

Судья: В.А. Рощупкин 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 30.12.2021 4:29:22

Кому выдана Рощупкин Владимир Александрович