АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-8461/2022

г. Астрахань

20 апреля 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 20 апреля 2023 года.

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (414000, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монерон» (414041, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере            4 058 326 руб. 31 коп., штрафа в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп., штрафа в связи с односторонним расторжением договора подряда от 28.12.2020 №57/1-СМР-2020 в размере 2 061 478 руб. 80 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 58 753 руб.,

при участии:

от некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»: ФИО2, представитель 09.01.2023 № 10, диплом ИВС 0317950 от 26.06.2003, свидетельство о заключении брака, паспорт; 

от общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монерон»: не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (далее – ФКР МКД, истец) обратилась в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монерон» (далее - ООО «ПКФ «Монерон», ответчик) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 4 058 326 руб. 31 коп., штрафа в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп., штрафа в связи с односторонним расторжением договора подряда от 28.12.2020 №57/1-СМР-2020 в размере 2 061 478 руб. 80 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 58 753 руб.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Информация об отложении судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 23.03.2023.

На основании части 3 статьи 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

07 апреля 2023 года в Арбитражный суд Астраханской области от ФКР МКД поступило ходатайство в порядке статьи 49 АПК РФ об уточнении (уменьшении) размера исковых требований, просит взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 2 870 870 руб. 92 коп., штраф в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп., штраф в связи с односторонним расторжением договора подряда от 28.12.2020 №57/1-СМР-2020 в размере 2 061 478 руб. 80 коп.

Судом принято уточнение (уменьшение) размера исковых требований, указанный документ приобщен к материалам дела.

Представитель ФКР МКД в судебном заседании поддержала правовую позицию, изложенную в исковом заявлении, просила удовлетворить уточненные исковые требования в полном объеме.

Выслушав представителя ФКР МКД, исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как видно из материалов дела, 28.12.2020 между ФКР МКД (Заказчик) и ООО «ПКФ «Монерон» (Подрядчик) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Астраханской области №57/1-СМР-2020 (далее – договор), по условиям которого «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства своими силами и средствами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов. конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного (-ых) дома (-ов) (далее по тексту — Работы), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объекте (ах), сооружение а демонтаж временных объектов и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудовано. своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу Объекта (-ов) по Акту приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на каждом Объекте, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ и возмещение ущерба третьим лицам, в соответствии с проектно-сметной (рабочей) документацией, прилагаемой к настоящему Договору, в соответствии с Техническим Заданием Приложение № к настоящему Договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Пунктом 1.2 договора предусмотрено место выполнения работ: 

- г. Астрахань, Кировский район, ул. Бехтерева, дом 19 литер А;          

- г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова ул. Чернышевского, дом 20/3 литер А.

Согласно пункту 1.3 договора сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются Сторонами в Графике выполнения работ Приложение № 2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящем Договора.

Согласно пункту 2.2.1 договора Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящем Договором Работы по Объекту в соответствии с документацией об электронном аукционе, Техническим заданием (Приложение 1), проектно-сметной документацией, строительными и иными нормами и правилами, обеспечив их надлежащее качество, в сроки, установленные настоящим Договором.

В силу пункта 3.2.6  договора датой сдачи Работ по Объекту считается дата подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного доме.

Цена Договора составляет: 20 614 788 руб., включая НДС, в том числе по каждому из Объектов и видов работ, согласно цены договора в соответствии с аукционом Приложение № 3 к настоящему Договору. (пункт 5.1 договора).

Согласно Приложению 2 «График выполнения работ» срок выполнения работ по указанным многоквартирным домам - до 01.09.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова/ул. Чернышевского, д. 20/3 литер А фактически выполнены 24.12.2021, в подтверждение чего представлен акт приемки выполненных работ от 24.12.2021, акт о приемке выполненных работ от 18.01.2022 №1, справка о стоимости выполненных работ от 18.01.2022 №1.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бехтерева, д. 19 литер А фактически выполнены 16.11.2021, в подтверждение чего представлен акт приемки выполненных работ от 16.11.2021, акт о приемке выполненных работ от 16.11.2021 №1, справка о стоимости выполненных работ от 16.01.2021 №1.

Подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные Договором по следующим многоквартирным домам:

<

...> литер А (ремонт крыши);

<

...> литер А (ремонт фасада);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

<

...> литер А (ремонт крыши);

<

...> литер А (ремонт фасада);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения).

В связи с чем истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с расчетом сумм штрафных санкций в связи с просрочкой обязательств, неисполнением обязательств и односторонним расторжением договора, с указанием даты расторжения - 01 июля 2022 года.

Пунктом 5.6 договора предусмотрено, что в случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания; работ, а также нарушении промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки предусмотрены договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) и(или) штрафа при окончательных расчетах за выполненные работы по каждому; Объекту, рассчитываемый в соответствии с пунктами 7.2. н 7.3. настоящего Договора.

Согласно пункту 7.2 договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику неустойку в размере:

77 789 руб. 34 коп. за период с 02.09.2021 по 16.11.2021 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова/ул. Чернышевского, д. 20/3 литер А (электроснабжение);

69 678 руб. 44 коп. за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бехтерева, д. 19 литер А (электроснабжение),

443 383 руб. 68 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт крыши);

774 821 руб. 90 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт фасада);

132 750 руб. 33 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

170 108 руб. 04 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

273 223 руб. 84 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт крыши);

645 198 руб. 59 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт фасада);

145 585 руб. 91 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

138 330 руб. 85 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения),

всего за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 в размере 2 870 870 руб. 92 коп.

В соответствии с пунктом 7.3 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в том числе:

5 процентов цены настоящего Договора а случае, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по договору в полном объеме, истец начислил штраф в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп.

Пунктом 10.2 договора предусмотрено, что заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с взысканием с Генерального подрядчика причиненных убытков в следующих случаях:

систематическое (2 раза и более) нарушение Генеральным подрядчиком сроков оказания услуг и/или выполнения работ;

задержка  подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, кормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ,

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность Объекта капитального строительства или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг  продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидация банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня, при продлении срока настоящего Договора, выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме).

В силу пункта 10.3 договора заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждаюшие.

Истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с расчетом сумм штрафных санкций в связи с просрочкой обязательств, неисполнением обязательств и односторонним расторжением договора, с указанием даты расторжения - 01 июля 2022 года.

В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2. настоящего Договора. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения договора с Подрядчиком. Указанный штраф уплачивается, помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). (пункт 10.4 договора).

В связи с односторонним отказом истца от договора ввиду ненадлежащего исполнения обязательств по договору истец начислил штраф в связи с односторонним расторжением в размере 2 061 478 руб. 80 коп.

В целях досудебного урегулирования спора ФКР МКД направило в адрес ООО «ПКФ «Монерон» 07.02.2022 претензию об уплате неустойки и штрафа №04-962. Ответа на претензию не поступило.

В соответствии с пунктами 12.1, 12.2 договора стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из договора, путем переговоров и консультаций. Если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению Арбитражным судом Астраханской области. 

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По правилам части 3 статьи 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Заключенный сторонами муниципальный контракт является договором подряда, и регулируется положениями параграфа 1 главы 37 «Подряд» ГК РФ, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ). 

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно положениям статей 763, 766 ГК РФ подрядные строительные работы, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

В пункте 4 статьи 753 ГК РФ указано, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 6 статьи 753 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.6 договора предусмотрено, что в случае нарушения Подрядчиком срока начала или окончания; работ, а также нарушении промежуточных сроков выполнения работ, если такие сроки предусмотрены договором, Заказчик имеет право удержать причитающуюся ему сумму неустойки (пени) и(или) штрафа при окончательных расчетах за выполненные работы по каждому; Объекту, рассчитываемый в соответствии с пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Договора.

Согласно пункту 7.2 договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Согласно Приложению 2 «График выполнения работ» срок выполнения работ по указанным многоквартирным домам - до 01.09.2021.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова/ул. Чернышевского, д. 20/3 литер А фактически выполнены 24.12.2021, в подтверждение чего представлен акт приемки выполненных работ от 24.12.2021, акт о приемке выполненных работ от 18.01.2022 №1, справка о стоимости выполненных работ от 18.01.2022 №1.

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бехтерева, д. 19 литер А фактически выполнены 16.11.2021, в подтверждение чего представлен акт приемки выполненных работ от 16.11.2021, акт о приемке выполненных работ от 16.11.2021 №1, справка о стоимости выполненных работ от 16.01.2021 №1.

Подрядчиком не выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренные Договором по следующим многоквартирным домам:

<

...> литер А (ремонт крыши);

<

...> литер А (ремонт фасада);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

<

...> литер А (ремонт крыши);

<

...> литер А (ремонт фасада);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения).

Ввиду несвоевременного выполнения работ истец начислил ответчику неустойку в размере:

77 789 руб. 34 коп. за период с 02.09.2021 по 16.11.2021 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова/ул. Чернышевского, д. 20/3 литер А (электроснабжение);

69 678 руб. 44 коп. за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Бехтерева, д. 19 литер А (электроснабжение),

443 383 руб. 68 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт крыши);

774 821 руб. 90 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт фасада);

132 750 руб. 33 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

170 108 руб. 04 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения);

273 223 руб. 84 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт крыши);

645 198 руб. 59 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт фасада);

145 585 руб. 91 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения);

138 330 руб. 85 коп. за период с 02.09.2021 по 31.03.2022 за просрочку исполнения обязательств по МКД по адресу: 

<

...> литер А (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения),

Согласно расчету истца размер неустойки за просрочку исполнения обязательств  период с 02.09.2021 по 31.03.2022 составляет 2 870 870 руб. 92 коп.

Суд, проверив расчет истца, признает его верным.

В соответствии с пунктом 7.3 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в том числе:

5 процентов цены настоящего Договора а случае, если цена настоящего Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по договору в полном объеме, истец начислил штраф в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп.

Суд, проверив расчет истца, признает его верным.

Пунктом 10.2 договора предусмотрено, что заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с взысканием с Генерального подрядчика причиненных убытков в следующих случаях:

систематическое (2 раза и более) нарушение Генеральным подрядчиком сроков оказания услуг и/или выполнения работ;

задержка  подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектной документацией, стандартами, кормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ,

неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком в соответствии с условиями договора;

аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам. которые оказывают влияние на безопасность Объекта капитального строительства или приостановка его действия на срок более 2 недель, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг  продолжительностью более 15 календарных дней по любому из многоквартирных домов;

нарушение срока замены банковской гарантии, установленного договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидация банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня, при продлении срока настоящего Договора, 

выявление Заказчиком после заключения договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме).

В силу пункта 10.3 договора заказчик принимает решение об одностороннем расторжении договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика. Заказчик обязан направить уведомление о расторжении договора не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора с Подрядчиком. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты договора, причины, послужившие основанием для расторжения договора, и документы, их подтверждаюшие.

В случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям. указанным в пункте 10.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов стоимости договора в течение 15 (пятнадцати) дней с даты расторжения договора с Подрядчиком. Указанный штраф уплачивается, помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда). (пункт 10.4 договора).

Материалами дела подтверждается, что обязательства по указанному договору в установленный договором срок (до 01.09.2021) подрядчиком не исполнены в полном объеме.

При таких обстоятельствах суд считает, что в данном случае у истца на основании пункта 10.2 договора возникло право на расторжение договора в одностороннем порядке.

Из материалов дела следует, что истцом направлено в адрес ответчика уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с расчетом сумм штрафных санкций в связи с просрочкой обязательств, неисполнением обязательств и односторонним расторжением договора, с указанием даты расторжения - 01 июля 2022 года.

В соответствии с пунктом 5.1 договора цена Договора составляет: 20 614 788 руб., включая НДС, в том числе по каждому из Объектов и видов работ, согласно цены договора в соответствии с аукционом Приложение № 3 к настоящему Договору. 

На основании пункта 10.4 договора истцом ответчику начислен штраф в размере     2 061 478 руб. 80 коп. (10% от цены контракта)

Суд, проверив расчет истца, считает его верным.

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. 

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11).

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением уплачена государственная пошлина в размере 58 753 руб.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой.

В связи с чем излишне уплаченная государственная пошлина в размере 5 938 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями  110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монерон» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по договору подряда от 28.12.2020 №57/1-СМР-2020 неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 2 870 870 руб. 92 коп., штраф в связи с неисполнением обязательств в размере 1 030 739 руб. 40 коп., штраф в связи с односторонним расторжением в размере 2 061 478 руб. 80 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 52815 руб.

Возвратить некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета уплаченную платежным поручением от 15.09.2022 №6298 государственную пошлину в размере 5938 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

 

Судья

А.Э. Измайлова