2085/2017-129791(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-14348/2017

г. Владивосток

11 сентября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2017 года. Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2017 года. 

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Жуковской Е.С.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества  "Энергоремонт" (ИНН 2526007115, ОГРН 1052541413671)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Владспецмонтаж" (ИНН  2538047923, ОГРН 1022501901894)  

о взыскании 1 935 598 рублей 20 копеек, при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены, 

установил:

акционерного общества "Энергоремонт" (далее истец, АО  "Энергоремонт") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с  исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью  "Владспецмонтаж" (далее ответчик, ООО "Владспецмонтаж") о  взыскании 1 935 598 рублей 20 копеек неустойки.  

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте  судебного разбирательства по делу не явились. В соответствии со статьей  156 АПК РФ судебное заседание проводится в их отсутствие.  

 Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком  обязательств по выполнению договора.  

Ответчик отзыв на иск, документально обоснованных возражений по  сумме исковых требований и доказательств оплаты задолженности не  представил, об уменьшении неустойки не заявил.  

 Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  установил следующее.  

13.07.2015 между истцом (Генподрядчик) и ответчиком  (Субподрядчик) заключен договор № СП-009-ДГК/ВСМУ-ВСМ (далее  договор), согласно которому Генподрядчик поручает, а Субподрядчик  принимает на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с  техническим заданием и ведомостью объемов работ (Приложение № 12) по  Техперевооружению действующих тепловых сетей г.Владивостока и  г.Артема с применением ОДК и внедрением технологий ППУ, в т.ч.  аварийных участков теплотрасс СП «Приморские тепловые сети» (Объект)  (пункт 1.1. договора).  

Срок выполнения работ установлен пунктом 4.1. договора, согласно  которому начальный срок: с момента заключения договора; окончание  работ: 30.11.2015.  

 Графиком производства работ и финансирования работ по объекту  «Техперевооружение теплотрассы УТ 1202А - УТ 1207 по ул. Борисенко»  предусмотрены сроки выполнения работ: начало - июль 2015 г., окончание  - октябрь 2015 г.  

 Графиком производства работ и финансирования работ по объекту  «Техперевооружение теплотрассы АТЭЦ-П-1 по ул. Центральная 1/1»  предусмотрены сроки выполнения работ: начало - июль 2015 г., окончание  - август 2015 г.  

 Графиком производства работ и финансирования работ по объекту  «Техперевооружение теплотрассы УТ 1421 - 1422 по ул. Южно- Уральская» предусмотрены сроки выполнения работ: начало - Июль 2015  г., окончание - октябрь 2015 г.  

 Семнадцатого августа 2015 года между сторонами было подписано  Дополнительное соглашение № 2 к Договору субподряда № СП-009- ДГК/ВСМУ-ВСМ и подписан График производства и финансирования  работ по объекту «Техперевооружение теплотрассы УТ 1113/2 - УТ 1009  по ул. Фокина». Срок выполнения работ: начало - сентябрь 2015 г.,  окончание - октябрь 2015 г.  

 Общая стоимость выполнения работ по договору, согласованная  Дополнительным соглашением № 2, составляет 33 799 824 рубля 42  копейки.  

 В соответствии с п. 6.1. Договора, приемка результатов работ  осуществляется в соответствии с Актами приемки выполненных работ  (форма КС-2), к которым прилагаются акты скрытых работ, акт на  передачу Генподрядчику материалов, образовавшихся в результате  демонтажных работ, табель учета рабочего времени, отчет об  использовании транспорта, а также Справкой о стоимости выполненных  работ (форма КС-3), подписанными обеими сторонами. Передача актов  Подрядчиком Заказчику производится ежемесячно до 20 -го числа  ежемесячно в соответствии с фактической готовностью.  

 Работы по всем объектам были завершены 28.12.2017 года, что  подтверждается Справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).  

 Исходя из пункта 10.8. договора, в случае нарушения сроков сдачи  работ, в том числе и поэтапных сроков выполнения работ, уплачивается  штраф в размере 1% от суммы неисполненных в срок обязательств за  каждый день просрочки.  

 В связи с тем, что претензия с требованием об оплате неустойки до  настоящего времени ответчиком не удовлетворена, истец обратился в суд с  настоящим заявлением.  

 Между сторонами сложились правоотношения по договору на  выполнение подрядных работ, которые подлежат регулированию нормами  главы 37 ГК РФ (подряд).  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В силу указанной статьи, а также условий спорного договора,  ответчик обязан выполнить работы, а истец их принять и оплатить.  

Как установлено пунктом 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда  указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).  

 Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение  как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения  работы.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением  случаев, предусмотренных законом.  

 Факт выполнения ответчиком подрядных работ и передача их  результата заказчику (окончание работ) с просрочкой подтвержден  

материалами дела, а именно справкой о стоимости работ и затрат от  28.12.2017.  

 В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения (статья 330 ГК РФ).  

 Материалами дела подтверждено ненадлежащее исполнение  ответчиком обязательств по спорному контракту, вследствие чего  заказчиком правомерно начислены 1 935 598 рублей 20 копеек неустойки  (пени) за просрочку выполнения работ, согласно представленному расчету  истца, который суд считает обоснованным и арифметически верным.  

 Поскольку доказательств оплаты гражданско-правовых санкций  ответчиком не представлено, суд считает, что требования истца о  взыскании 1 935 598 рублей 20 копеек неустойки (пени) подлежат  удовлетворению.  

 Судебные расходы по уплате государственной пошлины в силу  статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с ответчика.  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Владспецмонтаж" в пользу акционерного общества "Энергоремонт"  

1 935 598 рублей 20 копеек неустойки, а также 32 356 рублей расходов по  уплате государственной пошлины по иску.  

 Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную  силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А.