АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 226-56-17, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

А55-32857/2023

22 января 2024 года

г. Самара

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 22 января 2024 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батуриной Т.В.,

рассмотрев в судебном заседании 11 - 16 января 2024 года дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Интеркон" 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Трансаммиак"

о взыскании 393 195 986 руб. 99 коп.

 

при участии в заседании

от истца - ФИО2, доверенность от 01.07.2022, удостоверение адвоката,

ФИО3, доверенность от 01.07.2022, удостоверение адвоката,от ответчика - ФИО4, доверенность от 14.11.2023, диплом,

 

Установил

Общество с ограниченной ответственностью "Интеркон"  обратился  в арбитражный суд с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Трансаммиак" (с учетом процессуального правопреемства) о взыскании 411 334 998 руб. 66 коп., в том числе: 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности, 64 432 051 руб. 29 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 06.09.2023, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму 346 902 947 руб. 37 коп. за период с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

Истец представил ходатайство об уточнении исковых требований в части взыскания процентов, просил взыскать 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности,  46 293 039 руб. 62 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 06.09.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности. 

Согласно п.1 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Арбитражный суд в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принял уменьшение размера иска в части взыскании процентов. Считать иск заявленным о взыскании 393 195 986 руб. 99 коп., в том числе: 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности,  46 293 039 руб. 62 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности. 

Также истцом представлены дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика в судебном заседании пояснил, что с уточненным заявлением не ознакомлен, просил объявить перерыв для ознакомления.

В судебном заседании на основании ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв для ознакомления ответчика с уточненным исковым заявлением и представлением дополнительных документов до 16.01.2024 до 15.00.

После перерыва представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Представитель ответчика представил дополнения к отзыву с приложением контррасчета, которые приобщены материалам дела.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела и содержания искового заявления, Между ООО «Интеркон» (Подрядчик/Истец) и ПАО «ТРАНСАММИАК» (заказчик/ответчик) были заключены следующие договоры подряда, а именно: договор подряда № 3/20-И от 25.03.2020, договор подряда № 4/21-И от 21.04.2021.

Все вышеуказанные договоры являлись договорами подряда и их предметом являлось выполнение различных строительно-монтажных работ на объектах заказчика.

По заявленным договорам между сторонами сложились следующие обстоятельства:

1. По договору подряда № 3/20-И от 25.03.2020 (далее в настоящем пункте -договор) заказчик имеет перед подрядчиком задолженность за фактически выполненные работы, а именно:

В соответствии с п. 1.1 договора - подрядчик обязался выполнить комплекс работ по капитальному ремонту изоляции магистрального аммиакопровода Заказчика в объеме 85 ООО погонных метров трубопровода.

В соответствии с п. 3.5 договора (в редакции дополнительного соглашения № 6 от 05.03.2022 к договору) - Расчет за выполненные работы производится на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3, счетов-фактур установленного образца, а также актов возврата земельных участков правообладателям. Срок окончания последнего платежа не позднее 31.12.2022.

В соответствии с п. 4.3 договора - заказчик в течении 5-ти дней с момента получения от подрядчика акта выполненных работ рассматривает его, подписывает и направляет один экземпляр подрядчику, либо дает мотивированный отказ.

Между подрядчиком и заказчиком подписаны без замечаний следующие акты формы КС-2, справки формы КС-3:

-            КС-2 № 1/20с от 19.06.2020 (КС-3 № ФЗ-1/20с от 19.06.2020) на сумму 1 295 697,88 рублей;

-            КС-2 № 2/20с от 19.06.2020 (КС-3 № ФЗ-2/20с от 19.06.2020) на сумму 7 829 465,42 рублей;

-            КС-2 № 1/20в от 30.06.2020 (КС-3 № ФЗ-1/20в от 30.06.2020) на сумму 1 786 250,15 рублей;

-            КС-2 № 1/20п от 30.06.2020 (КС-3 № ФЗ-1/20п от 30.06.2020) на сумму 7 050 229,51 рублей;

-            КС-2 № 2/20в от 30.06.2020 (КС-3 № ФЗ-2/20в от 30.06.2020) на сумму 5 876 737,38 рублей;

-            КС-2 № 3/20с от 30.06.2020 (КС-3 № Ф3-3/20с от 30.06.2020) на сумму 11 897 262,35 рублей;

-            КС-2 № 2/20п от 31.07.2020 (КС-3 № ФЗ-2/20п от 31.07.2020) на сумму 36 266 938,28 рублей;

-            КС-2 № 3/20в от 31.07.2020 (КС-3 № Ф3-3/20в от 31.07.2020) на сумму 21 301 699,03 рублей;

-            КС-2 № 4/20в от 31.07.2020 (КС-3 № ФЗ-4/20в от 31.07.2020) на сумму 25 849 295,66 рублей;

-            КС-2 № 4/20с от 31.07.2020 (КС-3 № ФЗ-4/20с от 31.07.2020) на сумму 35 765 999,93 рублей;

-            КС-2 № 5/20с от 31.07.2020 (КС-3 № ФЗ-5/20с от 31.07.2020) на сумму 7 934 149,92 рублей;

-            КС-2 № 3/20п от 31.08.2020 (КС-3 № Ф3-3/20п от 31.08.2020) на сумму 28 112 790 рублей;

-            КС-2 № 5/20в от 31.08.2020 (КС-3 № ФЗ-5/20в от 31.08.2020) на сумму 24 362 318,62 рублей;

-            КС-2 № 6/20в от 31.08.2020 (КС-3 № Ф3-6/20в от 31.08.2020) на сумму 34 221 443,30 рублей;

-            КС-2 № 6/20с от 31.08.2020 (КС-3 № Ф3-6/20с от 31.08.2020) на сумму 45 543 555,07 рублей;

-            КС-2 № Акт-7/20в от 31.08.2020 (КС-3 № ФЗ-7/20в от 31.08.2020) на сумму 2 570 761,16 рублей;

-            КС-2 № 7/20с от 31.08.2020 (КС-3 № ФЗ-7/20с от 31.08.2020) на сумму 666 511,25 рублей;

-            КС-2 № 8/20с от 25.09.2020 (КС-3 № ФЗ-8/20с от 25.09.2020) на сумму 36 740 044,91 рублей;

-            КС-2 № 9/20с от 25.09.2020 (КС-3 № ФЗ-9/20с от 25.09.2020) на сумму 213 283,60 рублей;

-            КС-2 № 9/20в от 30.09.2020 (КС-3 № ФЗ-9/20в от 30.09.2020) на сумму 27 924 154,64 рублей;

-            КС-2 № 8/20в от 30.09.2020 (КС-3 № ФЗ-8/20в от 30.09.2020) на сумму 21 016 178,75 рублей;

-            КС-2 № Аюг-10/20в от 30.09.2020 (КС-3 № ФЗ-10/20в от 30.09.2020) на сумму 115 600,49 рублей;

-            КС-2 № Акт-11/20в от 30.09.2020 (КС-3 № ФЗ-11/20в от 30.09.2020) на сумму 11 672 358,71 рублей;

 

-            КС-2 № 12/20в от 14.10.2020 (КС-3 № ФЗ-12/20в от 14.10.2020) на сумму 18 571 671,36 рублей;

-            КС-2 № Акт-13/20в от 14.10.2020 (КС-3 № Ф3-13/20в от 14.10.2020) на сумму 5 770 440,25 рублей;

-            КС-2 № Акт-14/20в от 14.10.2020 (КС-3 № ФЗ-14/20в от 14.10.2020) на сумму 149 689,88 рублей.

Всего по договору подрядчик выполнил работы на сумму 420 504 527,50 рублей.

Заказчик произвел частичную оплату за выполненные работы по договору на расчетный счет подрядчика в размере 305 735 958,83 рублей на основании платежных поручений.

Также заказчик произвел частичную оплату за выполненные работы по договору путем выдачи подрядчику простых векселей на сумму 78 000 000 рублей, которые были выданы на основании следующих документов:

1)          31.08.2020 между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к Договору, в соответствии с которым часть денежных средств в размере 38 000 000 рублей заказчик оплачивает простыми векселями на данную сумму.

В этот же день, 31.08.2020, между заказчиком и подрядчиком подписаны акты приема-передачи простых векселей № ТА-20200831 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты не ранее 31.08.2022 и № ТА-20200832 на сумму 18 000 000 рублей со сроком оплаты не ранее 31.08.2022.

Данные векселя до настоящего времени не оплачены, прилагаются.

2)          09.09.2021 между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 5 к Договору, в соответствии с которым часть денежных средств в размере 250 000 000 рублей Заказчик оплачивает простыми векселями на данную сумму.

В этот же день, 09.09.2021, между Заказчиком и Подрядчиком подписаны Акты приема-передачи простых векселей:

-            № ТА-09022107 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 10.01.2022 по 20.01.2022, который в настоящий момент оплачен.

-            № ТА-09022108 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 10.03.2022 по 20.03.2022.

-            № ТА-09022109 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 10.04.2022 по 20.04.2022.

05.03.2022 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Соглашение о новации собственных векселей ПАО «ТРАНСАММИАК» № 594/22 в отношении простых векселей № ТА-09022108 на сумму 20 000 000 рублей и № ТА-09022109 на сумму 20 ООО ООО рублей, выданы новые векселя:

-            № ТА-05032201 от 05.03.2022 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 10.01.2023 по 20.01.2023, который в настоящий момент не оплачен;

-            № ТА-05032202 от 05.03.2022 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 10.02.2023 по 20.02.2023, который в настоящий момент не оплачен.

В этот же день, 05.03.2022, между сторонами подписаны Акты приема-передачи простых векселей № ТА-05032201 от 05.03.2022 и № ТА-05032202 от 05.03.2022.

Данные векселя № ТА-05032201 от 05.03.2022 и № ТА-05032202 от 05.03.2022 до настоящего времени не оплачены.

Учитывая произведенную заказчиком частичную оплату по договору на расчетный счет и путем выдачи векселей, его задолженность за выполненные подрядчиком работы на настоящий момент составляет:

420 504 527,50 - 305 735 958,83 - 78 000 000 = 36 768 568,67 рублей.

Условиями договора не предусмотрена ответственность заказчика за просрочку оплаты задолженности, в связи с чем за просрочку оплаты задолженности за выполненные работы подлежат применению положения ст. 395 ГК РФ, в соответствии с которыми проценты за пользования денежными средствами начисляются с даты, когда заказчик узнал об обязанности оплатить принятые работы (на основании п. 3.5 договора с даты подписания сторонами КС-2, КС-3).

По состоянию на 06.09.2023 проценты по ст. 395 ГК РФ по данному договору составляют: Сумма основного долга: 36 768 568,67 p., Сумма процентов: 8 381 365,01 p.

Таким образом, стоимость выполненных работ по договору подряда № 3/20-И от 25.03.2020 в размере 36 768 568,67 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 06.09.2023 в размере 8 381 365,01 рублей, с продолжением начисления процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму 36 768 568,67 рублей с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

2. По договору подряда № 4/21-И от 21.04.2021 (далее в настоящем пункте -договор) заказчик имеет перед подрядчиком задолженность за фактически выполненные работы, а именно:

В соответствии с п. 1.1 договора - подрядчик обязался выполнить комплекс работ по капитальному ремонту изоляции магистрального аммиакопровода Заказчика в объеме 85 000 погонных метров трубопровода.

В соответствии с п. 3.5 Договора - Расчет за выполненные работы производится на основании подписанных актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ формы КС-3, счетов-фактур установленного образца, а также актов возврата земельных участков правообладателям. Срок окончания последнего платежа не позднее 31.12.2022.

В соответствии с п. 4.3 Договора - Заказчик в течении 5-ти дней с момента получения от подрядчика акта выполненных работ рассматривает его, подписывает и направляет один экземпляр подрядчику, либо дает мотивированный отказ.

Между подрядчиком и заказчиком подписаны без замечаний следующие акты формы КС-2, справки формы КС-3:

-            КС-2 № 1/21с от 30.06.2021 (КС-3 № ФЗ-1/21с от 30.06.2021) на сумму 17 464 200,89 рублей;

-            КС-2 № 1/21 в от 31.07.2021 (КС-3 № ФЗ-1/21в от 31.07.2021) на сумму 11 689 146,70 рублей;

-            КС-2 № 1/21п от 31.07.2021 (КС-3 № ФЗ-1/21п от 31.07.2021) на сумму 19 639 156,82 рублей;

-            КС-2 № 2/21п от 31.07.2021 (КС-3 № ФЗ-2/21п от 31.07.2021) на сумму 4 921 469,41 рублей;

-            КС-2 № 2/21 в от 31.07.2021 (КС-3 № ФЗ-2/21в от 31.07.2021) на сумму 16 951 106,59 рублей;

-            КС-2 № 2/21с от 31.07.2021 (КС-3 № ФЗ-2/21с от 31.07.2021) на сумму 48 564 084,38 рублей;

-            КС-2 № 3/21в от 31.07.2021 (КС-3 № Ф3-3/21в от 31.07.2021) на сумму 17 089,57 рублей;

-            КС-2 № 3/21п от 31.08.2021 (КС-3 № Ф3-3/21п от 31.08.2021) на сумму 7 382 204,12 рублей;

-            КС-2 № 3/21с от 31.08.2021 (КС-3 № Ф3-3/21с от 31.08.2021) на сумму 47 342 533,80 рублей;

-            КС-2 № 4/21 в от 31.08.2021 (КС-3 № ФЗ-4/21в от 31.08.2021) на сумму 11 309 770,81 рублей;

-            КС-2 № 4/2In от 31.08.2021 (КС-3 № ФЗ-4/21п от 31.08.2021) на сумму 18 804 927,14 рублей;

-            КС-2 № 4/21с от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-4/21с от 21.09.2021) на сумму 36 492 582,43 рублей;

-            КС-2 № 5/21в от 31.08.2021 (КС-3 № ФЗ-5/21в от 31.08.2021) на сумму 16 712 862,73 рублей;

-            КС-2 № 5/21п от 02.09.2021 (КС-3 № ФЗ-5/21п от 02.09.2021) на сумму 324 369,58 рублей;

-            КС-2 № 5/21с от 27.10.2021 (КС-3 № ФЗ-5/21с от 27.10.2021) на сумму 54 721 493,86 рублей;

-            КС-2 № 6/21 в от 31.08.2021 (КС-3 № Ф3-6/21в от 31.08.2021) на сумму 3 015,96 рублей;

-            КС-2 № 7/21 в от 31.08.2021 (КС-3 № ФЗ-7/21в от 31.08.2021) на сумму 150 388,19 рублей;

-            КС-2 № 8/21в от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-8/21в от 21.09.2021) на сумму 15 050 893,63 рублей;

-            КС-2 № 9/21 в от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-9/21в от 21.09.2021) на сумму 120 638,35 рублей;

-            КС-2 № 10/21 в от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-10/21 в от 21.09.2021) на сумму 13 573 188,94 рублей;

-            КС-2 № 11/21в от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-11/21в от 21.09.2021) на сумму 1 342 677 рублей;

-            КС-2 № 12/21в от 21.09.2021 (КС-3 № ФЗ-12/21в от 21.09.2021) на сумму 2 221 266,13 рублей;

-            КС-2 № 13/21 в от 31.10.2021 (КС-3 № ФЗ-13/21 в от 31.10.2021) на сумму 17 439 372,64 рублей;

-            КС-2 № 14/21в от 31.10.2021 (КС-3 № ФЗ-14/21 в от 31.10.2021) на сумму 9 401 125,09 рублей;

-            КС-2 № 15/21в от 31.10.2021 (КС-3 № ФЗ-15/21в от 31.10.2021) на сумму 1 853 608,31 рублей;

-            КС-2 № 16/21в от 11.11.2021 (КС-3 № Ф3-16/21в от 11.11.2021) на сумму 28 363 808,80 рублей;

-            КС-2 № 17/21в от 11.11.2021 (КС-3 № ФЗ-17/21 в от 11.11.2021) на сумму 28 259 301,07 рублей

-            КС-2 № 18/21в от 11.11.2021 (КС-3 № ФЗ-18/21в от 11.11.2021) на сумму 18 095,76 рублей;

Всего по договору подрядчик выполнил работы на сумму 430 134 378,70 рублей.

Заказчик произвел частичную оплату за выполненные работы по Договору путем выдачи подрядчику простых векселей на сумму 120 000 000 рублей, которые были выданы на основании следующих документов:

09.09.2021 между заказчиком и подрядчиком заключено дополнительное соглашение № 1 к договору, в соответствии с которым часть денежных средств в размере 120 000 000 рублей Заказчик оплачивает простыми векселями на данную сумму.

В этот же день, 09.09.2021, между заказчиком и подрядчиком подписаны акты приема-передачи простых векселей:

-            № ТА-09022101 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 01.05.2022 по 31.07.2022;

-            № ТА-09022102 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 01.06.2022 по 31.08.2022;

-            № ТА-09022103 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в период с 01.07.2022 по 30.09.2022;

-            № ТА-09022104 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в периоде 01.08.2022 по 31.10.2022;

-            № ТА-09022105 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в периоде 01.09.2022 по 30.11.2022;

-            № ТА-09022106 от 09.09.2021 на сумму 20 000 000 рублей со сроком оплаты по предъявлению в периоде 01.10.2022 по 31.12.2022.

Данные векселя до настоящего времени не оплачены.

Учитывая произведенную заказчиком частичную оплату по договору путем выдачи векселей, его задолженность за выполненные Подрядчиком работы на настоящий момент составляет:

430 134 378,70 - 120 000 000 = 310 134 378,70 рублей.

Условиями договора не предусмотрена ответственность заказчика за просрочку оплаты задолженности, в связи с чем за просрочку оплаты задолженности за выполненные работы подлежат применению положения ст. 395 ГК РФ, в соответствии с которыми проценты за пользования денежными средствами начисляются с даты, когда Заказчик узнал об обязанности оплатить принятые работы (на основании п. 3.5 Договора с даты подписания сторонами КС-2, КС-3).

По состоянию на 06.09.2023 проценты по ст. 395 ГК РФ по данному Договору составляют: Сумма основного долга: 310 134 378,70 p., Сумма процентов: 56 050 686,28 р.

Таким образом, стоимость выполненных работ по Договору подряда № 4/21-И от 21.04.2021 в размере 310 134 378,70 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 06.09.2023 в размере 56 050 686,28 рублей, с продолжением начисления процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму 56 050 686,28 рублей с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

Общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом составляет 346 902 947,37 рублей (сумма основного долга по вышеуказанным Договорам), 64 432 051,29 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Заключенный между сторонами по делу договор по своей правовой природе является договором строительного подряда, правовое регулирование которого предусмотрено как общими нормами гражданского законодательства, так и нормами параграфов 1 и 3 главы 37 "Подряд" Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и изменение его условий не допускается.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком (исполнителем) результата работ заказчику.

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил взыскать 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности,  46 293 039 руб. 62 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 06.09.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму основного долга с 07.09.2023 по дату фактической оплаты задолженности.

Ответчик не оспорил факта наличия между истцом и ответчиком договорных отношений, предоставил в материалы дела отзыв с контррасчётами сумм неустойки. Указал, что в случае признания судом обоснованными доводов ответчика в части снижения размера основного долга в связи с невыполнением истцом части скрытых работ на сумму 19 774 218,03 рубля, размер процентов, рассчитанных истцом на основании ст. 395 ГК РФ не может составлять больше 17 673 368,88 рублей. И в случае признания судом не обоснованными доводов ответчика в части снижения размера основного долга в связи с невыполнением истцом части скрытых работ на сумму 19 774 218,03 рубля, размер процентов, рассчитанных истцом на основании ст. 395 ГК РФ не может составлять больше 18 675 734,02 рублей.

В силу п. 3 и 4 статьи 720 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

 Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.06.2012 N 17325/11, обязанность подрядчика своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные заказчиком при приемке работ и в течение гарантийного срока по договору, не является исключительной и не может толковаться как лишающая заказчика права требовать соразмерного уменьшения цены по договору. В то же время в силу пункта 4 статьи 720 ГК РФ заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Суд отмечает, что акты выполненных работ подписаны сторонами без замечаний, что лишает сторону ответчика ссылаться на указанные в отзыве недостатки. Более того недостатки работ были выявлены ответчиком самостоятельно, что указывает на их явный характер.

Ходатайства о назначении судебной экспертизы сторонами не заявлено.

С учетом всей совокупности представленных доказательств по делу, при наличии подписанных без замечаний актов выполненных работ, при отсутствии на момент рассмотрения дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие преступного умысла в действиях каких-либо лиц, суд считает, что у ответчика наступила обязанность по оплате задолженности на сумму 346 902 947 руб. 37 коп.

Исковые требования подлежат удовлетворению на сумму 346 902 947 руб. 37 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика 18 941 851 руб. 34 коп. процентов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму задолженности 346 902 947 руб. 37 коп., начиная с 07.09.2023 года, по день фактической оплаты задолженности.

Условиями Договора не предусмотрена ответственность Заказчика за просрочку оплаты задолженности, в связи с чем за просрочку оплаты задолженности за выполненные работы подлежат применению положения ст. 395 ГК РФ, в соответствии с которыми проценты за пользования денежными средствами начисляются с даты, когда Заказчик узнал об обязанности оплатить принятые работы (на основании п. 3.5 Договора с даты подписания сторонами КС-2, КС-3).

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 1 и п. 3) в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

По расчету истца проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму долга по договорам подряда составляют по состоянию на 06.09.2023 в размере 46 293 039 руб. 62 коп.

Суд проверив расчет процентов истца считает его не верным, поскольку п. 3.5. договоров (по договору № 3/20 от 25.03.2020 в редакции дополнительного соглашения № 6 от 05.03.2022) установлен срок окончания последнего платежа за выполненные работы – не позднее 31.12.2022, в этой связи начисление истцом процентов за более ранний период суд полагает не соответствующим условиям договоров.

Ссогласно расчету суда сумма процентов с 01.01.2023 по 06.09.2023 составляет 18 941 851 руб. 34 коп.

При указанных обстоятельствах с ответчика надлежит взыскать 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности, 18 941 851 руб. 34 коп. процентов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму задолженности 346 902 947 руб. 37 коп., начиная с 07.09.2023 года, по день фактической оплаты задолженности. В остальной части в иске следует отказать.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по оплате государственной пошлины и расходов на проведение экспертизы относятся на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

С учетом изложенного, с ответчика надлежит взыскать в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины на сумму 186 088 руб.

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Трансаммиак" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Интеркон" (ИНН 

<

***>) 365 844 798 руб. 71 коп., в том числе 346 902 947 руб. 37 коп. задолженности, 18 941 851 руб. 34 коп. процентов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму задолженности 346 902 947 руб. 37 коп., начиная с 07.09.2023 года, по день фактической оплаты задолженности, а также 186 088 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в иске отказать.

Решение  может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

 

Судья

 

/

ФИО1