Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-157066/2018

29 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  16 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  29 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" (адрес:  Россия 187110, г КИРИШИ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл КИРИШСКИЙ р-н, пр-кт ПОБЕДЫ 20, ОГРН:  1134727000770);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Евротех" (адрес:  Россия 192131, Санкт-Петербург, Бабушкина 79 лит. А пом. 13-Н, ОГРН: 1157847124071);

о взыскании 1503000.00

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 19.01.18,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Евротех" о взыскании 1 503 000 руб. 00 коп., составляющих: 1 330 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 133 000 руб. 00 коп. неустойки за период с 28.06.2018г. по 26.11.2018г., а также 40 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Определением от 20.02.19 года суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «Строительное Объединение» - Заказчик и ООО «ЕвроТех» - Подрядчик заключен Договор подряда №14/03 от 14.03.2018г. (далее - Договор). 

Пунктом 1.1 Данного договора Подрядчик принимает на себя обязательство по заданию Заказчика, на основании переданной Заказчиком проектной документации (шифр проекта 1001-ВК, шифр проекта 1001-ОВ1), выполнить следующие строительно-монтажные работы в полном объеме: монтаж систем внутреннего водоснабжения, водоотведения, отопления, теплоснабжения вентиляции, теплых полов (далее - Работа), на объекте: Реконструкция офисного комплекса «Бизнес-центр «Депо №1», по адресу: 

<

...>, лит. В, Пусковой комплекс Б».

Согласно п.2.3.1. Договора Заказчик осуществляет предварительную оплату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Заказчиком были переведены денежные средства:

- в размере 500 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 299 от 22.03.2018г.

- в размере 300 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 694 от 29.05.2018г.

- в размере 30 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 869 от 21.06.2018г.

- в размере 500 000 руб. 00 коп. платежным поручением № 898 от 27.06.2018г. 

а всего 1 330 000 руб. 00 коп.

Согласно п.3.1. Договора датой начала работ является 14.03.2018г. 

По информации Заказчика,  Подрядчик до настоящего  времени не приступил к выполнению работ.

В соответствии с п.4.7.1. Договора если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего Договора и будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет невозможным, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

ООО «Строительное Объединение» 06.08.2018г. направило в адрес ООО «ЕвроТех» претензию, в которой истец отказался от договора.

В соответствии с п.7.1 Договора, за нарушение сроков выполнения Работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного в срок объема Работы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы невыполненного в срок объема Работ. По состоянию на 26.11.2018г. неустойка составляет 133 000 руб. 00 коп.

Расходы на оплату услуг представителя обоснованы договором на оказание юридических услуг от 06.08.18, актом №1 от 06.08.18 о получении денежных средств в размере 40 000 руб. 00 коп., актом выпаленных работ от 10.12.18.

Судебные расходы суд считает соразмерными оказанным услугам.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евротех" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" 1 503 000 руб. 00 коп., из них: 1 330 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения и 133 000 руб. 00 коп. неустойки, а также 28 030 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине и 40 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.