Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-122672/2019

31 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  06 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  31 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи О.Н. Сергеевой

 при ведении протокола судебного заседания 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РМК" (адрес:  Россия 194223, Санкт-Петербург, ул.Курчатова 10/К/155, ОГРН:  );

ответчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА (адрес:  Россия 196105, г Санкт-Петербург, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

третье лицо:  

о взыскании 397 243 руб. 89 коп.

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 01.10.19

- от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.12.19

установил:

ООО "РМК" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 354 981 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ по контракту №4/2018-ЭА от 01.03.18, 41 262 руб. 89 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, 40 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя, обязать ответчика подписать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости по форме КС-3, журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, передать по почте России заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

Ответчик иск отклонил по мотивам, изложенным в отзыве.

Определением от 20.01.20 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен контракт №4/2018-ЭА от 01.03.18 на выполнение работ по ремонту помещений медицинского пункта. 

Общая стоимость работ составляет 354 981 руб. 00 коп.

Срок выполнения работ - в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта.

Истец-подрядчик выполнил работы в полном объеме.

После устранения замечаний сторонами был подписан акт приемки объекта в эксплуатацию от 21.03.18.

Оплата ответчиком до настоящего времени не произведена.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.04.18 по 08.11.19 в сумме 41 262 руб. 89 коп. 

Обязание заказчика подписывать акты формы КС-2, КС-3 законом не предусмотрено, поэтому в этой части иск удовлетворению не подлежит.

Расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб. 00 коп. обоснованы представленными документами.

С учетом двух судебных заседаний и частичного удовлетворения исковых требований, указанные расходы подлежат уменьшению до 35 000 руб. 00 коп.  

Руководствуясь статьями 309, 310, 395, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия городского электрического транспорта в пользу общества с ограниченной ответственностью "РМК" 396 243 руб. 89 коп, из них: 354 981 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ и 41 262 руб. 89 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 10 924 руб. 88 коп. расходов по оплате государственной пошлины и 35 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг представителя

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                    Сергеева О.Н.