АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. УфаДело № А07-17990/18

13.12.2018

Резолютивная часть решения объявлена 29.10.2018

Полный текст решения изготовлен 13.12.2018

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Журавлевой М.В., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

ООО "БАШКИРЭНЕРГО" (ИНН: 0277071467, ОГРН: 1050204504558) 

к ООО МТПК "МАШТЕХРЕСУРСЫ" (ИНН: 0276037311, ОГРН: 1020202873558)

о взыскании 10 512 427 руб. 85 коп.

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2 по доверенности №119-1/07-95

от ответчика – ФИО3, директор, выписка из ЕГРЮЛ, ФИО4, доверенность от 10.08.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирэнерго»  (далее – ООО «Башкирэнерго», истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью Межрегиональная торгово-промышленная компания «Маштехресурсы» (далее - ООО МТПК «Маштехресурсы», ответчик)  о взыскании:

1. Суммы основного долга по договору № 4-15560 от 31.07.2012г. в размере: 2 740416 руб. 82 коп. (два миллиона семьсот сорок тысяч четыреста шестнадцать рублей 82 коп. включая НДС 18%).

2. Договорной неустойки за нарушение сроков оплаты по договору № 4-15560 от 31.07.2012 г. в размере 3 996 975 руб. 81 коп. (три девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят пять рублей  81 коп).

3. Суммы основного долга по договору № 10-000937 от 13.03.2014г. в размере: 630 983 руб. 67 коп. (шестьсот тридцать тысяч девятьсот восемьдесят три руб. 82 коп.  включая НДС 18%).

4. Договорной неустойки за нарушение сроков оплаты по договору № 10-000937 от 13.03.2014 г. в размере 3 049 047 руб. 67 коп. (три миллиона сорок девять тысяч сорок семь рублей 67 коп).

5. Суммы основного долга по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г. в размере: 22 335 руб. 69 коп. (двадцать две тысячи триста тридцать пять руб. 69 коп. включая НДС 18%).      

6. Договорной неустойки за нарушение сроков оплаты по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г. в размере 703 651 руб. 86 коп. (семьсот три тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 86 коп).

7. Суммы возмещения расходов по уплате госпошлины при подаче иска в суд в размере 75562 рублей, (семьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два руб. 00 коп.)

В судебном заседании истец поддержал исковые требования. 

Ответчик представил отзыв, наличие основного долга не отрицает, считает неверным расчет неустойки, представил контррасчет, заявил о снижении неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Между ООО «Башкирские распределительные электрические сети» (далее - ООО «Башкирэнерго») и ООО МТПК «Маштехресурсы» заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4-15560 от 31.07.2012 г., № 10-000937 от 13.03.2014 г., № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г.

ООО «Башкирэнерго» является сетевой организацией, оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Башкортостан и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

ООО «Башкирэнерго» осуществляет технологическое присоединение на основании «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,  утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004г. (далее по тексту - Правила).

Действие Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) услугами по передаче электрической энергии является комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов.

На основании пункта 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно пункту 6 Правил Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

1. На основании заявки ООО МТПК «Маштехресурсы» от 23.05.2012г. № 4713 между ООО «БашРЭС» (сокращенное наименование до 01.02.2013г.) ныне ООО «Башкирэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 4-15560 от 31.07.2012г. (далее -Договор), выданы технические условия № 146/1-135-4199-666/спп от 26.06.2012г.

В соответствии с данным договором ООО «Башкирэнерго» (Истец) приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: многоэтажный жилой дом литер 2 с отдельно стоящей подземной автостоянкой литер 7, в квартале, ограниченном ул. Свободы, Черниковской, Кремлевской и Первомайской в Калининском районе, расположенного в н.п.Уфа, с максимальной мощностью 500 кВт, II категории надежности.

В соответствии с пунктом 8 договора ООО МТПК «Маштехресурсы» ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

Согласно пункту 10 договора стоимость услуг по технологическому присоединению, определяется в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам от 16.03.2011г. № 39 и составил: 8 581 974 рублей 80 коп. (восемь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре рубля 80 копеек), включая НДС 18% - 1 309 114 рублей 80 коп. (один миллион триста девять тысяч сто четырнадцать рублей 80 копеек).

По пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем (ответчиком) в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 858 197 руб. 48 коп. (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто девяносто семь рублей 48 копеек), в том числе НДС 18% - 130911, руб. 48 коп. (Сто тридцать тысяч девятьсот одиннадцать рублей 48 копеек) вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2574592 руб. 44 коп. (Два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто два рубля 44 копейки), включая НДС 18% - 392 734 рублей 44 коп. (Триста девяносто две тысячи семьсот тридцать четыре рубля 44 копейки) вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1716394 руб. 96 коп. (Один миллион семьсот шестнадцать тысяч триста девяносто четыре рубля 96 копеек), включая НДС 18% - 261 822 руб. 96 коп. (Двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два рубля 96 копеек) вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г)30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 2 574 592 руб. 44 коп. (Два миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто два рубля 44 копейки), включая НДС 18% - 392 734 руб. 44 коп. (Триста девяносто две тысячи семьсот тридцать четыре рубля 44 копейки) вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта оразграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 858 197 рублей 48 коп. (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто девяносто семь рублей 48 копеек), включая НДС 18% - 130 911 руб. 48 коп. (Сто тридцать тысяч девятьсот одиннадцать рублей 48 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Согласно пункту 12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

14.01.2014г. ООО МТПК «Маштехресурсы» представило в ООО «Башкирэнерго» уведомление о выполнении технических условий № 1255-2 от 14.01.14г. на максимальную мощность 203,3 кВт. Электроустановка была введена в эксплуатацию, разрешение на включение выдано 22.04.14г.

Сторонами подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения от 05.06.2014г. № 1255-2 на сумму 3 489 430 руб. 95 коп.

10.12.2014 г. ООО МТПК «Маштехресурсы» представило уведомление о выполнении технических условий № 1255-3 от 10.12.14г. на максимальную мощность 256,7 кВт. Электроустановка была введена в эксплуатацию, разрешение на включение выдано 29.12.14г.

Письмом от 15.02.2017г. № 56 ООО МТПК «Маштехресурсы» просило ООО «Башкирэнерго» уменьшить отпуск мощности на 40 кВт.

Дополнительным соглашением № 17-10-4713-03-03 от 05.04.2017г. по договору № 4-15560 от 31.07.2012 сетевая организация по уменьшила мощность на 40 кВт. Выдала новый график платежей , технические условия № 17-10-4713-04-03-Донска от 02.03.2017г. на максимальную мощность 256,7 кВт.

07.04.2017г. сторонами подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон, а также акт об осуществлении технологического присоединения от № 15-10-4713-16-02 на сумму 4 405 985руб.87 коп. с максимальной мощностью 256,7 кВт..

Всего разрешенная мощность составила 460 кВт и стоимость услуги сетевой организации с учетом уменьшения мощности оставила общая сумма 7 895 416 руб. 82 коп. из них было оплачено на сумму 5 155 000 руб. (пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч: рублей), что подтверждается платежными поручениями от 14.02.2013г. № 5 на сумму 400 000 руб. 00 коп., от 03.06.2013 № 262 на 3 035 000 руб. 00 коп., от 27.08.2013г. № 411 на 1 720 000 руб. 00 коп.

По графику оплаты остаток неоплаченной суммы в размере 2 740 416 руб. 82 коп. был распределен следующим образом:

№п/п

Дата оплаты

Сумма платежа

в т.ч. НДС 18%

1

оплачено 14.02.2013

400 000

61 016,95

2

оплачено 03.06.2013

3 035 000

462 966,08

3

оплачено 27.08.2013

1 720 000

262 372,87

4

30.03.2017

108 611,24

16 567,82

5

30.04.2017

877 268,54

133 820,62

6

30.05.2017

877 268,54

133 820,62

7

30.06.2017

877 268,5

133 820,66

Всего

7 895 416,82

1 204 385,62

Заключенный между сторонами договор № 4-15560 от 31.07.2012г. по своей правовой природе является договором технологического присоединения.

Соответствующая правовая позиция относительно квалификации такого рода договоров и вложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 10.07.2012 N 2551/12.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств ГК РФ, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах:, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 ФЗ "Об электроэнергетике" и в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям  и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. N 861 (далее - Правила № 861). Положения указанных нормативных актов, среди прочего, регламентируют процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации и определяют требования, предъявляемые к договорам об осуществлении технологического присоединения и порядку их исполнения.

В пункт  7 Правил N 861 установлена процедура технологического присоединения, в соответствии с которой завершающим этапом этой процедуры является составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

ООО «Башкирэнерго» предусмотренные договором обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО МТПК «Маштехресурсы» выполнило в полном объеме, по результатам чего сторонами были подписаны акты об осуществлении технологического присоединения № 1255-2 от 05.06.2014г. (на максимальную мощность 203,3кВт на сумму 3 489 430 руб. 95 коп.), № 15-10-4713-16-02 от 07.04.2017г. (на максимальную мощность 256,7 кВт, на сумму 4 405 985 руб. 87 коп.) и акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственно ли сторон № Б/н от 25.12.2013 г., № 15-10-4713-12-02 от 07.04.2017г.

Из содержания акта об оказании услуг № 4565 от 07.04.2017 г.  следует, что истцом оказаны услуги по осуществлению технологического присоединения по договору № 4-15560 от 31.07.2012г. на сумму 4 405 985 руб.87коп. (в том числе НДС 18%) полностью и в срок. Ответчик  претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Ответчиком до настоящего времени платежи за оказанные услуги произведены не в полном объеме. Так по состоянию на 25.06.2018г. за ответчиком по договору числится задолженность в размере 2 740 416 руб. 82 коп. (два миллиона семьсот сорок тысяч четыреста  шестнадцать рублей 82 коп. включая НДС 18%).

От подписания Акта сверки взаимных расчетов, составленного истцом, ответчик уклонился.  

Поскольку сумма задолженности не была уплачена ответчиком своевременно, в адрес ООО МТПК «Маштехресурсы» были направлены претензии №10/146/2-4-15560 от 12.04.2017г. и №УГЭС/10.3-2854 от 24.05.2018г. с требованием исполнения ответчиком своих обязательств по уплате задолженности. Претензии оставлены ответчиком без ответа, требование об уплате суммы задолженности - без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения  своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской  Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Договор ТП заключен 31.07.2012г.  В соответствии с Указанием Банка России от 23.12.2011 N 2758-У «О размере ставки рефинансирования банка России» размер ставки рефинансирования на дату заключения договора составила 8%.

Количество дней просрочки за период с 31.03.2017г. по 25.06.2018г. составляет 452 дня, т.к. 31.03.2017г.- дата начала нарушения обязательств по оплате, возникшая по истечении дня оплаты 30.03.2017г. по графику платежей приложение № 2 дополнительного соглашения № 17-10-4713-03-03 от 05.04.2017г. Сумма договора составила -7 895 416 руб.82 коп. Общая задолженность составила -  2 740 416 руб. 82 коп.

Расчет неустойки: 0,014*8/100*7 895 416, 82 * 452 = 3 996  975 руб. 81 коп. (договорная неустойка)

Итого общая сумма требований по договору № 4-15560 от 31.07.2012г. составила 2 740 416 руб. 82 коп, (основной долг) + 3 996 975 руб. 81 коп, (договорная неустойка) == 6 737 392 руб. 63 коп.

 2.  Задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-000937 от 13.03.2014г.

На основании заявки ООО МТПК «Маштехресурсы» от 27.06.2013г. № 5539 ООО «Башкирэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-000937 от 13.03.2014г. (далее -Договор).

В соответствии пунктом 1 Договора ООО «Башкирэнерго» (Истец) приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) проектируемая ТП-6/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая го: проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 460 кВт; - категория надежности 2; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; -максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункта 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: многоэтажный жилой дом литер 3 в квартале, ограниченном ул. Свободы, Черниковской, Кремлевской и Первомайской в Калининском районе ГО г.Уфа РБ.

Технические условия № 10-146/ПОУГЭС-Северн-335 530-5539 от 16.09.2013г. являются неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с пунктом 8 договора ООО МТПК «Маштехресурсы» (Ответчик) обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том: числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую» организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

направить в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок, включая вводно-распределительные устройства;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам № 805 от 29.12.2012г. и составил: 2 273 139 рублей 97 коп. (Два миллиона двести семьдесят три тысячи сто тридцать девять рублей 97 копеек), включая НДС 18% - 346750 рублей 16 коп. (Триста сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 16 копеек).

Пунктом 11 договора согласовано внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем (ответчиком) в следующем порядке:

а)10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 227 314 рублей (Двести двадцать семь тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18%

-34675 руб. 02 коп. (Тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 02 копейки) вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б)30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 681941,99 рублей(Шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок один рубль 99 копеек), в том числе НДС 18% -104025,05 рублей (Сто четыре тысячи двадцать пять рублей 05 копеек) вносятсяв течение 60 дней со дня заключения договора;

в)20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 454627,99 рублей (Четыреста пятьдесят четыре тысячи двадцать семь рублей 99 копеек), в том числе НДС18% - 69350,03 рублей (Шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят рублей 03 копейки) вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г)30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 681941,99 рублей (Шестьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок один рубль 99 копеек), в том числе НДС 18% -104025,05 рублей (Сто четыре тысячи двадцать пять рублей 05 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей;

д)10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 227 314 рублей  (Двести двадцать семь тысяч триста четырнадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% -34675 руб. 02 коп. (Тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 02 копейки)вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

Согласно пункту 12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

ООО МТПК «Маштехресурсы» уведомлением № 15-10-5539-10-02 от 02.11.2015г. уведомило ООО «Башкирэнерго» о выполнении технических условий - монтаж электроустановки в соответствии с договором № 10-000937 от 13.03.2014г. об осуществлении технологического присоединения, в объеме технических условий № 10-146/ПО УГЭС-Север-335 530 от 14.02.2014г. Электроустановка была введена в эксплуатацию, разрешение на включение выдано 01.12.2015 г.

Сторонами подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения от 02.12.2015г. № 15-10-5539-16-02 на сумму 850945,01 рублей.

ООО МТПК «Маштехресурсы» представила в ООО «Башкирэнерго» уведомление о выполнении технических условий № 16-10-5539-10-03 от 23.12.2016г. на максимальную мощность 287,8 кВт.

Сторонами подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения от 14.02.2017г. № 17-10-5539-16-03 на сумму 1422 194,96 рублей.

Ответчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Всего разрешенная мощность составила 460 кВт и стоимость услуги сетевой организации составила 2 273 139,97 рублей, из них было оплачено    1 363 883,98 рублей, что подтверждается следующими платежными поручениями:

- № 103 от 26.03.2014г. на сумму 227 314 руб.;

- № 534 от 03.12.2014г. на сумму 300 000 руб.;

- № 582 от 23.12.2014г. на сумму 381 941,99 руб.;

- № 398 от 14.10.2015г. на сумму 254 627,99 руб.;

- № 29 от 01.12.2015г. на сумму 200 000 руб.

21.02.2017 г. в адрес ООО МТПК «Маштехресурсы» была направлена претензия №10/146/2-10-000937 с просьбой погасить задолженность в размере 909255,99 рублей.

Актом о зачете взаимных требований (взаимозачете) от 20.03.2017 г. сторонами установлена сумма задолженности в размере 909 255,99 руб. и произведен зачет взаимных требований на основании статьи 410 ГК РФ, оставшаяся задолженность по договору № 10-000937 от 13.03.2014г. в размере 909 255,99 руб. была уменьшена на сумму 278 272,32 руб.

Итого сумма задолженности по договору № 10-000937 от 13.03.2014 г. по состоянию на момент обращения в Арбитражный суд РБ составляет - 630 983,67 рублей.

Поскольку сумма задолженности не была уплачена ответчиком своевременно, в адрес ООО МТПК «Маштехресурсы» была направлена претензия № УГЭС/10.3-10-000937 от 23.06.2017г. с требованием исполнения ответчиком своих обязательств по уплате задолженности в размере 630 983,67 рублей и суммы договорной неустойки. Данное письмо оставлено ответчиком без ответа, требование об уплате суммы задолженности - без удовлетворения.

В соответствии с пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Договор ТП заключен 13.03.2014 г. Размер ставки рефинансирования на дату заключения договора составила 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У).

Дата начала нарушения обязательств по оплате, возникшая по истечении 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения - 18.12.2015г.

Расчет неустойки:

0,014 * 8,25/100 * 2 273 139,97 * 921 = 2 418 064 рублей (договорная неустойка с 18.12.2015г. по 25.06.2018г.)

Итого общая сумма требований по договору 10-000937 от 13.03.2014 г. составила 630 983,67 рублей (основной долг) + 2 418 064 руб. (договорная неустойка) = 3 049 047 руб. 67 коп.

3.     Задолженность по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015г.

На основании заявки ООО МТПК «Маштехресурсы» от 01.04.2015 г. № 15-10-30761 ООО «Башкирэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г. (далее -Договор), выданы технические условия № 15-10-30761-04-01 от 10.04.2015г.

В соответствии пунктом 1 Договора ООО «Башкирэнерго» (Истец) приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) проектируемая ТП-6/0,4 кВ, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: - максимальная мощность присоединяемых: энергопринимающих устройств 460 кВт; - категория надежности 3; - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; -максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно пункта 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: многоэтажный жилой дом расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Калининский р-н, г.Уфа, на территории квартала, ограниченного улицами Свободы, Черниковской, Кремлевской, Первомайской.

Технические условия № 15-10-30761-04-01-Северн от 10.04.2015 г. являются неотъемлемой частью Договора.

В соответствии с пунктом 8 договора ООО МТПК «Маштехресурсы» ответчик обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности     электрических     сетей,     акт     разграничения     эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам 18.12.2014г. № 853 и составил: 5 743 526,32 рублей (Пять миллионов семьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 32 копейки), в том числе НДС 18% - 876131,13 рублей (Восемьсот семьдесят шесть тысяч сто тридцать один рубль 13 копеек).

По пункту 11 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем (ответчиком) в следующем порядке:

а)10 процентов платы за технологическое присоединение в размере      574 352,63 рублей (Пятьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 63 копейки), в том числе НДС 18% - 87613,11 рублей (Восемьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать рублей 11 копеек) вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 723 057,9 рублей (Один миллион семьсот двадцать три тысячи пятьдесят семь рублей 90 копеек), в том числе НДС 18% - 262839,34 рублей (Двести шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять рублей 34 копейки) вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в)20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1148705,26 (Один миллион сто сорок восемь тысяч семьсот пять рублей 26 копеек), в том числе НДС18%-175226,23 рублей (Сто семьдесят пять тысяч двести двадцать шесть рублей 23 копейки) вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г)30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 1 723 057,9 рублей (Один миллион семьсот двадцать три тысячи пятьдесят семь рублей 90 копеек), в том числе НДС 18% - 262839,34 рублей (Двести шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать девять рублей 34 копейки) вносятся в течение 10 дней со дня фактического присоединения;

д)10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 574352,63 рублей (Пятьсот семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 63 копейки), в том числе НДС 18% - 87613,11 рублей (Восемьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать рублей 11 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

07.06.2017.г. выдано разрешение на включение, электроустановка была введена в эксплуатацию. Ответчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Сторонами подписан акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения от 03.07.2017г. № 17-10-30761-16-01 на сумму 1 765 862,01 рублей, из них было оплачено 1 743 526,32 рублей, что подтверждается  платежным поручением № 5 07 от 15.11.2016г.

24.04.2018г. в адрес ООО МТПК «Маштехресурсы» была направлена претензия № УГЭС/10.3-2170 с просьбой погасить задолженность в размере 22 335,69 рублей и договорную неустойку. Претензия оставлена ответчиком без ответа, требование об уплате суммы задолженности - без удовлетворения.

Итого сумма задолженности по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015г. по состоянию на момент обращения в Арбитражный суд РБ составляет - 22335,69 рублей.

В соответствии с пунктом 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Договор ТП заключен 08.05.2015 г. Размер ставки рефинансирования на дату заключения договора составила 8,25% (Указание Банка России от 13.09.2012 № 2873-У).

16.07.2017г. - дата начала нарушения обязательств по оплате, возникшая по истечении 10 дней со дня подписания акта об оказании производственных услуг, АТП от 03.07.2017г.

Расчет неустойки:

0,014 * 8,25/100 * 1765862,01 * 345 = 703651,86 рублей (договорная неустойка с 16.07.2017г. по 25.06.2018г.)

Всего: 813 634,26 руб.

Итого общая сумма требований по договору 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015г, составила 22 335,69 рублей (основной долг) + 703 651,86 руб. (договорная неустойка) – 725 987,55 рублей.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями: обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ).

Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).

Перечисленные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик наличие основного долга в заявленной сумме признал, вместе с тем, указал на неверный алгоритм расчета неустойки, представил контррасчет, также указал на несоразмерность неустойки при правильном ее расчете последствиям нарушения обязательства и просит применить ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования   подлежащими удовлетворению частично. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики)»

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации),

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания.

Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений статей 1, 421 и 422 ГК РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон. В данном случае пунктом 16 Правил N 861 и пунктом 11 договора помимо платежей после фактического присоединения и составления соответствующих документов предусмотрены промежуточные (авансовые) платежи заявителя.

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон.

Закон N 35-ФЗ, наделяя Правительство Российской Федерации правом устанавливать ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, обратившихся за технологическим присоединением, при просрочке внесения авансовых платежей.

Указанная в подпункте "в" пункта 16 Правил N 861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа не имеется и в пункте 17 заключенных между сторонами договоров. 

Согласно п. 17 договоров в случает нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки. 

С учетом изложенного положения названного пункта договора подлежат истолкованию в пользу заказчика услуг как не допускающие начисление неустойки на авансовые платежи.

Ответчиком представлен следующий контррасчет неустойки.

 

1.  Стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому по договору №4-15560 от 31.07.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения №17-10-4713-03-03 от 05.04.2017 г.), составляет 7 895 416,82 руб. Оплата по указанному договору произведена ответчиком частично в сумме 5 155 000 руб., не оплачена сумма в размере 2 740 416,82 руб.

Факт оказания услуг подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения:

- №1255-2 от 05.06.2014 г. на сумму 3 489 430,95 руб. (оплата произведена в полном объеме);

- №15-10-4713-16-02 от 07,04.2017 г. на сумму 4 405 985,87 руб. (оплата произведена частично в сумме 1 665 569,05 руб.).

Таким образом, истец исполнил свои обязательства в полном объеме 07.04.2017 г. (дата осуществления технологического присоединения в соответствии с актом №15-10-4713-16-02) и только после этой даты допускается начисление неустойки.

Просрочка исполнения ответчиком обязательства по оплате услуг на момент подачи искового заявления составляет 443 дня (с 08.04.2017 г. по 25.06.2018 г.).

Кроме того, специфическими чертами неустойки являются в том числе ее "компенсационная функция - направленность на возмещение затрат потерпевшего и предупредительная функция: должник, опасаясь неблагоприятных последствий, исполняет обязательство надлежащим образом". Очевидно, что сумма неустойки сетевой организации, рассчитанная в соответствии с Правилами технологического присоединения, нивелирует компенсационную и предупредительную функцию договорной неустойки. Существенная часть цены договора оплачена и начисление неустойки исходя из всей суммы договора не отвечает компенсационному характеру неустойки.

Учитывая, что задолженность по оплате услуг сетевой организации составляет 2 740 416,82 руб., именно на эту сумму и должна начисляться неустойка. В таком случае неустойка будет рассчитана в следующем порядке:

2 740 416,82 руб. * 0,014 * 8% * 443 дня  = 1 359 685,21 руб.

2.Стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому по договору №10-000937 от 13.03.2014 г., составляет 2 273 139,97 руб. Оплата по указанному договору произведена ответчиком частично в сумме 1 363 883,98 руб. (путем перечисления денежных средств), в сумме 278 272,32 руб. (путем проведения зачета взаимных требований от 20.03.2017 г.),  не оплачена сумма в размере 630 983,67 руб.

Факт оказания услуг подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения:

- №15-10-5539-16-02 от 02.12.2015 г. на сумму 850 945,01 руб. (оплата произведена в полном объеме);

- №17-10-5539-16-03 от 14.02.2017 г. на сумму 1 422 194,96 руб. (оплата произведена частично в сумме 512 938,97 руб.).

Таким образом, истец исполнил свои обязательства в полном объеме 14.02.2017 г, (дата осуществления технологического присоединения в соответствии с актом №17-10-5539-16-03) и только после этой даты допускается начисление неустойки.

Просрочка исполнения ответчиком обязательства по оплате услуг на момент подачи искового заявления составляет 495 дней (с 15.02.2017 г. по 25.06.2018 г.).

Существенная часть цены  договора оплачена и начисление неустойки исходя из всей суммы договора не отвечает компенсационному характеру неустойки.

Учитывая, что задолженность по оплате услуг сетевой организации составляет 630 983,67 руб., именно на эту сумму и должна начисляться неустойка. В таком случае неустойка будет рассчитана в следующем порядке:

630 983,67 * 0,014 * 8,25% * 495 дней = 360 749,14 руб.

3.Стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому по договору №15-10-30761-02-01 от 08.05,2015 г. (в редакции дополнительного соглашения №17-10-30761-03-03 от 30.06.2017 г.), составляет 5 567 059,68 руб. Услуги оказаны на сумму 1 765 862,01 руб. Оплата по указанному договору произведена ответчиком частично в сумме   1 743 526,32 руб. (путем перечисления денежных средств), не оплачена сумма в размере 22 335,69 руб.

Факт оказания услуг подтверждается актом об осуществлении технологического присоединения:

- №17-10-30761-16-01 от 03.07.2017 г. на сумму 1 765 862,01 руб. (оплата произведена частично в сумме 1 743 526,32 руб.).

В соответствии с условиями договора №15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г., в редакции дополнительного соглашения №17-10-30761-03-03 от 30.06.2017 г., сторонами согласован следующий график перечисления денежных средств за оказываемые Сетевой организацией услуги по присоединению к электрическим сетям;

Первый платеж: 1 743 526,32 руб. – 15.11.2016 г. (оплачен);

Второй платеж: 483 297,55 руб. - 60 дней от даты подписания дополнительного соглашения (не оплачен).

Дополнительное соглашение подписано 30.06.2017 г., соответственно, второй платеж должен быть произведен 29.08.2017 г. Учитывая, что услуги оказаны на сумму 1 765 862,01 руб., оплата по договору произведена в сумме 1 743 526,32 руб., неоплаченный остаток 22 335,69 руб., ответчик не оплатил 22 335,69 руб. и просрочка исполнения обязательства возникла с 30.08.2017 г.

Просрочка исполнения ответчиком обязательства по оплате услуг на момент подачи искового заявления составляет 299 дней (с 30.08.2017 г. по 25.06.2018 г.).

Существенная часть цены договора оплачена и начисление неустойки исходя из всей суммы договора не отвечает компенсационному характеру неустойки.

Учитывая, что задолженность по оплате услуг сетевой организации составляет 22 335,69 руб., именно на эту сумму и должна начисляться неустойка. В таком случае неустойка будет рассчитана в следующем порядке;

22 335,69 руб. * 0,014 * 8,25% * 299 дней  =  7 713,52 руб.

Таким образом, общая задолженность ООО МТПК «Маштехресурсы» перед ООО «Башкирэнерго» составляет:

- 3 393 736,18 руб. -   основной долг; 

- 1 728 147,87 руб.-  неустойка.

 На основании приведенных норм права суд соглашается с расчетом неустойки, представленным ответчиком.  Правильность алгоритма представленного ответчиком расчета неустойки согласуется с позицией, изложенной Верховным судом Российской Федерации в определении от 19.01.2018 г. по делу № 310-ЭС17-11570. 

Сумму основного долга в размере  3 393 736,18 руб., в том числе    

- по договору № 4-15560 от 31.07.2012 г.: 2 740 416 руб. 82 коп. 

- по договору № 10-000937 от 13.03.2014 г.: 630 983 руб. 67 коп.

- по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г.: 22 335 руб. 69 коп. 

ответчик признает.

 В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При таких обстоятельствах суд  не исследует обстоятельства наличие долга в заявленной сумме и удовлетворяет требование о взыскании суммы долга в заявленном размере.

Ответчиком также заявлено о снижении неустойки на основании положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Основанием для применения ст. 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность по доказыванию несоразмерности заявленной истцом суммы неустойки последствиям ненадлежащего исполнения обязательства в данном случае лежит на ответчике.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление от 24.03.2016 N 7), если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ) (пункт 77 постановления от 24.03.2016 N 7).

Критериями для установления несоразмерности могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение размера неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительное неисполнение обязательства и другие.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", правила о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ применяются также в случаях,  когда неустойка определена законом. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 73 постановления от 24.03.2016 N 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика; несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГК РФ, ч. 1 ст. 65 АПК РФ).

В п. 69 названного Постановления разъяснено, что подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Из Определения Конституционного Суда Российской Федерации N 263-0 от 21 декабря 2000 г. следует, что положения п.  1 ст. 333 ГК РФ содержат также обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не возможного размера ущерба. Следовательно, при определении размера неустойки должны учитываться законные интересы обеих сторон по делу.

Возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.) (пункт 74 постановления от 24.03.2016 N 7).

По смыслу статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшение неустойки является правом суда, и наличие оснований для ее снижения и размер подлежащей взысканию неустойки в результате ее снижения определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, исходя из собранных по делу доказательств.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Исследовав обстоятельства дела, суд находит возможным применить ст. 333 Гражданского кодекса РФ и снизить неустойку:

- по договору № 4-15560 от 31.07.2012 г. – до  800 000 руб. 

- по договору № 10-000937 от 13.03.2014 г. -   до 200 000 руб. 

- по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г.: - до  5 000 руб.  

Снижая размер неустойки, суд исходит из того, что неустойка носит компенсационный характер и не должна служить средством обогащения одной стороны за счет другой, в деле отсутствуют доказательства негативных последствий истца вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, учитывая и то,  что размер неустойки превышает сумму основного долга.

В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "Башкирэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  удовлетворить частично.

Взыскать с ООО МТПК "Маштехресурсы" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ООО "Башкирэнерго" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) :

- по договору № 4-15560 от 31.07.2012 г.: 2 740 416 руб. 82 коп. – сумму основного  долга, 800 000 руб. – сумму неустойки;

- по договору № 10-000937 от 13.03.2014 г.: 630 983 руб. 67 коп. – сумму долга, 200 000 руб. – сумму неустойки;

- по договору № 15-10-30761-02-01 от 08.05.2015 г.: 22 335 руб. 69 коп. – сумму долга, 5 000 руб. – сумму неустойки;

36 816 руб. – сумму расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья М.В. Журавлева