Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-5915/2022

20 июля 2022 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  18 июля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  20 июля 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Евдошенко А.П.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Студилко Ю.Ю.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Акционерное общество "Группа компаний "ОМЕГА" (адрес: Россия 195067, Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Полюстрово, пр. Екатерининский, д. 21, литера А, пом. 1, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (адрес: Россия 194044, Санкт-Петербург, пер. Нейшлотский, д. 8, ОГРН: 

<

***>);

об обязании, о взыскании 

при участии 

- от истца: представитель ФИО1 (доверенность от 09.12.2021) 

- от ответчика: представитель ФИО2 (доверенность от 22.12.2021)

установил:

Акционерное общество "Группа компаний "ОМЕГА" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению "Дирекция транспортного строительства" (далее - ответчик):

- об обязании со дня вступления решения в законную силу передать утвержденную заказчиком проектную документацию к ГК С-Пб №ОСТ-18, согласованную в установленном порядке на объемы работ, выполняемые по объекту, знаки геодезической разбивочной основы и строительную площадку в целом по объекту или поэтапно на каждый участок, в том числе и открытые ордера ГАТИ на производство земляных работ; 

- о взыскании 7 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения вступившего в законную силу решения;

- о взыскании 100 000 руб. расходов на оплату услуг представителя.

В судебном заседании 18.07.2022 истец уточнил исковые требования, просил обязать ответчика передать истцу ордера ГАТИ на производство работ по спорному контракту.

Уточнение рассмотрено и принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Истец поддержал уточненные требования в полном объеме.

Ответчик возражал по мотивам, изложенным в отзыве, просил в удовлетворении иска отказать. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключен государственный контракт №ОСТ-18 от 31.08.2021 на выполнение работ по объекту: «Устройство остановочных пунктов городского пассажирского транспорта административных районов Санкт-Петербурга: Выборгский район (Лот 2), Выборгский район (Лот 3)» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга. 

Пунктом 5.2.12 контракта предусмотрена обязанность заказчика выполнять требования постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга» (далее – Постановление № 875). 

Как указал истец, в нарушение принятых на себя обязательств ответчик не представил истцу ордер ГАТИ на производство земельных работ на спорном объекте, в связи с чем истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд (с учетом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 АПК РФ).

В силу пункта 2 статьи 702 ГК РФ к договору подряда на выполнение работ для государственных нужд применяются положения, предусмотренные параграфом 1 главы 37 данного Кодекса, если иное не установлено правилами Кодекса об этом виде договора. 

Из статей 702 и 703 ГК РФ следует, что по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда на выполнение работы предполагает передачу ее результата заказчику. 

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Пунктом 5.2.12. контракта предусмотрена обязанность Заказчика выполнять требования постановления Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга» (далее – Постановление № 875), согласно которому ответчик обязан получить ордер ГАТИ на планируемые работы. 

Вместе с тем, по условиям контракта подрядчик обязан в течение 3 дней с даты заключения договора сообщить заказчику фамилию, имя, отчество и должность представителя, который будет представлять интересы заказчика в ГАТИ (пункт 5.2.38); в течение 7 дней актуализировать и согласовать с УГИБДД, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» и Комитетом по транспорту схему организации дорожного движения на период производства работ (пункт 5.2.39); в течение 10 рабочих дней подать заявку в ГАТИ на издание распоряжения об ограничении движения на объекте в соответствии с актуализированной схемой организации дорожного движения на период производства работ (пункт 5.2.40); в течение 3 рабочих дней с даты окончания работ обеспечить заказчику предоставление документов, необходимых для закрытия ордера ГАТИ в соответствии с Постановлением № 875 (пункт 5.2.41). 

Таким образом, обязанность по открытию ордера ГАТИ возложена по условиям контракта на подрядчика. 

Именно подрядчик обязан получить в государственных органах или иных уполномоченных органах разрешение на производство работ согласно требованиям действующего законодательства, от имени и по поручению заказчика оплатить и получить всю разрешительную документацию, согласовать ее в соответствующих инстанциях, для чего заказчик выдает подрядчику соответствующую доверенность, в том числе для представления его интересов заказчика в ГАТИ. 

Доказательств соблюдения истцом указанных условий контракта, или уведомления ответчика о невозможности их исполнения по причинам от него независящим, истцом не представлено. 

Истец, являясь профессиональным участником гражданского оборота в сфере выполнения подрядных работ, в нарушение положений статей 716 и 719 ГК РФ работы не приостанавливал и о невозможности их выполнения, ответчику не сообщал. 

При этом, указанные обстоятельства, на которые ссылается истец, не являются основанием для приостановления производства работ, учитывая, что обязанность по открытию ордера ГАТИ по условиям контракта возложена на истца, а рабочая документация по контракту, разработанная истцом на основании полученной от заказчика проектной документации, как результат работ была передана ответчику по акту сдачи-приемки работ №1-ПР от 11.10.2021.

Таким образом, требование об обязании ответчика исполнить спорную обязанность в натуре удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Евдошенко А.П.