Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-10402/2020

«28»

декабря

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

рассмотрев в упрощенном порядке дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСК-ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 40 676,52 рублей

установил.

Общество с ограниченной ответственностью "БСК-ИНВЕСТ"  обратилось в суд с иском к акционерному обществу  "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" о взыскании неустойки в  сумме 40 676,51 рублей.

В связи с болезнью судьи Педченко О.М. дело передано на рассмотрение судье Шкутко О.Н.

Дело рассмотрено в упрощенном порядке.

Судом установлено. 

Между сторонами был заключен договор подряда от 09.09.2019 года № 609105.

По условиям договора ООО «БСК-ИНВЕСТ» (подрядчик) обязалось выполнить работы по ремонту помещений по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с пунктом 4.1 договора стоимость работ согласована 7 670 584,52 рублей.

В соответствии с пунктом 5.1 договора оплата выполненных работ производится в течение 15 банковских дней после подписания акта выполненных работ, справки формы КС-3.

Неустойка за нарушение срока оплаты работ не предусмотрена.

В связи с нарушением сроков оплаты работ истец обратился в суд с требованиями о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Работы по акту выполненных работ от 25.12.2019 года на сумму 2 287 043 рублей оплачены 05.02.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 24.01.2020 года по 05.02.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 5077,11 рублей. Расчет проверен, признан обоснованным.

Работы по акту выполненных работ от 24.01.2020 года на сумму 601 873 рубля оплачены 11.03.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 09.02.2020 года по 11.03.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 3161,48 рублей. Расчет проверен судом.

Суд полагает, что проценты подлежат оплате за период с 17.02.2020 года по 11.03.2020 года и их размер составляет 2368,02 рублей.

Работы по акту выполненных работ от 25.02.2020 года на сумму 1 247 401 рублей оплачены 09.04.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 12.03.2020 года по 09.04.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 5930,27 рублей. Расчет проверен судом.

Суд полагает, что проценты подлежат оплате за период с 18.03.2020 года по 09.04.2020 года и их размер составляет 4703,32 рублей.

Работы по акту выполненных работ от 25.03.2020 года на сумму 2 546 389 рублей оплачены 18.05.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 16.04.2020 года по 18.05.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 13 010,24 рублей. Расчет проверен, признан обоснованным.

Работы по акту выполненных работ от 25.03.2020 года на сумму 355 993 рублей оплачены 22.06.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 16.04.2020 года по 22.06.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 3474,68 рублей. Расчет проверен, признан обоснованным.

Работы по акту выполненных работ от 24.04.2020 года на сумму 1 051 849 рублей оплачены 27.07.2020 года.

Согласно расчету истца за период с 19.05.2020 года по 27.07.2020 года подлежат уплате проценты в сумме 10 022,74 рублей. Расчет проверен судом.

Суд полагает, что проценты подлежат оплате за период с 22.05.2020 года по 27.07.2020 года и их размер составляет 9548,55 рублей.

Всего размер процентов составляет 38 181,92 руб.

Требования истца в указанной судом сумме подлежат удовлетворению на основании положений статьи 395 ГК РФ. 

     Руководствуясь статьями  167-171, 229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЯНТАРЬ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БСК-ИНВЕСТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение сроков оплаты работ по договору подряда от 09.09.2019 года № 609105 по актам от 25.12.2019 года, от 24.01.2020 года, от 25.02.2020 года, от 25.03.2020 года, от 24.04.2020 года в сумме 38 181,92 рублей, расходы по госпошлине в сумме 2000 рублей.

Во взыскании остальной суммы отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме.

Судья                    О.Н.Шкутко