АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул, д.  8,  Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru

тел./факс (384-2) 58-37-05

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А27-397/2018

город Кемерово

27 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 20 сентября 2018 года

Полный текст решения изготовлен 27 сентября 2018 года

 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С.,                        при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев  в  открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной  ответственностью «ФИНЕСТРА», г. Новокузнецк (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к  обществу с ограниченной  ответственностью «Юргинская проектно – строительная компания», г. Новосибирск  (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)

третье лицо,  не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА», г. Новокузнецк (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании  120 840 рублей 08 коп. долга по договорам подряда № 233-ГП-36-СУБ от 11.08.2016года  (80310, 10 руб.); № ЛМ-45-СУБ от 28.09.2015года (13 415 руб.); № 109/02/03-Суб от 10.11.2015года (  27 114,98 руб.), 19 230 руб. 67 коп. начисленных за период с  07.10.2016года по  24.08.2018года процентов за пользование чужими денежными средствами с  последующим начислением  процентов по день фактической уплаты задолженности,  12 084 рубля суммы неустойки

при участии:

стороны и третье лицо -  не явились,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Финестра» (истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском о взыскании с   общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно-строительная компания» (ответчик)   120 840 руб. 08 коп. задолженности по договорам подряда,  неустойки в общем размере  89 859 рублей  (процентов за пользование  чужими денежными средствами) с последующим ее взысканием по день фактической оплаты задолженности, 12 084  рубля договорной неустойки.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от  26 февраля 2018года   иск принят к производству с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от  26 апреля 2018 года суд перешел  к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, привлек к участию в деле в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Аврора», г. Новокузнецк  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), назначил дело  к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 13 июня 2018года.  

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 13 июня 2018 года подготовка дела к судебному разбирательству завершена, дело назначено к  рассмотрению в судебном разбирательстве арбитражного суда первой инстанции на 10 июля 2018 года.

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 10 июля 2018 года судебное разбирательство по делу было отложено на 20 августа 2018года, в котором судом в порядке ст. 163 АПК РФ были объявлены перерывы до 24 августа 2018года и до 27 августа 2018года.

От истца в материалы дела поступили письменные пояснения по иску, а  также заявление об уточнении исковых требований, на основании которого истец просит взыскать с ответчика 120 840 руб. 08 коп. задолженности по договорам подряда,  неустойку  в общем размере  89859 рублей с последующим ее взысканием по день фактической оплаты задолженности, а также произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.10.2016года по 24.08.2018года в  сумме  19 230 руб. 67 коп.

Уточнение судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

            Определением от 27 августа 2018года судебное разбирательство по делу отложено на 20 сентября 2018года.

            Истец, ответчик и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенные  надлежащим образом о времени и месте судебного  заседания,  явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, возражений относительно проведения судебного заседания и рассмотрения дела в их отсутствие не заявили.  Ответчик представил в материалы дела  отзыв, в котором ответчик, возражая  относительно исковых требований ООО «Финестра»  указывает, что , по его мнению, ООО «Финестра» является ненадлежащим  истцом по заявленному иску в связи с уступкой  ООО «Финестра» права  требования уплаты долга по указанным договорам   подряда  обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» по договору уступки права (цессии) от 15.06.2017год №2-06/2017. Указывает, что о заключении указанного договора цессии, ООО  «ЮПСК» уведомлено обществом с ограниченной ответственностью «Финестра» на основании уведомления, датированного 15.06.2017года. Просит в иске отказать.

Суд, рассмотрев заявленные требования, счел их частично обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

Как следует  из материалов дела, между ООО «Ю-ПСК» (Подрядчик)  и ООО «Финестра» (Субподрядчик)   заключен договор субподряда №ЛМ-45-Суб от 28.09.2015 по условиям которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика собственными силами в установленные в настоящем договоре сроки в соответствии с предоставленными подрядчиком проектной документацией, рабочими чертежами, утвержденными «к производству работ», а также локальными сметами, составленными в ТЕР 2001г. (в редакции 2009г. с изменениями) и переведенными в договорную цену, представленными Субподрядчиком и утвержденными Подрядчиком, или калькуляцией выполнить работы на объекте: «Торговый центр Леруа Мерлен, расположенный по адресу: 

<

...>» (Объект), и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Наименование, виды и объем подлежащих выполнению Субподрядчиком работ, а также их стоимость, сроки выполнения, перечень предоставляемых Сторонами материалов определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору. Каждое дополнительное соглашение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего договора, не изменяет, не отменяет, не приостанавливает действие предыдущих ни полностью, ни в части, если только в нем самом или в более позднем дополнительном соглашении прямо не предусмотрено иное. В случае если дополнительное соглашение к договору содержит условия иные, чем указаны в настоящем договоре, Стороны руководствуются в этой части условиями дополнительного соглашения. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3). Одновременно с формами КС-2, КС-3 Субподрядчик предоставляет Подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных на давальческой основе, для производства строительно-монтажных работ. (радел 1 договора – предмет договора).

В соответствии с п.3.1. Субподрядчик обязуется выполнить работы в сроки, согласованные сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

В соответствии с условиями разделов 2 и 4 договора (Стоимость работ. Порядок и условия платежей по договору) общая стоимость работ по настоящему договору определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору. В случае, если фактически выполненный объем работ отличается от объема работ определенного в разделе 1  договора, то оплата работ производится пропорционально фактически выполненному объему работ, подтвержденному подписанными сторонами формами КС-2, КС-3. Стоимость ежемесячно выполняемых Субподрядчиком работ в процессе строительства определяется актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными полномочными представителями Сторон. 

Оплата работ, выполненных по договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по реквизитам, указанным в  договоре. Платежи за выполненные работы производятся в размере 90% от стоимости выполненных работ по договору в целях сохранения 10% суммы гарантийного удержания, в течение 30  календарных дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3, предоставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры. Уплата части суммы гарантийного удержания в размере 7% от общей стоимости работ, осуществляется с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 календарных дней после получения Подрядчиком от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Платеж производится при наличии в совокупности следующих условий:

- отсутствие замечаний к выполненным работам со стороны Подрядчика на момент оплаты. Факт отсутствия замечаний фиксируется в Акте по форме Приложения № 5 к договору, предоставленном Субподрядчиком и подписанным уполномоченными лицами Подрядчика;

- устранение Субподрядчиком всех замечаний, выявленных в процессе приемки работ и указанных в документах, направленных Подрядчиком в адрес Субподрядчика, а также в Акте приемки объекта в эксплуатацию, учитывая, что Подрядчик, при наличии недостатков в выполненных работах, не препятствующих эксплуатации Объекта, вправе принять работы и назначить Субподрядчику срок для устранения выявленных недостатков. Устранение Субподрядчиком всех выявленных замечаний подтверждается подписанием Сторонами акта об устранении замечаний и недоделок (Приложение №5);

- передача Субподрядчиком Подрядчику исполнительной документации в твёрдой копии (4 экземпляра) и 1 (одного) комплекта в электронной форме.

Окончательный расчет - уплата части суммы гарантийного удержания в размере 3% от общей стоимости работ - производится в течение 30  календарных дней после истечения 6  месяцев с момента выплаты Подрядчиком первой части гарантийного удержания, при отсутствии к этому сроку не устраненных недостатков в выполненных работах, а в случае наличия на этот момент не устраненных недостатков платеж производится после их устранения. По соглашению сторон возможна выплата Субподрядчику аванса для приобретения необходимых материалов. В случае выплаты Субподрядчику аванса, Субподрядчик обязан в течение 5 календарных дней с даты получения денежных средств предоставить Подрядчику счет-фактуру на полученный аванс. При этом последующие расчеты за выполненные работы осуществляются за вычетом уплаченного Подрядчиком аванса.      Обязательства по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

В соответствии с п. 11.8. договора  за нарушение сроков оплаты выполненных работ или услуг Подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ и услуг, определенной в соответствующем дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению.

В соответствии с п. 14.1. и п.14.2. договора, споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем переговоров, в досудебном порядке. Претензионный порядок по договору является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию стороны установили в 10  рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

 В рамках указанного договора, подписано дополнительное соглашение №1 от 06.10.2015г.  на  поставку и монтаж элементов заполнения проемов (на сумму 2 135 646 руб. 66 коп. ; предоплата в размере 70% - с момента подписания доп. соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 30 календарных дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором).

В рамках указанного договора, подписано дополнительное соглашение №2 от 10.11.2015 на выполнение работ по внутренней отделке окон (на сумму 397 800 руб.; предоплата в размере 70% - в течении 3 рабочих дней подписания доп. соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 30 календарных дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором).

В рамках указанного договора, подписано дополнительное соглашение  №3 от 12.12.2015 на поставку и монтаж откосов и подоконников для окон на лестничных клетках (8 шт.)  (на сумму 25 017,92 руб.; предоплата в размере 70% - в течении 3 рабочих дней  с момента подписания доп. соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 30 календарных дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором).

В рамках указанного договора подписано дополнительное соглашение  №4 от 20.01.2016г.   на поставку и монтаж подоконников в районе главного входа (на сумму 11 127  руб.; предоплата в размере 70% - в течении 5 рабочих дней с момента  подписания дополнительного соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 30 календарных дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором).

В рамках указанного договора, подписано дополнительное соглашение №5 от 20.01.2016 на поставку и монтаж подоконников в районе главного входа  (на сумму 6422 руб.; предоплата в размере 70% - в течении 3 рабочих дней  с момента подписания дополнительного соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 30 календарных дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором подряда).

Актами приемки выполненных работ по форме КС-2: №1 от 01.02.2016 на сумму 2 135 646 руб. 66 коп. ,  №1 от 01.02.2016г.  на сумму  397 800 руб.,  №1 от 25.03.2016года на сумму  11 127 руб. ,  №1 от 25.03.2016года на сумму 25 017 руб. 92 коп. , соответствующими справками о стоимости  выполненных работ и затрат формы КС-3 на соответствующие суммы  подтверждается факт выполнения субподрядчиком и принятие подрядчиком работ, согласованных договором субподряда №ЛМ-45-Суб от 28.09.2015г., и дополнительными соглашениями к нему.

 В рамках указанного договора сторонами был произведен расчет за выполненные работы,  сумма оставшейся неоплаченной задолженности по договору составила 13 415 рублей и подтверждена актом сверки взаимных расчетов сторон за период с 01.01.2018года по 21.02.2017года, ответчиком не оспорена.

Также, ООО между «Ю-ПСК» (Подрядчик)  и ООО «Финестра» (Субподрядчик)   заключен договор субподряда № 233-ГП-36-Суб от 11.08.2015г., по условиям которого Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика собственными силами в установленные в договоре сроки в соответствии с предоставленными Подрядчиком проектной документацией, рабочими чертежами, утвержденными «к производству работ», а также локальными сметами, составленными в ТЕР 2001г. (в редакции 2009г. с изменениями) и переведенными в договорную цену, представленными Субподрядчиком и утвержденными Подрядчиком, или калькуляцией выполнить работы на объекте: «Торговый комплекс «Лента», расположенный но адресу: 

<

...>» (Объект), и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Наименование, виды и объем подлежащих выполнению Субподрядчиком работ, а также их стоимость, сроки выполнения, перечень предоставляемых Сторонами материалов определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору. Каждое дополнительное соглашение является отдельным соглашением, заключенным в рамках договора, не изменяет, не отменяет, не приостанавливает действие предыдущих ни полностью, ни в части, если только в нем самом или в более позднем дополнительном соглашении прямо не предусмотрено иное. В случае если дополнительное соглашение к договору содержит условия иные, чем указаны в договоре, Стороны руководствуются в этой части условиями дополнительного соглашения.     Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3). Одновременно с формами КС-2, КС-3 Субподрядчик предоставляет Подрядчику счета-фактуры на материалы, переданные в порядке, предусмотренном договором. (раздел 1 договора).

В  соответствии с условиями раздела 2 договора, общая  стоимость работ по  договору определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору. В случае, если фактически выполненный объем работ отличается от объема работ определенного договором, то оплата работ производится пропорционально фактически выполненному объему работ, подтвержденному подписанными сторонами формами КС-2, КС-3.          Стоимость ежемесячно выполняемых Субподрядчиком работ в процессе строительства определяется актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными полномочными представителями Сторон. В подтверждение оплаты приобретаемых Субподрядчиком материалов, Субподрядчик одновременно предоставляет копии счетов-фактур, товарных накладных.

            В соответствии с условиями раздела 4 договора, оплата работ, выполненных по настоящему договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по реквизитам, указанным  договоре. Платежи за выполненные работы производятся в размере 90% от стоимости выполненных работ по договору в целях сохранения 10% суммы гарантийного удержания  в течение 30  календарных дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3, предоставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры. Уплата части суммы гарантийного удержания в размере 7% от общей стоимости работ, осуществляется с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30  календарных дней после получения Подрядчиком от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Платеж производится при наличии в совокупности следующих условий:

- отсутствие замечаний к выполненным работам со стороны Подрядчика на момент оплаты;

-           устранение Субподрядчиком всех замечаний, выявленных в процессе приемки работ и указанных в документах, направленных Подрядчиком в адрес Субподрядчика, а также в Акте приемки объекта в эксплуатацию, учитывая, что Подрядчик, при наличии недостатков в выполненных работах, не препятствующих эксплуатации Объекта, вправе принять работы и назначить Субподрядчику срок для устранения выявленных недостатков. Устранение Субподрядчиком всех выявленных замечаний подтверждается подписанием Сторонами акта об устранении замечаний и недоделок (Приложение №4);

-передача Субподрядчиком Подрядчику исполнительной документации в твёрдой копии (4экземпляра) и 1 (одного) комплекта в электронной форме.

            Окончательный расчет - уплата части суммы гарантийного удержания в размере 3% от общей стоимости работ - производится в течение 30 календарных дней после истечения 6 месяцев с момента выплаты Подрядчиком первой части гарантийного удержания, при отсутствии к этому сроку не устраненных недостатков в выполненных работах, а в случае наличия на этот момент не устраненных недостатков платеж производится после их устранения.

            По соглашению сторон возможна выплата Субподрядчику аванса для приобретения необходимых материалов. В случае выплаты Субподрядчику аванса,  Субподрядчик обязан в течение 5 календарных дней с даты получения денежных средств предоставить Подрядчику счет-фактуру на полученный аванс. При этом последующие расчеты за выполненные работы осуществляются за вычетом уплаченного Подрядчиком аванса.

            Обязательства по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

Работы, выполняемые по настоящему договору, считаются принятыми Подрядчиком, после подписания им акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии с п. 11.8 договора, за  нарушение сроков оплаты выполненных работ или услуг Подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ и услуг, определенной в соответствующем дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению.

В соответствии с п.14.1. п.14.2. договора, споры, возникающие в процессе исполнения договора, решаются путем переговоров, в досудебном порядке. Претензионный порядок по договору является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию стороны установили в 10 рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

В рамках указанного договора, подписано дополнительное соглашение №1 от 11.08.2016 на поставку и монтаж витражной бутиковой зоны (на сумму 423 332,69 руб.; предоплата в размере 70% - после  подписания доп. соглашения; 20% - от стоимости работ в течение 10 рабочих  дней после подписания актов; окончательный расчет – уплата  суммы гарантийного удержания в размере 10% от общей стоимости работ  производится в порядке, предусмотренном договором; срок поставки и монтаж – 21 календарный день с момента оплаты 70%).

Актом  приемки выполненных работ по форме КС-2  №1 от 22.09.2016 на сумму 423 332,69 руб.,  подтверждается факт выполнения субподрядчиком и принятие подрядчиком работ, согласованных договором субподряда №233-ГП-36-Суб от 11.08.2016г. и дополнительным соглашением №1 к нему. Также, сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ  и затрат формы КС-3 №1 от 22.09.2016  на соответствующую сумму, на оплату выставлен счет-фактура. 

Ответчиком частично  произведена  оплата за выполненные по указанному дополнительному соглашению  работы, сумма оставшейся неоплаченной по  договору  задолженности составила 80 310  руб. 10 коп. 

Также, между ООО «Ю-ПСК» (Подрядчик)  и ООО «Финестра» (Субподрядчик)   заключен договор субподряда № 109/02/03-Суб от 10.11.2015г., по условиям которого Субподрядчик обязуется но заданию Подрядчика собственными силами в установленные в договоре сроки в соответствии с предоставленными Подрядчиком проектной документацией, рабочими чертежами, утвержденными «к производству работ», а также локальными сметами, составленными в ТЕР 2001г. (в редакции 2009г. с изменениями) и переведенными в договорную цену, представленными Субподрядчиком и утвержденными Подрядчиком, или калькуляцией выполнить работы на объекте: «Торговый центр с автостоянкой «Лента», расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Транспортная, кадастровый номер 42:30:0302074:11» (Объект), и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Наименование, виды и объем подлежащих выполнению Субподрядчиком работ, а также их стоимость, сроки выполнения, перечень предоставляемых Сторонами материалов определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору. Каждое дополнительное соглашение является отдельным соглашением, заключенным в рамках договора, не изменяет, не отменяет, не приостанавливает действие предыдущих ни полностью, ни в части, если только в нем самом или в более позднем дополнительном соглашении прямо не предусмотрено иное. В случае если дополнительное соглашение к настоящему договору содержит условия иные, чем указаны в договоре, Стороны руководствуются в этой части условиями дополнительного соглашения. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3). Одновременно с формами КС-2 и КС-3 Субподрядчик предоставляет Подрядчику Отчет об использовании материалов, переданных на давальческой основе, для производства строительно-монтажных работ. (раздел 1 договора).

В соответствии с условиями  раздела 2 договора,  общая стоимость работ по договору определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору. В случае, если фактически выполненный объем работ отличается от объема работ определенного договором, то оплата работ производится пропорционально фактически выполненному объему работ, подтвержденному подписанными сторонами формами КС-2, КС-3.          Стоимость ежемесячно выполняемых Субподрядчиком работ в процессе строительства определяется актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными полномочными представителями Сторон. 

Согласно условиям раздела 4 договора, оплата работ, выполненных по  договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по реквизитам, указанным в договоре.       Платежи за выполненные работы производятся в размере 90% от стоимости выполненных работ по договору в целях сохранения 10% суммы гарантийного удержания в течение 30  календарных дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3, предоставления Субподрядчиком счета на оплату и счета-фактуры. Уплата части суммы гарантийного удержания в размере 7% от общей стоимости работ, осуществляется с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30  календарных дней после получения Подрядчиком от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Платеж производится при наличии в совокупности следующих условий:

- отсутствие замечаний к выполненным работам со стороны Подрядчика на момент оплаты.

- устранение Субподрядчиком всех замечаний, выявленных в процессе приемки работ и указанных в документах, направленных Подрядчиком в адрес Субподрядчика, а также в Акте приемки объекта в эксплуатацию, учитывая, что Подрядчик, при наличии недостатков в выполненных работах, не препятствующих эксплуатации Объекта, вправе принять работы и назначить Субподрядчику срок для устранения выявленных недостатков. Устранение Субподрядчиком всех выявленных замечаний подтверждается подписанием Сторонами акта об устранении замечаний и недоделок (Приложение №5);

- передача Субподрядчиком Подрядчику исполнительной документации в твёрдой копии (4 экземпляра) и 1 (одного) комплекта в электронной форме.

Окончательный расчет - уплата части суммы гарантийного удержания в размере 3% от общей стоимости работ - производится в течение 30  календарных дней после истечения 6 (шести) месяцев с момента выплаты Подрядчиком первой части гарантийного удержания при отсутствии к этому сроку не устраненных недостатков в выполненных работах, а в случае наличия на этот момент не устраненных недостатков платеж производится после их устранения.

Работы, выполняемые по настоящему договору, считаются принятыми Подрядчиком, после подписания им акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии с п. 11.8. договора, за нарушение сроков оплаты выполненных работ или услуг Подрядчик по требованию Субподрядчика уплачивает Субподрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ и услуг, определенной в соответствующем дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению.

В соответствии с п. 14.1., п.14.2. договора, споры, возникающие в процессе исполнения  договора, решаются путем переговоров, в досудебном порядке. Претензионный порядок по настоящему договору является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию стороны установили в 10  рабочих дней с момента ее получения. В случае не достижения сторонами согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

В рамках указанного договора сторонами  подписано дополнительное соглашение №1 от 10.11.2015 на выполнение комплекса работ по замене оконных блоков (на сумму 27 114 руб. 98 коп.; оплата работ   производится в порядке, предусмотренном договором).

Актом  приемки выполненных работ по форме КС-2  №1 от 25.03.2016 на сумму 27114 руб. 98  коп.  подтверждается факт выполнения субподрядчиком и принятие подрядчиком работ, согласованных договором субподряда №109/02/03-Суб от 10.11.2015. Также сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ  и затрат формы КС-3 №1 от 25.03.2016  на соответствующую сумму, на оплату выставлен счет-фактура.  Оплата работ по указанному акту приемки выполненных работ формы КС-2 на сумму 27 114 руб. 98 коп.  ответчиком не произведена. 

С учетом изложенного, сумма неоплаченной по указанным договорам субподряда  задолженности в общем размере  120 840 рублей 08 коп., в том числе  80 310  руб. 10 коп. долга по договору субподряда №233-ГП-36-Суб от  11.08.2016года;  13 415 руб. долга по договору  субподряда №ЛМ-45-СУБ от 28.09.2015года,  27 114 руб. 98 коп. долга по договору  субподряда №109/02/03-Суб от 10.11.2015года  подтверждена материалами дела,  ответчиком  не оспаривается. 

Наличие задолженности в сумме 120 840 руб. 08 коп. отражено  в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016г. по 21.02.2017г., имеющим ссылку на соответствующие первичные документы, подписанном сторонами.

30.12.2015г., 27.09.2016г., 26.08.2015г. выданы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № 42-RU 42310000-58-2015, № 42-RU 42310000-37-2016, № 42-RU 42310000-28-2015, соответственно. 

В связи с наличием у  ответчика неоплаченной задолженности в сумме 120840,08 руб. истец направил в его адрес претензию с требованием об оплате задолженности в десятидневный срок.

Претензия истца  ответчиком оставлена без удовлетворения, что послужило истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Ответчик, возражая относительно исковых требований, в представленном в материалы дела письменном отзыве, указывает, что ООО «Финестра» является ненадлежащим истцом по делу, поскольку заявленная ко взысканию задолженность, а также сумма начисленной по договорам пени и процентов за пользование чужими денежными средствами  уступлена по договору №2-06/2017 уступки прав (цессии) от 15.06.2017года,  заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «АВРОРА».

   Суд, оценив представленные в материалы дела  документы и пояснения по делу, которые представлены  истцом и третьим лицом,   исходит из того, что  договор уступки прав (цессии) №2-06/2017 от 15.06.2017года был  предоставлен должнику   с целью получения согласия  у  должника  - ООО «Ю-ПСК» на  переуступку права требования по договорам субподряда. Кроме того, истцом и третьим лицом в материалы дела представлено соглашение о расторжении договора  цессии №2-06/2017 от 15 июня 2017года, которым   обществом с ограниченной ответственностью «ФИНЕСТРА» (ИНН 

<

***>) и  обществом с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (ИНН 

<

***>) , цессионарий   заключено соглашение о расторжении договора  цессии  №2-06/2017 от 15 июня 2017года,  которым стороны достигли соглашения о расторжении договора цессии №2-06/2017 от 15.06.2017года в связи с отсутствием  согласия должника по уступленному требованию, предусмотренного               п. 15. 7.  Договоров субподряда №233-ГП-36-СУБ от 11.08.2016года, №ЛМ-45-Суб от 28.09.2015года, №109/02/03-Суб от 10.11.2015года и считают данную уступку несостоявшейся. 

Согласно п. 1.2 соглашения о расторжении договора цессии №2-06/2017 от 15.06.2017года  сумма возвращаемого права требования составляет сумму денежных средств в размере 120 840   рублей 08 коп.  Обязательства сторон по договору №2-06/2017 от 15.06.2017года не наступают  по причине  отсутствия письменного согласия должника, когда такое согласие требуется условиями  всех трех  начальных договоров. ( п. 1.3).  Согласно раздела 2 соглашения о расторжении договора цессии №2-06/2017 от 15.06.2017года  цессионарий обязуется вернуть  цеденту все необходимые документы, удостоверяющие права (требования),  а именно   договоры субподряда, приложения и дополнительные соглашения к нему. Согласно п. 2.2 соглашения о расторжении договора права требования обязанность  цедента по уплате денежных средств цессионарию, предусмотренная  п. 3.1 договора уступки , не возникает.

Таким образом, право требования уплаты спорной суммы задолженности по договорам субподряда, а также суммы пени и процентов за пользование чужими денежными средствами возвращено (передано) обратно обществу с ограниченной ответственностью «ФИНЕСТРА» на основании соглашения о расторжении договора цессии №2-06/2017 от 15.06.2017года.  

Вышеизложенные обстоятельства подтверждены документально, представленными в материалы дела доказательствами и ответчиком  не опровергнуты.

Таким образом, суд пришел к выводу, что кредитором по спорным  обязательствам является ООО «Финестра». В связи с чем, доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом отклонены, как необоснованные.

Факт выполнения спорных работ ООО «Финестра» и их принятие «Ю-ПСК», объем выполненных работ и их стоимость,  ответчиком не оспаривался, равно как и наличие неоплаченной задолженности по спорным договорам субподряда в заявленном в иске размере.

Доказательств оплаты спорной суммы задолженности ответчиком в материалы дела не представлено.

С учетом вышеизложенного, исковые требования о взыскании долга за выполненные работы  в общем размере 120 840 руб. 08 коп., судом признаны обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению.

Рассмотрев исковые требования в части взыскания неустойки за нарушение сроков оплаты по договорам, суд считает исковые требования в указанной части обоснованными и подлежащими удовлетворению в части требований о взыскании пени на сумму долга в размере 120 840 рублей 08 коп., исчисленную за период  просрочки исполнения обязательства по оплате работ  в размере  12 084 рубля, не превышающую предусмотренный пунктами 11.8 соответствующих договоров субподряда предельного размера подлежащей начислению пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ. В указанной части суд полагает  заявленные истцом требования о взыскании 12 084 рубля договорной неустойки (пени) правомерными и обоснованными , подлежащими удовлетворению в соответствующей части.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, признан арифметически верным, соответствующим обстоятельствам спора.

С учетом изложенного, исковые требования в части взыскания неустойки, начисленной за просрочку оплаты  работ по договорам субподряда, подлежат удовлетворению в сумме 12 084 руб.

Также, истец просит взыскать с ответчика 19230 руб. 67 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных за просрочку оплаты работ,  начисленных за период с 07.10.2016года по 24.08.2018года с последующим взысканием суммы процентов за пользование чужими денежными  средствами до  момента фактической оплаты долга.

Суд полагает обоснованными возражения ответчика в указанной части требований по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 4 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации , в редакции Федерального закона  от 08.03.2015года №42-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2015года, в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные ст. 395 ГК РФ  проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Аналогичная  правовая позиция изложена в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств". Согласно п. 42  Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016года №7 « О применении судами некоторых  положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»  если законом или соглашением сторон установлена неустойка за нарушение   денежного обязательства,  на которую  распространяется правило абзаца первого пункта 1 статьи 394 ГК РФ, то положения пункта  1 статьи 395 ГК РФ не применяются. В этом случае взысканию подлежит  неустойка установленная законом или соглашением сторон,  а не проценты , предусмотренные  статьей 395 ГК РФ (пункт 4 статьи 295 ГК РФ).

В соответствии с п. п. 82, 83 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»  положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 08 марта 2015года №42 –ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 42-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу, если иное не предусмотрено статьей 2 Закона N 42-ФЗ. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона N 42-ФЗ, положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной редакции применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления Закона N 42-ФЗ в силу (1 июня 2015 года).

83. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации в измененной Законом N 42-ФЗ редакции, например, статья 317.1 ГК РФ, не применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ).

Поскольку договоры субподряда  №ЛМ-45-Суб от 28 сентября 2015года,  №109/02/03-Суб от 10 ноября 2015года, №233-ГП-36-Суб от  11.08.2016года  заключены после вступления в силу  изменений,  внесенных в Гражданский Кодекс РФ Федеральным законом  от 08 марта 2015года №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» , применению подлежит пункт 4 статьи 395 ГК РФ, исключающий  возможность начисления  процентов за пользование чужими денежными средствами при наличии согласованного сторонами договора условия о договорной неустойке.

            С учетом вышеизложенного, исковые требования в части взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ, удовлетворению не подлежат.

Расходы по госпошлине по иску подлежат отнесению на стороны по правилам ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь  статьями   167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

р е ш и л :

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Юргинская проектно – строительная компания» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ФИНЕСТРА» 120 840 рублей  08 коп. долга по договорам субподряда; в том числе             13 415 рублей долга по договору субподряда   №ЛМ-45-СУБ от 28 сентября 2015года;     27 114 руб. 98 коп. долга  по договору субподряда №109/02/03-Суб от 10.11.2015года; 80 310 рублей  10 коп.  долга по договору субподряда №233-ГП-36-Суб от 11.08.2016года; 12 084 рубля  пени по договорам,  4 862 рубля в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 137 786 руб. 08 коп. 

В остальной части в иске отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ФИНЕСТРА» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 1 891 рублей госпошлины, излишне уплаченной по чек – ордеру №198 от 22.02.2018года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск  в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                         О. С. Андуганова