Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-102483/2023

23 сентября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  20 сентября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  23 сентября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Шпачева Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Копаневой А.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 04.07.2002, ИНН: 

<

***>);

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002, ИНН: 

<

***>);

третье лицо: акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии:

от истца – ФИО1, доверенность от 17.07.2024

от ответчика – ФИО2, доверенность от 11.05.2023

от третьего лица – не явился, извещен  

 

установил:

Акционерное общество  «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (далее – АО «Силовые машины») в соответствии с договорной подсудностью обратилось в Арбитражный суд города  Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу  «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – АО «ГИДРОМАШСЕРВИС») о взыскании договорной неустойки в размере 1 308 535, 38 долларов США в рублевом эквиваленте.

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» представило отзыв на иск, в котором ссылается на неверность расчета неустойки, поскольку такая неустойка начислена в том числе в периоды моратория с 06.04.2020 по 07.01.2021 и с 01.04.2022 по 01.10.2022; истец просрочил исполнение своих обязательств по согласованию различных условий, необходимых для исполнения Договора, в том числе своевременному авансированию. Также ответчик   сослался  на действие обстоятельств непреодолимой силы, начиная с 24.02.2022 и до настоящего времени, - введение Указами Президента Украины № 63/2022 от 23.02.2022 и № 64/2022 от 24.02.2022 чрезвычайного, а затем военного положения на территории Украины с 24.02.2022, что подтверждено сертификатами ТПП России и Украины, которые препятствовали  возможности исполнения обязательств Ответчика по Договору и повлекли существенное изменение обстоятельств при исполнении Договора. Помимо этого ответчик сослался на неравность условий Договора относительно ответственности, поскольку его ответственность  как поставщика составляет 0,05 % в день, а истца как покупателя 0, 02% за каждый день просрочки; несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

Определением  суда от 19.07.2024 к участию в деле  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество «Атомстройэкспорт».

В судебном заседании представитель  истца поддержал  исковые требования, а представитель ответчика просил в иске отказать.

3 е лицо о времени  и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом, однако его представитель в судебное заседание не явился. 

Исследовав материала дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив представленные  доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения иска.

 09.07.2020 между АО «Силовые машины» (Заказчик) и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»  заключен договор №57385/20160469 на поставку оборудования для энергоблоков №№ 5 и 6 АЭС Куданкулам (далее – Договор). 

Согласно пункту 10.16 Договора все споры рассматриваются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору (достижение поименованных ключевых событий, поставка оборудования) истец начислил ответчику неустойку, которую и просит взыскать в  настоящем деле.

Между тем, как обоснованно указывает ответчик, неустойка истцом рассчитана без учета объявленных мораториев на начисление неустойки. 

Исполнение обязательств по Договору пришлось на период введения ограничительных мер, связанных с COVID-19 и прекращением нормального функционирования организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Согласно п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики Правительство Российской Федерации вправе в исключительных случаях ввести на определенный срок мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами (далее – мораторий).

В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория. 

Из системного содержания положений подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 и абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве следует, что на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, заключающиеся, в том числе, в запрете начисления неустойки и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

Согласно Обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» (далее – Постановление № 428 от 03.04.2020) введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении организаций, включенных в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями и порядком, определенными Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. 

В пункте 5 Постановления № 428 от 03.04.2020 сказано, что оно  вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. Данное Постановление было опубликовано 06.04.2020 и действовало до 06.10.2020 включительно. Впоследствии с 07.10.2020 мораторий был продлен еще на 3 месяца Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

Протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 № 3 утвержден Перечень системообразующих организаций российской экономики (письмо Минэкономразвития России от 23.03.2020 № 8952-РМ/Д18и), в пункт 452 которого включено АО «Группа ГМС» (ИНН 

<

***>).

В письме Минэкономразвития России от 23.03.2020 № 8952-РМ/Д18и «О перечне системообразующих организаций» (вместе с Перечнем системообразующих организаций российской экономики, утвержденных. протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 № 3) имеется примечание «включая компании, входящие в холдинг».

В пункте 1 Критериев и порядка включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики (утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв) установлено, что в перечень системообразующих организаций российской экономики (перечень) включаются организации с учетом аффилированности в рамках их групповой (холдинговой) структуры (группа компаний).

Таким образом, в Перечень системообразующих организаций российской экономики, утвержденный протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития Российской экономики от 20.03.2020 № 3, считаются включенными все входящие в состав системообразующего предприятия (в состав холдинга) организации. 

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» входит в холдинг АО «Группа ГМС», которое входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022 (далее – Постановление № 497) с 01.04.2022 введен мораторий сроком на 6 месяцев  на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в соответствии с которым мораторий применим, в том числе к Поставщику. 

Как указано выше, пунктом 3 статьи 9.1 Закона о  банкротстве предусмотрено, что  не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении № 305-ЭС23-1845 от 14.06.2023,   мораторий имеет генеральный характер, то есть распространяется не только  на денежные  обязательства.

Ответчик в отзыве на иск подробно описывает  различные обстоятельства, которые могут расцениваться  как просрочка исполнения истцом встречных обязательств, в частности, он  приводит данные длительного согласования технической документации и исходных данных для проектирования, о несвоевременном авансировании.

Истец приведенные ответчиком обстоятельства не оспорил.

 В соответствии с пунктом  1 статьи  328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

Согласно пункту  3 статьи  405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В соответствии с пунктом  1 статьи  406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он, в том числе, не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства.

Также судом установлено наличие обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых ответчик не смог исполнить обязательства.

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В пункте 11.2 Договора стороны согласовали, что к обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться следующие, включая, но не ограничиваясь: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (Украина), как изготовитель аналогичных турбопитательных насосов для блоков № 1-4 АЭС «Куданкулам», согласован/одобрен Инозаказчиком (Индийская корпорация по атомной энергетике) в качестве единственного изготовителя Оборудования по Договору, с которым Ответчиком был заключен договор поставки № ТК-1113/2020-01 от 29.03.2021 на изготовление оборудования для блоков № № 5, 6 АЭС «Куданкулам».

При этом Ответчик указывает следующие обстоятельства выбора  указанного изготовителя оборудования.

В соответствии с условиями Договора Поставщик, обладая необходимой квалификацией, знаниями и опытом поставки с выполнением требований нормативно-технических документов, принял обязательство изготовить и поставить в Место поставки для энергоблоков № 5 и № 6 АЭС Куданкулам Оборудование в объеме, сроки, по ценам и на условиях, указанных в Приложениях № № 1.1. и № 1.2. к Договору в соответствии с Техническими требованиями к основному и вспомогательному Оборудованию здания турбины энергоблоков № 5 и № 6 АЭС Куданкулам и указанными в них объемом, границами проектирования и поставки, разделением работ и прочими требованиями, указанными в Договоре, в том числе: 

разработать самостоятельно или с привлечением субподрядных организаций, согласовать Техническую документацию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, а также в случаях, предусмотренных действующей нормативной документацией;

предоставить Заказчику, Покупателю и Генподрядчику/Генпроектировщику документацию, включая исходные данные для проектирования; разработать, согласовать с организациями, указанными в п. 4.2.1.1. Договора и предоставить Заказчику и Генподрядчику/Генпроектировщику Техническую документацию в объеме Приложений 5.4;

изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Проектной документации, разрабатываемой Поставщиком, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания; 

выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после Приемочной комиссии, маркировку Грузовых мест; поставить специальный инструмент, расходные материалы и ЗИП на Гарантийный срок;

доставить Грузовые места в Место поставки; произвести шеф-монтаж; выполнить Гарантийное обслуживание и ремонт Оборудования в течение Гарантийного срока;

выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором и приложениями к нему.

Оборудование, изготавливаемое по Договору, турбопитательные насосы ПТА3750-75-2 (коды KKS: 50(60)LAC10AP002, 50(60)LAC20AP002) и ПТА 3800-20-2 (коды KKS: 50(60)LAC10AP001, 50(60)LAC10AP001), изготавливаемые для энергоблоков № 5 и № 6 АЭС «Куданкулам» с реакторной установкой типа ВВЭР-1000, являются сложной технической продукцией, крупногабаритным оборудованием длительного цикла изготовления. 

Строительство АЭС «Куданкулам» осуществляется на основании контракта с Инозаказчиком (Корпорацией по Атомной Энергии Индии Лтд, Предприятие Правительства Индии в составе Департамента по атомной энергии, г. Мумбаи, Республика Индия) в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия от 05.12.2008.

Застройщик – технический заказчик объекта – Индийская корпорация по атомной энергетике. Генеральный проектировщик и поставщик оборудования – АО АСЭ. Энергоблоки № 5 и № 6 являются третьей очередью АЭС «Куданкулам», сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000. Проект включает в себя сооружение двух водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР-1000, использующих двуокись урана в качестве топлива и легкую воду в качестве теплоносителя и замедлителя.

28.08.2019 письмом исх. № И-УСЗВК-0021701 АО «Силовые машины» обратилось к АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с предложением предоставить коммерческое предложение о поставке турбопитательных насосов ПТА3750-75-2 и ПТА 3800-20-2 для АЭС «Куданкулам».

Аналогичное насосное оборудование было ранее поставлено АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» для энергоблоков № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 по договору № ТК-417/2016-01 от 12.09.2016, заключенному с АО «Силовые машины». При этом, заводом-изготовителем данного оборудования являлось АО «Сумский завод «Насосэнергомаш». 

В соответствии с условиями Контракта с Инозаказчиком на поставку из Российской Федерации оборудования с длительным циклом изготовления и первоочередного оборудования для реализации блоков № 5 и № 6 для АЭС «Куданкулам» каждый привлекаемый изготовитель оборудования 1, 2, 3 классов безопасности должен пройти процедуру одобрения Инозаказчиком. При этом, в рамках процедуры одобрения в обязательном порядке должен быть передан референтный список с предыдущим опытом разработки и изготовления аналогичного оборудования с классом безопасности не ниже планируемого к поставке. 

В адрес АО «Силовые машины» Поставщиком был направлен перечень поставок насосного оборудования, изготовленного АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» для блоков АЭС мощностью 1000 MW за период с 2004 по 2018 года.

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», как изготовитель аналогичных турбопитательных насосов для блоков № 1-4 АЭС «Куданкулам», согласован/одобрен Инозаказчиком в качестве единственного изготовителя.

27.09.2019 письмом исх. № ЕА/19-2894 АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» предоставило АО «Силовые машины» коммерческое предложение, по итогам рассмотрения которого АО «Силовые машины» и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» заключили Договор.

До заключения Договора АО «Силовые машины» подтвердило комплект поставки насосов ПТА3750-75 и ПТА3800-20 для блоков № № 5, 6 АЭС «Куданкулам» аналогично комплекту поставки насосов ПТА3750-75 и ПТА3800-20 для блоков № № 3, 4 АЭС «Куданкулам».

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» на момент заключения Договора являлся референтным поставщиком в составе Группы ГМС. Контрактация насосного оборудования, производства заводов, входящих в группу ГМС, для нужд атомной отрасли происходит через торговую компанию группы — АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

В связи с вышеуказанным  между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» был заключен договор № ТК-1113/2020-01 от 29.03.2021 на изготовление оборудования для блоков № № 5, 6 АЭС «Куданкулам». 

Турбопитательные насосы ПТА3750-75-2 и ПТА3800-80-2 спроектированы для совместной эксплуатации с приводной турбиной К-8-0,65 ПА производства АО «Калужский турбинный завод» для АЭС «Куданкулам». ФИО3 является приводом указанных выше насосов. Данные насосы совместно с турбиной интегрированы в питательный турбонасосный агрегат ТПНА. Таким образом, все габаритно-присоединительные размеры указанных выше изделий взаимосвязаны. Изменение параметров одного из элементов агрегата ТПНА (насоса или турбины) влечет за собой значительные изменения конструкции всего агрегата ТПНА и, соответственно, машинного зала АЭС Куданкулам, блоки 5 и 6.

Технические условия на турбину и на насосы были взаимосогласованы между АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» и АО «Калужский турбинный завод», поскольку и турбина, и турбопитательные насосы (главный ПТА3750-75-2 и бустерный ПТА3800-20-2) эксплуатируются совместно и устанавливаются на единый виброизолированный фундамент завод «К компетенции и ответственности завода-изготовителя АО «Сумский Насосэнергомаш» относится выдача исходных данных для разработки рабочей конструкторской документации на единый виброизолированный фундамент агрегата (турбина с редуктором и насосами) с поставкой АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» виброизолирующих элементов/демпферов. 

При этом со стороны АО «Калужский турбинный завод» осуществлялось изготовление приводной турбины (поставляется отдельно), а также другими Субпоставщиками АО «Силовые машины» осуществлялось изготовление другого вспомогательного Оборудования (часть Оборудования частично изготовлена): трубопроводов высокого давления; изготовление демпферов и фильтров на всасывающем трубопроводе; выдана проектная документация на фундамент для организации строительных работ.

22.02.2022 принято Постановление Совета Федерации Федерального собрания РФ № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации», которым было согласовано использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, что послужило началом специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24.02.2022.

24.02.2022 на территории Украины согласно Указу Президента Украины от 24.02.2022г. № 64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX (со всеми изменениями), введено военное положение, действующее до сих пор. 

28.02.2022 письмом № 26-07/01519 АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» уведомило АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» о невозможности исполнить свои обязательства по изготовлению Оборудования по причине наличия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), подтвержденных письмом Торгово-промышленной палаты Украины № 2021/02.0-7.1 от 28.02.2022.

28.02.2022 письмом исх. № ЕА/22-557 АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» уведомило АО «Силовые машины» о предполагаемом начале действия обстоятельств непреодолимой силы по Договору в связи с введением с 24.02.2022 на территории Украины военного положения, в связи с чем работа АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», расположенного на территории Украины, полностью остановлена.

Уведомлением № 2024/02.0 7.1. от 28.02.2022 Торгово-промышленная палата Украины засвидетельствовала наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на основе Указа Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине» и подтвердила, что они являются объективными обстоятельствами для субъектов хозяйственной деятельности по договору, отдельным налоговым и/или другим обязательствам/обязанностью исполнение которых/которого произошло в соответствии с условиями договора, контракта, соглашения, законодательных и других нормативных актов и исполнения соответственно которых/которого стало невозможным в установленный срок в следствие наступления таких форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

К обстоятельствам, препятствующим исполнению обязательств по Договору, относятся:

- закрытие транспортного сообщения (автомобильного, железнодорожного, воздушного) между Российской Федерацией и Украиной и невозможностью в связи с этим взаимодействия между сторонами;

- запрет импорта оборудования на территорию РФ по причине введения на территории Украины военного положения (Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 «О введении военного положения в Украине»);

- приостановка деятельности АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», что подтверждается письмом № 26-07/01519 от 28.02.2022, письмом Торгово-промышленной палаты Украины № 2021/020-7.1 от 28.02.2022;

- введение с 24.02.2022 запрета взаиморасчетов с резидентами РФ для украинских компаний, в частности запрета совершать валютные операции в случаях, когда участниками таких операций являются юридические и физические лица, имеющие местонахождение в Российской Федерации (п. 17 постановления Национального банка Украины №18 от 24.02.2022), а также введение моратория (запрета) на исполнение, в том числе в принудительном порядке денежных и других обязательства, кредиторами (взыскателями) по которым являются юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 1 постановления Кабинета Министров Украины № 187 от 03.03.2022).

12.05.2023 в связи с проведением специальной военной операции Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», предусматривающее санкции в отношении АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».   

Данным решением сроком на 10 (десять) лет в отношении АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» принято:

блокирование активов;

ограничение торговых операций (полное прекращение); 3. ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц — резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно Закону;

запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с Законом (полный запрет);

запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельностью;

введение дополнительных мероприятий в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Санкции прямым образом затрагивают передачу оборудования, изготовленного АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» на территорию Российской Федерации и непосредственно АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Сопоставление введенных санкций дает основание полагать, что исполнение договорных обязательств оказалось невозможным по обстоятельствам, находившимся вне контроля АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

При участии в конкурентной процедуре и при заключении Договора АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» не могло предвидеть наступление данных событий и их последствий.

Заключая Договор до начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины 24.02.2022, АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» правомерно рассчитывало на своевременное и точное исполнение принятых на себя обязательств. 

События, препятствующие нормальному исполнению условий Договора, связаны с мерами запретительного характера, введенные недружественным государством в отношении Российской Федерации.

Указанные ограничения практически нивелируют возможность экспорта оборудования в Российскую Федерацию или для российских конечных пользователей, причем как прямого, так и транзитного. 

Кроме того, на территории Сумской области и г. Сумы, в границах которого расположен АО «Сумский завод «Насосэнергомаш», согласно информации Минобороны России и средств массовой информации, военные действия ведутся до сих пор.

Несмотря на предпринятые АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» меры, поставка оборудования АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» стала окончательно невозможной, поскольку санкционные ограничения не были отменены, ужесточились и действуют до сих пор.

ТПП РФ в адрес АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» выданы сертификаты № 10/0097 от 08.02.2023, № 10/0690 от 07.11.2023, свидетельствующие наличие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), которые препятствовали с 24.02.2022 исполнению обязательств по договору № ТК-1113/2020-01 от 29.03.2021.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

 

Судья                                                              Шпачев Е.В.