210100063_5315301  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2080/2023

г. Белгород

11 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению МКУ  "УКС" Старооскольского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), третье лицо: ООО  «Лайт Декор» (ИНН 

<

***>), ООО «Электропромснаб» (ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить замечания по договору № 57 от 09.08.2019, при участии в судебном заседании представителей: от истца: ФИО2, доверенность от 14.04.2023; от ответчика: не явился, уведомлен; от третьих лиц: не явились, уведомлены, 

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования МКУ "УКС" Старооскольского городского округа (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» устранить замечания в течение 30-ти  календарных дней с момента вступления в законную силу решения Арбитражного  суда Белгородской области по договору № 57 от 09.08.2019 г. на выполнение работ по  устройству наружного освещения на автодороге № 21 (от южной объездной дороги до  проходной ОАО «СГОК») г. Старый Оскол, а именно:  

- установить светильники в количестве 4 шт., демонтированы ранее подрядной  организацией ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» для проведения экспертизы;  

- произвести замену светильников в количестве 30 шт.;  - произвести замену одного модуля на светильниках в количестве 16 шт.;  

- произвести замену двух модулей на светильниках в количестве 18 шт.;  - произвести замену трех модулей на светильниках в количестве 25 шт.  

Взыскать с ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. за  рассмотрение дела судом первой инстанции.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев