АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А10-3471/2018

11 сентября 2018 года

г. Улан-Удэ

 

Резолютивная часть решения объявлена 05 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л.Ф.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 672000, ул. Профсоюзная, д.23, г. Чита, Забайкальский край) к Обществу с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670047, ул. Павлова, д. 48А, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) о взыскании 2 543 904 руб. 70 коп – задолженности по договору №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015 о подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения объекта капитального строительства;

 

при участии в заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности №138 от 01.01.2018,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 02.03.2018, 

 

установил:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» о взыскании 2 543 904 руб. 70 коп – задолженности по договору №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015 о подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения объекта капитального строительства.

В обоснование исковых требований истец указал, что по договору №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015 выполнил мероприятия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры и подключению объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома в 111 квартале – комплексная застройка, дома №11/2, 11/3, 11/4, расположенные по адресу: 111 квартал в Октябрьском районе г. Улан-Удэ» с нагрузкой 0,7427 Гкал/час к эксплуатируемым сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения на сумму 3 793 904 руб 70 коп.

Истец пояснил, что ответчиком произведена оплата в размере 1 250 000 руб 00 коп.

Задолженность в размере 2 543 904 руб. 70 коп ответчиком не оплачена, что явилось основанием для обращения с иском в суд.

В качестве правового обоснования истец сослался на статьи 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик возражений по иску не заявил.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил следующее.

В соответствии с договором №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015 о подключении к сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения объекта капитального строительства ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (энергоснабжающая организация, ЭСО) обязуется выполнить мероприятия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры, указанные в п.2.2 договора и необходимые для подключения объекта капитального строительства, указанного в п.1.2 договора, и подключить этот объект к эксплуатируемым сетям инженерно-технического (теплового) обеспечения , а ООО «Сити-Строй» (заказчик) , осуществляющий строительство и/или реконструкцию объекта капитального строительства, обязуется выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению, осуществить мероприятия, указанные в п.2.1 договора, и оплатить услуги по подключению.

Согласно  пункту 1.2  договора объект капитального строительства: Многоквартирные жилые дома в 111 квартале – комплексная застройка, дома №11/2, 11/3, 11/4, расположенные по адресу: 111 квартал в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.

В пункте 1.3 договора согласованы заявленный размер нагрузки, местоположение точки подключения, дата подключения к тепловым сетям к жилым домам.

Срок осуществления ЭСО мероприятий по подключению – до 31.12.2015г. (п.1.4).

Согласно пункту 3.1 договора  за подключение к тепловым сетям объекта, указанного в п.1.2 договора, заказчик перечисляет ЭСО сумму в размере 3 793 904 руб 70 коп , в т.ч. НДС-18%. Оплата по договору установлена из расчета 5 108 260 руб 00 коп , в т.ч. НДС за 1 Гкал/час присоединяемой мощности в соответствии с Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия №2/140 от 25.12.2012г.

Дополнительным соглашением от 06.02.2017 стороны установили срок осуществления ЭСО мероприятий по подключению до 31.12.2017г.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Истец свои обязательства по договору выполнил в полном объеме , что подтверждается актом о готовности объекта капитального строительства подключению к тепловым сетям , актом о подключении, фиксирующий техническую готовность к подаче тепловой энергии на объект капитального строительства от 29.12.2017.

Согласно пункту 3.2 договора оплата по договору производится в следующем порядке:

- аванс в размере 15% платы за подключение, что составляет 569 085 руб 70 коп, перечисляется заказчиком в течение 15 дней с даты заключения договора,

- аванс в размере 50% платы за подключение, что составляет 1 896 952 руб 35 коп , перечисляется заказчиком в течение 90 дней с даты заключения договора , но в любом случае до даты фактического подключения объекта к тепловым сетям,

- окончательный расчет в размере 35% платы за подключение , что составляет 1 327 866 руб 65 коп , производится заказчиком в течение 15 дней с даты подписания акта о подключении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект заказчика, но в любом случае не позднее выполнения заказчиком условий подачи ресурсов.

Истец пояснил, что ответчиком произведена оплата в размере 1 250 000 руб 00 коп, что сторонами не оспаривается.

Иск заявлен о взыскании долга в размере 2 543 904 руб. 70 коп из расчета 3 793 904 руб 70 коп за минусом 1 250 000 руб 00 коп.

Ответчиком доказательств оплаты задолженности не представлено.

Возражений по иску ответчик не представил.

На основании статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации требование истца о взыскании задолженности по договору №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015 в сумме 2 543 904 руб. 70 коп обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины суд относит на  ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И Л:

Иск  удовлетворить  полностью.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 543 904 руб. 70 коп – задолженность по договору №АУ-3416-15/тех от 05.10.2015, 35 720 руб 00 коп -  расходы  по уплате  государственной  пошлины.

Решение по настоящему  делу вступает в законную силу  по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

 

Судья                                                                                                  Л.Ф. Салимзянова