Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 (резолютивная часть) 

город Волгоград 

«29» августа 2019 г.  Дело № А12-17720/2019  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены  Викторовны,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией  Александровой,  

при участии в судебном заседании: 

от отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского  муниципального района – ФИО1, доверенность от 05.08.2019; ФИО2,  начальник отдела, распоряжение от 05.02.2007 № 34;  

от общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт  ВолгаГражданПроект» – ФИО3, директор, решение единственного  участника от 16.08.2017 № 7;  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского  муниципального района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт  ВолгаГражданПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки  по муниципальному контракту;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский  институт ВолгаГражданПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского  муниципального района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 250 000 рублей  неустойки за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту от  31.01.2017 № 616269 на разработку проектной документации на строительство объекта  «Автомобильная дорога ст. Нижний Чир – х. Ближнеподгорский – х.  Ближнемельничный» в Суровикинском районе Волгоградской области». В  удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- изыскательский институт ВолгаГражданПроект» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 23 236 рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

СУДЬЯ Е.В. Пономарева