63/2022-2785(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-30500/2021

г. Новосибирск

12 января 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

ФИО1, при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело  по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Левый берег» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск,  к обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль-НСК» (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки строительства в рамках гарантийных  обязательств,  

при участии представителей: истца – ФИО3, доверенность от 30.09.2021, паспорт, диплом; ответчика – не явился, извещен надлежащим образом, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль-НСК»  в течение тридцати календарных дней с момента вступления в законную силу  решения суда устранить следующие недостатки:  

в отношении дома по адресу: 

<

...>: 

- устранить выпадение кирпича на 9 этаже с правого торца здания;  - устранить выпадение кирпича на 6 этаже с правого торца здания;  

- устранить трещину на 1 этаже в левой части стены дома со стороны двора;  

- устранить щель между бетонной отмосткой и цоколем со стороны двора  дома;  

- устранить обрушение отделки стены размером 1,5 м2 на входе в подвал со  стороны двора дома;  

- осуществить работы по герметизации ввода холодной, горячей воды и  системы отопления в подвал здания;  

- осуществить работы по заземлению вводных в подвал здания труб  отопления, холодного и горячего водоснабжения;  

- установить второй насос согласно схеме узла подмеса (узла смешения); 

- осуществить работы по герметизации выпуска канализационной трубы,  выполнить бетонную стяжку вокруг гильзы.  

в отношении дома по адресу: 

<

...>: 

- устранить трещину, расположенную в районе второго этажа, а также  выпадение кирпичей на 2,5,6 этажах с правого торца здания (со стороны  трамвайных путей);  

- устранить выпадение кирпичей на 4,5 этажах на стене со стороны левого  торца здания;  

- устранить щель между бетонной отмосткой и цоколем здания, а также  растрескивание бетонной отмостки и цоколя с правого торца здания (со  стороны трамвайных путей);  

- устранить разрушение внешней отделки цокольного этажа здания со  стороны строящихся домов;  

- устранить трещину в облицовке цоколя со стороны левого торца здания; 

- устранить разрушение штукатурки у входа в подвальное помещение со  стороны левого торца здания;  

- устранить трещину в крыльце подъезда № 1; 

- устранить горизонтальную трещину по всей длине ступени входной группы  подъезда № 2;  

- устранить сквозную трещину шириной 1-3 см на стене с правой стороны от  входа в подвал возле подъезда № 2;  

- устранить разрушение части облицовки цоколя на площади 50 см2 возле  подъезда № 2;  

- осуществить работы по герметизации ввода холодной, горячей воды и  системы отопления в подвал здания;  

- осуществить работы по заземлению вводных в подвал здания труб  отопления, холодного и горячего водоснабжения;  

- осуществить работы по устройству контейнерных площадок согласно  проектной декларации и проектной документации;  

- осуществить работы по установке узла смешения в соответствии с  требованиями проектной документации.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль- НСК» в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «Левый берег» государственную пошлину по иску в размере 6 000  рублей.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Э л е к т р онная п одпись  действит ельна. ФИО1 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 6:48:15

Кому выдана ФИО1