АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Советская, д.30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)61-04-16; 64-37-45; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск                                                                      

19.02.2021                                                               Дело № А62-10073/2020 

 

Резолютивная часть решения оглашена 17.02.2021

Полный текст решения изготовлен  19.02.2021

 

         Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСНАБ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

об обязании в срок до 15.06.2021 безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 38-аэф/2017,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности;

от ответчика: не явился, извещен надлежаще;

 

                                                У С Т А Н О В И Л:  

 

       Администрация муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области  (далее – истец, Администрация) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСНАБ" (далее – ответчик, Общество) ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 38-аэф/2017:

- на покрытии дворового проезда к дому № 4 по ул. Чистякова в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоины площадью 50 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 36 по ул. Мира в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоину площадью 1 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 5 по ул. Калинина в г.Дорогобуж Смоленской области устранить трещины общей площадью 0,5 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 8 по ул. Чистякова в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоины площадью 2 кв.м. в срок до 15.06.2021.

        Ответчик отзыв на иск не представил.

        Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик)  04.09.2017 заключен муниципальный контракт № 38-аэф/2017 Благоустройство дворовой территории (далее – контракт) по условиям, которого подрядчик обязуется выполнить работы Согласно п. 1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить благоустройство дворовых территорий в соответствии с условиями контракта, техническим заданием на выполнение работ, утвержденным заказчиком.

     Цена контракта составляет 13167002,13 руб. (пункт 3.1 контракта).

     Если в период аварийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте (пункт 2.7 контракта).

        Согласно акту сдачи - приемки выполненных работ от 10.11.2017 по контракту результаты работ сданы заказчику без претензий к качеству.

     Комиссией, в составе заместителя Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленске а области - председателя комитета по жилищно коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству ФИО3, начальника     отдела     по жилищно-коммунальному Администрации  ФИО4, главного специалиста сектора по архитектуре и градостроительству комитета Администрации ФИО5, составлены акты визуального осмотра дворовой территории к дому № 4 по ул. Чистякова в г. Дорогобуже от 17.04.2019, от 25.05.2019 (л.д.  26, 29) и установлено, что на покрытии дворового проезда из горячих асфальтобетонных смесей образовались выбоины площадью 50 м2.

        В адрес ответчика  было направлено письмо от 18.04.2019 (за исх. № 1744) о необходимости  в срок до 24.05. 2019 года устранить дефект дорожного полотна дворового проезда к жилому дому № 4 по ул. Чистякова в г. Дорогобуже (напротив 3 подъезд д) в виде выбоин.

      При визуальном осмотре дворовых территорий в г. Дорогобуже, отремонтированных в рамках исполнения  контракта комиссией составлены акты от 30.10.2019 и от 11.11.2019, согласно, которых  

1.      На дворовом проезде к дом; № 4 по ул. Чистякова выявлено:

-        на покрытии дворового гроезда из горячих асфальтобетонных смесей образовались выбоины площадью 5(1 м2.

2.      На дворовом проезде к дом; № 36 по ул. Мира выявлено:

-        на покрытии дворового проезда из горячих асфальтобетонных смесей образовалась выбоина площадью 1 м2.

3.      На дворовом проезде к дому №5 по ул. Калинина выявлено:

-        на покрытии дворового проезда из горячих асфальтобетонных смесей образовались трещины общей площадью 0,5 м2.

4.      На дворовом проезде к дому № 5 по ул. Путенкова выявлено:

-        в месте примыкания к ул. Путенкова имеется застой воды.

      Администрацией   было направлено письмо от 31.10.2019 за исх. № 5763 с просьбой в срок до 08.11.2019 устранить выявленные нарушения.

       На данное уведомление заказчику поступил ответ, согласно которому, в связи с объявлением карантина по поводу пандемии коронавирусной инфекции подрядчик не имеет возможности приступись к устранению выявленных недостатков, и гарантирует устранение недостатков во второй половине мая 2020 года.

    08.10.2020 в адрес подрядчика было направлено уведомление о неисполнении подрядчиком гарантийных обязательств по контракту  и предложением устранить выявленные  дефекты дворового проезда к жилому дому № 5 по ул. Калинина в виде трещин в срок до 19.10.2020.

        Данное уведомление подрядчиком было оставлено без удовлетворения.

         В адрес ответчика была направлена досудебная претензия, содержащая требование об устранении выявленных недостатков, которая оставлена без удовлетворения.

       Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела документы, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

        На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

        В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязательств.

        Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

        В силу п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

       Согласно пункту  2.6 контракта гарантийный период на выполняемые работы составляет 60 месяцев с момента подписания акта приемки работ приемочной комиссией.

          Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, то подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами т зафиксированные в акте (пункт 2.7 контракта).

      Как было указано выше, истец заявил требование об устранении строительных недостатков  в пределах гарантийного срока, с учетом пункта 2.6 договора и даты приемки выполненных работ – 10.11.2017.

        Все выявленные дефекты являются устранимыми.

         Со своей стороны ответчик не представил суду доказательств того, что имеющиеся строительные дефекты (недостатки) образовались не по его вине. 

       Учитывая изложенное, принимая во внимание действие в период гарантийного срока презумпции вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и возложение именно на подрядчика в соответствии со статьей 65 АПК РФ обязанности по доказыванию того, что работы выполнены им качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки не являются следствием выполненных подрядчиком работ, суд, установив недоказанность подрядчиком факта качественного выполнения им работ, учитывая, что принятие результата работ без разногласий и замечаний и ввод объекта в эксплуатацию не препятствует предъявлению требований, связанных с выявлением недостатков в период эксплуатации объекта, суд удовлетворяет исковые требования об обязании подрядчика устранить выявленные недостатки.

      С учетом положений статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию  в доход федерального бюджета.

       Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

 

                                                       Р Е Ш И Л :

 

       Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСНАБ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в срок до 15.06.2021 безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 38-аэф/2017:

- на покрытии дворового проезда к дому № 4 по ул. Чистякова в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоины площадью 50 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 36 по ул. Мира в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоину площадью 1 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 5 по ул. Калинина в г.Дорогобуж Смоленской области устранить трещины общей площадью 0,5 кв.м.;

- на покрытии дворового проезда к дому № 8 по ул. Чистякова в г.Дорогобуж Смоленской области устранить выбоины площадью 2 кв.м.

       Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕХСНАБ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 рублей государственной пошлины.

      Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

      В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

       Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                Е.Г. Бажанова