39_8524215 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-35217/19

06 июня 2019 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.В. Базаевой,  рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению  

ООО "СТРОЙ-ПРОЕКТ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС"(ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о внесении изменений в государственный контракт при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в п. 3.4. государственного контракта № Ф.2018.188678  от 10.05.2018 г. на выполнение строительства объекта капитального  строительства: Пересечение в одном уровне на автомобильной дороге М-9  «Балтия» - Веледниково - Лешково км. 5,190 в Истринском районе Московской  области и изложить его в следующей редакции: «Окончание выполнения работ  21 месяц с даты начала выполнения работ, в соответствии с Календарным  графиком производства работ».  

Внести изменения в п. 17.1. государственного контракта № Ф.2018.188678  от 10.05.2018 г. на выполнение строительства объекта капитального  строительства: Пересечение в одном уровне на автомобильной дороге М-9  «Балтия» - Веледниково - Лешково км. 5,190 в Истринском районе Московской  области и изложить его в следующей редакции: «Настоящий Контракт вступает  в силу с даты его заключения Сторонами, и действует до 24 января 2020 года.  Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от  исполнения принятых на себя обязательств.»; Приложение № 2 к  государственному контракту № Ф.2018.188678 от 10.05.2018 г. на выполнение  строительства объекта капитального строительства: Пересечение в одном  

уровне на автомобильной дороге М-9 «Балтия» - Веледниково - Лешково км.  5,190 в Истринском районе Московской области «Календарный график  производства работ» изложить в редакции Приложения № 1 «Календарный  график производства работ» приложенному к настоящему исковому заявлению.  

Обязать Государственное казенное учреждение Московской области  «Дирекция дорожного строительства» передать Обществу с ограниченной  ответственностью «Строй-Проект» строительную площадку в проектных  границах/отметках Пк0-60 - Пк1+63 (левая сторона) и ПкО-60 - Пк1+63 (правая  сторона) расположенную на земельных участках с кадастровыми номерами :  50:08:0050247:263 ; 50:08:0000000:166160 ; 50:08:0050241:124;  

Обязать Государственное казенное учреждение Московской области  «Дирекция дорожного строительства» продлить срок действия выданного  29.06.2018 г. разрешения на строительство № RU50-8-l 1113-2018 до 24 января  2020 года;  

 Взыскать с ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС"(ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СТРОЙ-ПРОЕКТ"(ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере  6 000 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия  арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова