1159/2019-58953(2) 

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А75-18227/2018

15 октября 2019 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2019 года Постановление изготовлено в полном объеме 15 октября 2019 года 

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Краецкой Е.Б., судей Грязниковой А.С., Сидоренко О.А., при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный  номер 08АП-12085/2019) общества с ограниченной ответственностью «РН-Снабжение»  на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  16.07.2019 по делу № А75-18227/2018, принятое по иску общества с ограниченной  ответственностью «РН-Снабжение» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  акционерному обществу «ГСМ Нефтемаш» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о  взыскании 94 606 201 руб. 47 коп.,  

при участии в судебном заседании представителей:  

от общества с ограниченной ответственностью «РН-Снабжение» - ФИО2  (по доверенности от 01.01.2019 сроком до 31.12.2019);  

от акционерного общества «ГСМ Нефтемаш» - ФИО3 (по доверенности от  19.06.2018 сроком до 19.06.2021);  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РН-Снабжение» (далее  – ООО «РН-Снабжение», истец) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры с исковым заявлением к акционерному обществу «ГСМ  Нефтемаш» (далее – АО «ГСМ Нефтемаш», ответчик) о взыскании 94 606 201 руб. 47  

коп. неустойки по договору поставки материально-технических ресурсов от 26.08.2015   № РСН-0085/16 (далее – договор).  

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 16.07.2019 по делу № А75-18227/2018 исковые требования удовлетворены частично:  с ответчика в пользу истца взыскано 11 000 000 руб. неустойки, а также 200 000 руб.  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Восьмой  арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение  суда первой инстанции отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований  о взыскании неустойки в размере 83 606 201 руб. 47 коп., требования ООО «РН- Снабжение» удовлетворить в полном объеме.  

В обоснование жалобы ее податель приводит доводы об отсутствии оснований  для снижения неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК РФ). Доводы ответчика о просрочке товаров по вине истца не  подтверждены материалами дела, а судом первой инстанции не учтено, что ответчик в  процессе согласования устранял замечаний не в полном объеме.  

Кроме того, ставка неустойки согласована сторонами исходя из принципа  свободы договора и подразумевает ее соразмерность нарушенным обязательствам, а  исключительных обстоятельств для ее снижения не имеется.  

Судом первой инстанции не учтено, что в случае снижения неустойки ее размер в  любом случае должен превышать двукратную ставку рефинансирования Центрального  банка Российской Федерации. В противном случае, установление в договоре условия о  неустойки утрачивает практический смысл, поскольку размер взыскиваемых процентов  на основании статьи 395 ГК РФ в силу закона равен ставке рефинансирования.  

АО «ГСМ Нефтемаш» в отзыве на апелляционную жалобу просит решение  Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.07.2019  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, указывая на  необоснованность доводов ответчика.  

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО «РН- Снабжение» поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просит решение  суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.  

Представитель АО «ГСМ Нефтемаш» поддержал доводы, изложенные в отзыве  на апелляционную жалобу, просит оставить решение суда первой инстанции без  

изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, считает, что убытки  отсутствуют.  

При рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции  руководствуется частью 5 статьи 268 АПК РФ с учетом разъяснений, изложенных в  пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной  инстанции», согласно которому, если заявителем подана жалоба на часть судебного  акта, суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой  части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной  жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права,  приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.  

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, заслушав  представителей и истца и ответчика, проверив законность и обоснованность решения  суда первой инстанции в обжалуемой части, суд апелляционной инстанции приходит к  следующему.  

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела,  26.08.2015 между акционерным обществом «РН-Снабжение» (в настоящее время  ООО «РН-Снабжение, покупатель) и АО «ГСМ Нефтемаш» (поставщик) заключен  договор, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность  покупателя товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по цене и срокам поставки  согласно условиям договора и приложений, а покупатель принять и оплатить товар  (пункт 1.1 договора).  

Базис поставки товара, график и сроки поставки, а также иные условия поставки  оговариваются по каждой партии товара отдельно и отражаются в приложении  (спецификации) (пункт 4.1 договора).  

В случае выявления несоответствия количества поставленного товара  количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства  поставщика в части поставки отсутствующего количества товара считаются  неисполненными и поставщик несет ответственность за просрочку поставки товара в  соответствии с пунктом 8.1 договора (пункт 5.3 договора).  

Пунктом 8.1.1 договора стороны согласовали, что в случае нарушения сроков  поставки товара, предусмотренных в настоящем договоре и приложениях к нему,  поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,3% от стоимости не поставленного  

в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 30% от стоимости не  поставленного в срок товара.  

Указав, что в ходе исполнения договора в период с 2016 по 2017 год ответчиком  поставлена продукция с нарушениями согласованных сроков, истец обратился в  арбитражный суд с иском о взыскании договорной неустойки, начисленной на  основании пункта 8.1.1 договора в размере 94 606 201 руб. 47 коп.  

Суд первой инстанции при разрешении спора руководствовался статьями 309,  310, 429.1, 506 ГК РФ и условиями договора с учетом дополнительных соглашений,  исходил из того, что между сторонами сложились правоотношения по договору  поставки.  

Учитывая доводы истца и ответчика, суд установил, что ООО «ГСМ Нефтемаш»  в нарушение условий договора осуществило поставку товара по приложениям  (спецификациям) к договору с нарушением установленных сроков, при этом датой  фактической поставки товара следует считать дату устранения его недостатков  ответчиком либо передачи (досылки) всех необходимых документов, относящихся к  товару.  

Доводы ответчика о вине истца в просрочке сроков поставки вследствие  длительного согласования документации отклонены.  

Учитывая нормы 329, 330, 331 ГК РФ и пункт 8.1.1 договора, поскольку ответчик  допустил нарушение сроков поставки товара, требование истца о привлечении АО  «ГСМ Нефтемаш» к ответственности в виде взыскания договорной неустойки признаны  судом обоснованными.  

Расчет неустойки (пени) проверен и принят судом первой инстанции. 

На основании статьи 333 ГК РФ и заявления ответчика суд пришел к выводу о  необходимости снижения неустойки до 11 000 000 руб., что является близким  значением к размеру неустойки (пени) рассчитанной исходя из однократной ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, и частичном  удовлетворении исковых требований.  

Повторно рассмотрев дело в пределах доводов апелляционной жалобы, судом  апелляционной инстанции не установлено оснований для отмены или изменения  обжалуемого судебного акта.  

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством,  

независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В настоящем случае в пункте 4.2 договора стороны предусмотрели, что в случае  нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает покупателю пеню в размере  0,3% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не  более чем 30% от стоимости не поставленного в срок товара.  

Поскольку судом установлено ненадлежащее исполнение своих обязательств, что  не оспаривается сторонами, истец имеет право на взыскание договорной неустойки.  

Доводов о вине покупателя, неверном определении сроков поставки податель  жалобы не приводит, а возражения сводятся к неправомерному снижению взысканной  суммы по правилам статьи 333 ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о  таком уменьшении.  

В пункте 2 статьи 333 ГК РФ установлено, что уменьшение неустойки,  определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если  будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может  привести к получению кредитором необоснованной выгоды.  

Гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа  обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их  неисполнение или ненадлежащее исполнение.  

Право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения  явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

При этом, суд должен установить баланс между применяемой к нарушителю  мерой ответственности (неустойкой) и оценкой действительного (а не возможного)  

размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (определение  Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О).  

Из пункта 77 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее -  постановление № 7) следует, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей  уплате коммерческой организацией, допускается в исключительных случаях, если она  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение  кредитором необоснованной выгоды.  

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в  том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие  нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65  АПК РФ).  

В силу статьи 333 ГК РФ признание несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в  каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом  конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон. Критериями для  установления явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки,  значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных  нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательства и другое (пункт 2  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами  статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

В пункте 73 Постановления № 7 разъяснено, что несоразмерность и  необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер  убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства,  значительно ниже начисленной неустойки.  

В пункте 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения  арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее  - Информационное письмо № 17) разъяснено, что к последствиям нарушения  обязательства могут быть отнесены не полученные истцом имущество и денежные  

средства, понесенные убытки, другие имущественные и неимущественные права, на  которые истец вправе рассчитывать в соответствии с законодательством и договором.  

Критериями для установления явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий  процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы убытков,  вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательства и др.  (пункт 2 Информационного письма № 17).  

Формальный подход к реализации своего права на применение мер  ответственности к контрагенту, получение денежных средств в виде начисленной  неустойки при фактическом отсутствии понесенного ущерба обуславливает собой  неосновательное обогащение, которое, в силу вышеприведенных норм, не допускается.  

В настоящем случае суд первой инстанции принял во внимание, что поставка  товара осуществлялась без предварительной оплаты, со значительной отсрочкой  платежа, отсутствие в деле доказательств возникновения у ООО «РН-Снабжение»  убытков, вызванных нарушением обязательств сопоставимых с размером неустойки  (пени), отсутствие претензий конечных покупателей, доказательств невозможности  осуществить доставку товара до 13 месторождения с учетом возможностей сезонного  завоза (статьи 65, 68 АПК РФ), в связи с чем пришел к выводу о том, что размер  неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения ООО «ГСМ Нефтемаш»  договорных обязательств.  

Суд апелляционной инстанции соглашается с данным выводом, отмечая, что  указанные основания надлежащими доказательствами подателем жалобы не  опровергнуты.  

Согласно разъяснениям пункта 74 Постановления № 7, возражая против  заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать  возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ), но вправе представлять  доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для  кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно,  например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по  кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период,  валютных курсов и т.д.).  

Доказательств наличия у истца убытков не представлено. Кроме того, ООО «РН- Снабжение» не лишено возможности требовать возмещения убытков в части, не  покрытой неустойкой, при подтверждении наличия реального ущерба.  

Как разъяснено в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи  333 Гражданского кодекса Российской Федерации», разрешая вопрос о соразмерности  неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя  величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из  двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого  нарушения.  

Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера  допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не  может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из  однократной учетной ставки Банка России.  

Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на  основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в  экстраординарных случаях, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что  размер платы за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями  обязательства (заем, кредит, коммерческий кредит), значительно превышает обычно  взимаемые в подобных обстоятельствах проценты.  

Между тем, в настоящем случае имеет место взыскание договорной неустойки за  нарушение срока поставки товара, а не денежного обязательства.  

Согласно разъяснениям пункта 76 Постановления № 7, правила пункта 6 статьи  395 ГК РФ о недопустимости снижения взыскиваемых процентов за нарушения  денежного обязательства ниже суммы, определенной исходя из однократной ставки  Центрального банка Российской Федерации, не применяются при уменьшении  неустойки, установленной за нарушение неденежного обязательства, если иное не  предусмотрено законом.  

Иное законом не предусмотрено. 

Соответственно, в настоящем случае снижение договорной неустойки до суммы,  исчисленной исходя из однократной учетной ставки Центрального банка Российской  Федерации и ниже ее, допустимо.  

Снижение размеров штрафов и неустойки не ущемляет права истца, а  устанавливает баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и  оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате  конкретного правонарушения, отвечает критерию соразмерности.  

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу, что арбитражным  судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы  доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие  применению нормы материального и процессуального права, принято законное и  обоснованное решение (в обжалуемой части).  

Различная оценка одних и тех же фактических обстоятельств, различная трактовка  норм права судом первой инстанции и подателем жалобы, не является правовым  основанием для отмены решения суда, так как выводы суда первой инстанции,  изложенные в решении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и  требованиям законодательства.  

Таким образом, подателем жалобы не представлено в материалы дела  надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы  апелляционной жалобы не основаны на доказательственной базе или нормах права, не  влияют на обоснованность и законность судебного акта, не опровергают выводы суда  первой инстанции, в связи с чем подлежат отклонению.  

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции не усматривает оснований  для отмены законного и обоснованного решения суда.  

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270  АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной  инстанции не установил.  

Апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы  по правилам статьи 110 АПК РФ относятся на ее подателя.  

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 16.07.2019 по делу № А75-18227/2018 оставить без изменения, апелляционную  жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть  обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно- 

Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления  в полном объеме.  

Выдача исполнительных листов осуществляется судом первой инстанции после  поступления дела из Восьмого арбитражного апелляционного суда.  

При условии предоставления копии настоящего постановления, заверенной  в установленном порядке, в суд первой инстанции взыскатель вправе подать заявление  о выдаче исполнительного листа до поступления дела из Восьмого арбитражного  апелляционного суда.  

Председательствующий Е.Б. Краецкая  

Судьи А.С. Грязникова   О.А. Сидоренко