И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Москва                                                                             Дело № А40-166649/23-151-1345

19.02.2024 года                                                                                      

Резолютивная часть решения объявлена 17.01.2024

Решение в полном объеме изготовлено 19.02.2024

 

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению МОСКОВСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766)

к ответчику ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 10 224 396,14 руб.

по встречному иску ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ»

к АО «МОНТИВЕСТ»

о взыскании 9 376 776,53 руб.

при участии

от истца по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности от 17.02.2021

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по доверенности от 10.11.2023 

 

У С Т А Н О В И Л:

С учетом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, АО «МОНТИВЕСТ» заявлено требование к ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» о взыскании задолженности по договору №№ГП-ВС-МО-0034-03/2017 от 14.03.2017 в размере 9 737 520 руб. 13 коп., неустойки за период с 17.11.2022 по 18.07.2023 в размере 486 876 руб. 01 коп. 

Определением от 25.09.2023 к совместному рассмотрению с первоначальным иском принято к производству встречное исковое заявление к ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» к АО «МОНТИВЕСТ» о взыскании убытков в размере 9 376 776 руб. 53 коп.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца по первоначальному иску требования поддержал в полном объеме, против удовлетворения встречных требований возражал, представитель ответчика против удовлетворения первоначально заявленных требований возражал, настаивал на удовлетворении встречных требований.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам. 

Из материалов дела следует, что между АО «МОНТИНВЕСТ» Р.Сербия (Генеральный Подрядчик) и ООО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ» (Заказчик), 14.03.2017г. был заключен договор генподряда № ГП-ВС-МО-0034-03/2017, на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями» по адресу: 

<

...> вл.5.

Истец указывает, что в соответствии с п 2.1 договора и актами выполненных работ КС2, КСЗ, КС 11, выполнил СМР в полном объёме на сумму 829.194.119,30 рублей (с учетом НДС), фактически Заказчиком оплачено Истцу 817.734.41,32 руб.

В соответствии с п.п. 4.1-4.3. договора, оплата выполненных Генподрядчиком работ, производится Заказчиком на основании ежемесячных актов КС2, КСЗ, в течение 10 рабочих дней с даты выставления подрядчиком счета и счета-фактуры на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат. Заказчик производит оплату выполненных Генподрядчиком работ, с ежемесячным удержанием Заказчиком 5% (Пяти процентов) - гарантийная сумма. Удержанные Заказчиком в качестве гарантийной суммы, денежные средства по настоящему договору, подлежат возврату Генеральному подрядчику в срок, установленный п.1 Л .5 и ст. 26 Договора, по истечению гарантийного срока. Возврат гарантийного удержания по СМР -производится Заказчиком по истечении гарантийного срока, установленного п.26.2. договора - по истечении 5 лет. Гарантийный срок на возврат гарантийного депозита 5% по стоимости технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта; - составляет 3 (три) года или в соответствии с гарантиями поставщика такого оборудования.

Гарантийная сумма, удержанная Заказчиком по исполненному в полном объеме договору генподряда, подтверждена Ответчиком надлежащими двусторонними документами по исполнению договора - актом КС 11 б/н от 30.10.2020г, ДС № 20 от 02.07.2020, актом сверки взаимных расчетов; -составила 11.459.705,98руб. (с учетом НДС), в том числе, -10.066.576,58 руб. (с учетом НДС- см.Приложение № 2 расчет иска) - гарантийная сумма 5% - по стоимости технологического и инженерного оборудования на объекте.

Гарантийный срок на возврат гарантийного депозита 5% по технологическому и инженерному оборудованию, согласно п. 1.1.5 и ст.26 договора - 3 (три) года. Указанный гарантийный срок исчисляется с даты подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 77-210000-009122-2019 - получено Заказчиком 23.09.2019г. Первый Акт о передаче объекта долевого строительства подписан - 15.11.2019г., данный факт подтвержден Ответчиком письменным уведомлением в адрес Истца №19-ВСЕ от 12.03.2020г. В соответствии с изложенным, срок для возврата Ответчиком части гарантийной суммы по технологическому и инженерному оборудованию Истцу наступил с 16.11.2022 (15.11.2019+3 года) в размере 10.066.576,58 руб.

16.11.2022 и 01.12.2022г. Истец направил в адрес Ответчика претензию, с приложением счета, на оплату части гарантийного удержания, относящегося к технологическому, инженерному оборудованию, в сумме 10.066.576,58 рублей. Однако, Ответчик, не мотивированно уклонился от оплаты удержанных денежных средств.

В соответствии со ст. 309-310,314,702,708,711,722,746,753 ГК РФ, данная сумма подлежит возврату истцу с 17.11.2022г.

Встречное исковое заявление мотивировано следующими обстоятельствами. 

В соответствии с пунктом 3.1. Договора генподряда (в редакции Дополнительного соглашения № 19 от 01.02.2020 к Договору генподряда) договорная цена, подлежащая оплате  генподрядчику,   определяется  Протоколом  согласования  договорной  цены

(Приложение № 1 к Договору генподряда) и составляет 829 194 119 руб. 30 коп., в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, является твердой и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

Согласно пунктам 1.1.5., 26.2. Договора генподряда гарантийный срок - период времени, в который генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных заказчиком или правомочными согласно, законодательству РФ, третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств по Договору генподряда. Гарантийный срок, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта долевого строительства, составляет 5 лет с даты подписания первого передаточного акта. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 года и исчисляется с даты подписания первого передаточного акта.

Согласно пункту 1.1.6. Договора генподряда дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки) - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения работ по объекту, а также в течение гарантийного срока.

Договором генподряда на генподрядчика возложен ряд обязанностей, в том числе:

-           в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций либо их частей, поставленных генподрядчиком (пункты 26.7., 7.1.21. Договора генподряда);

-           нести ответственность в течение гарантийного срока за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования в соответствии с положениями раздела 26 Договора генподряда (пункты 26.1., 7.1.22. Договора генподряда).

Пунктом 26.11. Договора генподряда установлено следующее.

При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок заказчик уведомляет об этом генподрядчика в письменной форме.

Ответственное лицо генподрядчика совместно с представителем заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время и в означенном месте.

В течение 48 часов после проведения экспертизы дефекта генподрядчик обязан подписать гарантийную заявку и возвратить ее заказчику с планом выполнения гарантийных работ. План работ включает в себя график производства работ и (или) поставки материалов, методы производства работ, количество человек в бригаде, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов.

Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения от генподрядчика.

Генподрядчик обязан выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным заказчиком планом выполнения гарантийных работ.

После завершения гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, генподрядчик приглашает заказчика для проведения инспекции.

В случае необоснованного неприбытия представителей генподрядчика либо их отказа от подписания гарантийной заявки действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный заказчиком в одностороннем порядке.

В силу пункта 26.12. Договора генподряда если генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения работ (акте о выявленных дефектах), не устранит дефекты (недостатки) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, поставленные генподрядчиком, заказчик применяет к генподрядчику штрафные санкции согласно пунктам 29.2.2., 29.2.3., 29.2.4. Договора генподряда. При этом без ущемления своих прав по гарантии заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты (недостатки) собственными силами или силами других организаций. В таком случае генеральный подрядчик обязан в течение 30 календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты заказчика по устранению дефектов (недостатков).

Строительство МКД осуществлялось на основании разрешения на строительство № RU77210000-010589 от 13.02.2015, выданного Истцу Мосгосстройнадзором.

МКД введен в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 77-210000-009122-2019 от 23.09.2019, выданным Истцу Мосгосстройнадзором.

15.11.2019 между Истцом и гражданкой РФ ФИО4 (участник долевого строительства) подписан акт приема-передачи машиноместа № 23 в МКД, который является первым передаточным актом, подписанным между застройщиком и участником долевого строительства МКД.

Таким образом, пятилетний гарантийный срок в отношении МКД начал течь 15.11.2019 и истекает 15.11.2024, а трехлетний гарантийный срок в отношении технологического и инженерного оборудования начал течь 15.11.2019 и истек 15.11.2022.

В гарантийный период от управляющей организации, осуществляющей управление и эксплуатацию МКД (ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон»), в адрес Истца поступали множественные обращения относительно дефектов (недостатков) выполненных Ответчиком работ по строительству МКД.

Истцом в адрес Ответчика направлялись вызовы на комиссионные обследования с участием заказчика, генподрядчика и управляющей организации, которые оформлялись соответствующими актами.

По результатам актирования выявленных дефектов (недостатков) строительства Истец направлял в адрес Ответчика гарантийные заявки (требования об устранении выявленных дефектов).

Однако, Ответчик уклонялся от предусмотренных Договором генподряда обязательств по устранению выявленных дефектов (недостатков) строительства, в виду чего Истец был вынужден привлекать к их устранению сторонних подрядчиков, в связи с чем понес убытки на общую сумму 9 376 776 руб. 53 коп.

Подробный перечень понесенных Истцом по вине Ответчика убытков, а также расчет взыскиваемой денежной суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ) приведены в приложении № 1 к встречному иску.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд с первоначальным и встречным исками. 

Удовлетворяя требования первоначального иска в части, требования встречного иска – в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 15, 309, 310, 330, 393, 421, 431, 702, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

В пункте 4.3. Договора генподряда стороны согласовали следующее:

• заказчик производит оплату выполненных генподрядчиком строительно-монтажных работ с ежемесячным удержанием заказчиком 5%, в том числе НДС, из денежных средств, подлежащих оплате генподрядчику (гарантийная сумма), но не более 5% от договорной цены, указанной в пункте 3.1. Договора генподряда (абзац 2 пункта 4.3. Договора генподряда);

• удержанная заказчиком гарантийная сумма является обеспечением исполнения генподрядчиком обязательств по Договору генподряда перед заказчиком (абзац 3 пункта 4.3. Договора генподряда);

• удержанные заказчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств генподрядчика в гарантийный период денежные средства в размере 5% от договорной цены подлежат возврату генподрядчику при наступлении любого из перечисленных событий (абзац 6 пункта 4.3. Договора генподряда):

- предоставление генподрядчиком в соответствии со статьей 25 Договора генподряда безусловной и безотзывной банковской гарантии выполнения обязательств генподрядчиком в гарантийный период, составленной по форме, установленной в приложении № 5 к Договору генподряда (абзац 7 пункта 4.3. Договора генподряда);

- по истечении гарантийного срока, установленного статьей 26 Договора генподряда (абзац 8 пункта 4.3. Договора генподряда);

- в случае нарушения генподрядчиком своих обязательств по Договору генподряда заказчик вправе возместить (оплатить) из гарантийной суммы штрафы (неустойки), предъявленные генподрядчику заказчиком в претензионном порядке, иные расходы, убытки, упущенную выгоду заказчика, либо при отказе заказчика от исполнения обязательств по Договору генподряда в одностороннем порядке вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком своих обязательств по Договору генподряда, а также расходы заказчика на устранение дефектов и иных недостатков строительно-монтажных работ, выявленных заказчиком или третьим лицом в течение гарантийного срока в соответствии со статьей 26 Договора генподряда (абзац 13 пункта 4.3. Договора генподряда).

В соответствии с пунктами 1.1.5., 26,2. Договора генподряда гарантийный срок -период времени, в который генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных заказчиком или правомочными согласно, законодательству РФ, третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств по Договору генподряда. Гарантийный срок, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав объекта долевого строительства, составляет 5 лет с даты подписания первого передаточного акта. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства, составляет 3 года и исчисляется с даты подписания первого передаточного акта.

Согласно пункту 1.1.6. Договора генподряда дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый) (недостатки) - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения работ по объекту, а также в течение гарантийного срока.

Договором генподряда на генподрядчика возложен ряд обязанностей, в том числе:

- в течение гарантийного срока своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, включая замену дефектного оборудования и конструкций либо их частей, поставленных генподрядчиком (пункты 26.7., 7.1.21. Договора генподряда);

- нести ответственность в течение гарантийного срока за качество выполненных работ, поставленных и установленных материалов и оборудования в соответствии с положениями раздела 26 Договора генподряда (пункты 26.1., 7.1.22. Договора генподряда). Пунктом 26.11. Договора генподряда установлено следующее.

При обнаружении дефектов в выполненных работах в гарантийный срок заказчик уведомляет об этом генподрядчика в письменной форме.

Ответственное лицо генподрядчика совместно с представителем заказчика обязано присутствовать при проведении экспертизы дефекта в указанное в гарантийной заявке время и в означенном месте.

В течение 48 часов после проведения экспертизы дефекта генподрядчик обязан подписать гарантийную заявку и возвратить ее заказчику с планом выполнения гарантийных работ. План работ включает в себя график производства работ и (или) поставки материалов, методы производства работ, количество человек в бригаде, необходимых для производства данных работ, а также описание используемых материалов. Заказчик должен одобрить план выполнения гарантийных работ в течение 24 часов после его получения от генподрядчика.

Генподрядчик обязан выполнить все работы по устранению дефектов, указанных в гарантийной заявке, в строгом соответствии с одобренным заказчиком планом выполнения гарантийных работ.

После завершения гарантийных работ, выполненных согласно утвержденному плану, генподрядчик приглашает заказчика для проведения инспекции.

В случае необоснованного неприбытия представителей генподрядчика либо их отказа от подписания гарантийной заявки действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный заказчиком в одностороннем порядке.

В силу пункта 26.12. Договора генподряда если генподрядчик в течение срока, указанного в плане выполнения работ (акте о выявленных дефектах), не устранит дефекты (недостатки) и (или) не заменит некачественные материалы и оборудование, поставленные генподрядчиком, заказчик применяет к генподрядчику штрафные санкции согласно пунктам 29.2.2., 29.2.3., 29.2.4. Договора генподряда. При этом без ущемления своих прав по гарантии заказчик вправе заменить материалы, оборудование и устранить дефекты (недостатки) собственными силами или силами других организаций. В таком случае генеральный подрядчик обязан в течение 30 календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты заказчика по устранению дефектов (недостатков).

Согласно пункту 29.7. Договора генподряда в случае неисполнения либо частичного неисполнения какой-либо стороной обусловленных Договором генподряда обязательств иная сторона вправе приостановить исполнение своего обязательства в части, соразмерной объему неисполненного обязательства виновной стороны (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором генподряда). При этом сторона, приостановившая исполнение своего обязательства, не несет ответственности за последствия неисполнения виновной стороной своего обязательства (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором генподряда).

Строительство МКД осуществлялось на основании разрешения на строительство № RU77210000-010589 от 13.02.2015, выданного Ответчику Мосгосстройнадзором.

МКД введен в эксплуатацию, что подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию № 77-210000-009122-2019 от 23.09.2019, выданным Ответчику Мосгосстройнадзором.

15.11.2019 между Ответчиком и гражданкой РФ ФИО4 (участник долевого строительства) подписан акт приема-передачи машиноместа № 23 в МКД, который является первым передаточным актом, подписанным между застройщиком и участником долевого строительства МКД.

Таким образом, пятилетний гарантийный срок в отношении МКД начал течь 16.11.2019 и истекает 16.11.2024, а трехлетний гарантийный срок в отношении технологического и инженерного оборудования начал течь 16.11.2019 и истек 16.11.2022.

В обоснование заявленных исковых требований Истец указал, что общая гарантийная сумма, удержанная Ответчиком по Договору генподряда, подтверждена подписанными сторонами актом КС-11 № б/н от 30.10.2020 и актом сверки взаимных расчетов от 19.11.2021, составляет сумму денежных средств 11 459 705 руб. 98 коп., которая включает в себя сумму денежных средств 10 066 576 руб. 58 коп., являющуюся 5% удержанием по стоимости технологического и инженерного оборудования и работ по их монтажу.

Истец полагает, что поскольку в отношении технологического и инженерного оборудования, смонтированного Истцом в МКД в рамках Договора генподряда, 16.11.2022 истек трехлетний гарантийный срок, сумма денежных средств в размере 10 066 576 руб. 58 коп. подлежит возврату Истцу с 17.11.2022.

Однако, Истцом не учтено следующее.

Истец выполнил по Договору генподряда работы на сумму 829 194 119 руб. 30 коп.

Всего в рамках Договора генподряда Ответчик произвел удержание гарантийной суммы в размере 41 459 705 руб. 98 коп., т.е. согласно пункту 4.3. Договора генподряда 5% от договорной цены (829 194 119 руб. 30 коп. х 5% = 41 459 705 руб. 98 коп.).

Следовательно, если 100% общей гарантийной суммы, изначально удержанной Ответчиком по Договору генподряда, является сумма 41 459 705 руб. 98 коп., то часть гарантийной суммы в размере 10 066 576 руб. 58 коп. по стоимости технологического и инженерного оборудования и работ по их монтажу составляет 24,28% от общей гарантийной суммы, а остальная часть гарантийной суммы в размере 31 393 129 руб. 40 коп., относящаяся к иным видам работ и материалов, составляет 75,72% от общей гарантийной суммы.

02.07.2020 между сторонами было заключено Дополнительное соглашение № 20 к Договору генподряда, в котором стороны согласовали следующее:

• генподрядчиком нарушены сроки окончания выполнения работ и сдачи их результатов заказчику, что подтверждается и признается генподрядчиком (пункты 2, 5); размер неустойки за нарушение генподрядчиком сроков окончания выполнения работ и сдачи их результатов заказчику, подлежащей выплате генподрядчиком заказчику, составляет 15 000 000 руб. 00 коп. (пункт 3); стороны пришли к соглашению о том, что они производят зачет встречных однородных требований, а именно обязательство генподрядчика по выплате заказчику неустойки в размере 15 000 000 руб. 00 коп. засчитывается в счет исполнения заказчиком обязательства по возврату генподрядчику части гарантийной суммы в размере 15 000 000 руб. (пункт 7); зачет встречных однородных требований по пункту 7 производится в дату подписания сторонами дополнительного соглашения (пункт 8); генподрядчик подтверждает и гарантирует, что не имеет каких-либо возражений против проведения зачета встречных однородных требований в соответствии с пунктом 7 дополнительного соглашения (пункт 10).

• заказчик возвращает генподрядчику часть гарантийной суммы в размере 15 000 000 руб. 00 коп. в срок до даты истечения гарантийного срока, установленного Договором генподряда. (пункт 6); заказчик возвращает генподрядчику часть гарантийной суммы в размере 15 000 000 руб. 00 коп. в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет генподрядчика (пункт 11).

На основании выставленного Истцом счета на оплату № 1/ГАР от 08.07.2020, Ответчик, во исполнение условий пунктов 6 и 11 Дополнительного соглашения № 20 от 02.07.2020 к Договору генподряда, платежными поручениями № 89 от 14.07.2020, № 96 от 31.07.2020 и № 110 от 18.08.2020 выплатил Истцу часть гарантийной суммы в размере 15 000 000 руб. 00 коп. (5 000 000 руб. 00 коп. + 2 618 487 руб. 81 коп. + 7 381 512 руб. 19 коп. = 15 000 000 руб. 00 коп.).

Таким образом, в рамках Дополнительного соглашения № 20 от 02.07.2020 к Договору генподряда, Ответчиком досрочно исполнено обязательство перед Истцом по возврату части гарантийной суммы в размере 30 000 000 руб. 00 коп. (на сумму 15 000 000 руб. 00 коп. произведен зачет встречных однородных требований и сумма 15 000 000 руб. 00 коп. выплачена платежными поручениями № 89 от 14.07.2020, № 96 от 31.07.2020 и № ПО от 18.08.2020).

Дополнительное соглашение № 20 от 02.07.2020 к Договору генподряда не индивидуализирует в отношении каких видов работ и материалов Ответчиком досрочно исполняется обязательство перед Истцом по возврату части гарантийной суммы в размере 30 000 000 руб. 00 коп.

В рамках исполненного обязательства по возврату части гарантийной суммы в размере 30 000 000 руб. 00 коп., Ответчиком был осуществлен пропорциональный возврат как части гарантийной суммы в отношении стоимости технологического и инженерного оборудования и работ по их монтажу, так и части гарантийной суммы, относящейся к иным видам работ и материалов (из расчета 24,28% и 75,72% соответственно).

Учитывая тот факт, что гарантийный срок в отношении МКД в целом, за исключением технологического и инженерного оборудования и работ по их монтажу, не истек и истекает только 16.11.2024, суд приходит к выводу, что обоснованными требованиями истца к ответчику составляют сумму, к 16.11.2022  в размере 2 782 416 руб. 61 коп. (т.е. остаток части гарантийной суммы в отношении стоимости технологического и инженерного оборудования и работ по их монтажу), что составляет 24,28% от оставшейся к возврату гарантийной суммы в размере 11 459 705 руб. 98 коп.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в сумму 2 782 416 руб. 61 коп.

В остальной части требований первоначального иска по основному долгу суд отказывает. 

Учитывая частичное удовлетворение требований по основному долгу, требования истца о взыскании неустойки подлежат перерасчету исходя из следующего: 2 782 416,61 * 244 * 0.1% (за период с 17.11.2022 по 18.07.2022). Размер неустойки составит 139 120 руб. 83 коп. 

В остальной части требований о взыскании неустойки суд отказывает. 

В отношении встречных требований о взыскании убытков в размере 9 376 776 руб. 53 коп. 

Согласно пункту 1 статьи 393 Гражданского кодекса должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Исходя из смысла статей 15 и 393 Гражданского кодекса для наступления деликтной ответственности необходимо наличие состава правонарушения, включающего в себя наступление вреда и его размер, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между возникшим вредом и действиями указанного лица, а также вину причинителя вреда. Требование о возмещении вреда может быть удовлетворено только при доказанности всех названных элементов в совокупности.

В силу правовой позиции, сформированной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. по делу № 310-ЭС14-142, А14-4486/2013 (Судебная коллегия по экономическим спорам), для применения гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков суду необходимо установить состав правонарушения, включающий наступление вреда, вину причинителя вреда, противоправность поведения причинителя вреда, наличие причинно-следственной связи между действиями причинителя вреда и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, а также размер ущерба.

Для удовлетворения требований о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности фактов. Недоказанность одного из необходимых оснований возмещения убытков исключает возможность удовлетворения требований.

По результатам исследования совокупности представленных истцом по встречному иску в материалы дела доказательств, судом установлено, что доводы отзыва ответчика несостоятельны, поскольку опровергаются представленными в материалы дела доказательствами.

В связи с чем, суд приходит к выводу об обоснованности встречных требований о взыскании убытков на сумму 9 376 776 руб. 53 коп. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части, встречные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая, что требования имеют однородный характер, суд производит взаимозачет, в результате которого с АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766) в пользу ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) взыскивает убытки в размере 6 455 239 руб. 09 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 48 704 руб.

Судом установлено, что в резолютивной части решения суда от 17.01.2024 в порядке ст. 176 АПК РФ, допущена опечатка при указании суммы требований после произведенного судом взаимозачета встречных однородных требований. Указанная опечатка подлежит исправлению в порядке ст. 179 АПК РФ, путем верного изложения резолютивной части в настоящем решении. 

На основании статей 8, 10, 12, 15, 309, 310, 330, 393, 421, 431, 702, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) в пользу АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766) задолженность в размере 2 782 416 руб. 61 коп., неустойку в размере 139 120 руб. 83 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 21 180 руб.

В остальной части отказать.

Возвратить АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766) из федерального бюджета РФ госпошлину в размере 1 734 руб.

Встречный иск удовлетворить. Взыскать с АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766) в пользу ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) убытки в размере 9 376 776 руб. 53 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 69 884 руб.

Возвратить ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета РФ госпошлину в размере 254 руб. 88 коп.

Произвести взаимозачет.

Взыскать с АО «МОНТИВЕСТ» (НЗА: 20150005766) в пользу ООО «ВСЕВОЛЖСКИЙ» (ОГРН: 

<

***>) убытки в размере 6 455 239 руб. 09 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 48 704 руб..

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                 К.В. Вольская