Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46149/2024

29 октября 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  29 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Администрация городского поселения «ПУШКИНГОРЬЕ» (адрес: 181370, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...> Д.42, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.10.2010, ИНН: 

<

***>, КПП: 602001001);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЕСКУЧНЫЙ САД» (адрес: 194044, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 4-6, ЛИТЕР А, ПОМ. 38 Н, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.02.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 780201001);

о взыскании, 

 

при участии:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 20.05.2022,  

 

установил:

Администрация городского поселения «ПУШКИНГОРЬЕ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «НЕСКУЧНЫЙ САД» о взыскании 3 615 170 руб. 75 коп. аванса, 1 859 746 руб. 66 коп. неустойки. 

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнил исковые требования и просит взыскать с ответчика 3 615 170 руб. 75 коп. аванса, 136 717 руб. 26 коп.  руб. 66 коп. неустойки. 

Уточнения исковых требований принято судом. 

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя ответчика, арбитражный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 19.04.2023 между Администрацией городского поселения «Пушкиногорье» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нескучный сад» (Получатель) заключено Соглашение № 58651000-1-2023-004 о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Пушкиногорье» в размере 80 800 000 рублей 00 копеек на реализацию проектов создания комфортной городской среды по проекту «Пушкинские Горы. Лукоморье» (далее -Соглашение).

В соответствии с п. 4.3.7.1. Соглашения Получатель обязался выполнить мероприятия по благоустройству в рамках реализации Проекта в срок до 15.10.2023.

В соответствии с п. 2.3. Соглашения предусмотрена выплата аванса в размере 40 400 000 рублей 00 копеек, что составляет 50 % от размера субсидии.

31.07.2023 Получатель в рамках авансирования получил 40 400 000 рублей.

Согласно заключению по результатам экспертизы и актам работы выполнены на 36 784 829 рублей 25 копеек.

Согласно п. 4.3.10.2. Соглашения Получатель обязуется возвращать Субсидию в размере и в сроки, определенные в требовании. 

Получатель обязан вернуть часть субсидии в размере 3 615 170 рублей 75 копеек.

В соответствии с пунктом 4.2.4.6 Соглашения Предоставитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения.

Согласно п. 7.4.1 Соглашения расторжение настоящего соглашения осуществляется в одностороннем порядке в случае: нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также недостижения Получателем установленных настоящим соглашением результатов предоставления субсидии.

29.12.2023 истец направил в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств -уведомление о расторжении Соглашения в одностороннем порядке. 

Претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения, что  послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, суд приходит к следующим выводам.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с ч. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено управомоченной стороной путём уведомления другой стороны об отказе от договора. Договор прекращается с момента получения данного уведомления.

Суд считает подлежащими удовлетворению исковые требования в части взыскания задолженности.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 5.1. Соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательства по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет суммы неустойки  проверен судом и признан правильным.

При таких обстоятельствах иск следует удовлетворить.

Государственная пошлина, отсрочка уплаты которой предоставлена истцу при принятии искового заявления к производству, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НЕСКУЧНЫЙ САД» в пользу Администрации городского поселения «ПУШКИНГОРЬЕ» 3 615 170 руб. 75 коп. аванса, 136 717 руб. 26 коп. неустойки. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «НЕСКУЧНЫЙ САД» в доход федерального бюджета 41 759 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.