ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-10696/2023, 10АП-14007/2023

Дело № А41-98200/18

07 сентября 2023 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2023 года.

В полном объёме постановление изготовлено 07 сентября 2023 года. 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Стрелковой Е.А., судей Диаковской Н.В., Панкратьевой Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии в судебном заседании: лица, участвующие в деле, а также заявители апелляционных жалоб не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы гражданина ФИО2 и гражданки ФИО3, поданные в порядке ст. 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35, на решение Арбитражного суда Московской области от 18 апреля 2019 года по делу № А41-98200/18 по иску 

акционерного общества «Газпром теплоэнерго» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Газпром теплоэнерго» (далее - АО «Газпром теплоэнерго», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу                с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (далее - ООО «Стройинвест», ответчик) о взыскании 27 505 994 руб. 75 коп. неосновательного обогащения.

Определением от 11.04.2019 требования АО «Газпром теплоэнерго» к ООО «Стройинвест» о взыскании неотработанного аванса по договору от 30.05.2012                         № 84- СИМР/2012 в размере 11 952 327 руб. 15 коп. и по договору от 25.01.2012                  № 14-СМР/2012 в размере 7 055 878 руб. 19 коп. выделены в отдельное производство.

Решением Арбитражного суда Московской области от 18 апреля 2019 года             по делу № А41-98200/18 с общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» в пользу акционерного общества «Газпром теплоэнерго» взысканы            8 497 789 руб. 41 коп. неосновательного обогащения и 49 595 руб. 00 коп.                               в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 13 августа 2019 года решение суда первой инстанции по настоящему делу оставлено без изменения и вступило в законную силу.

На основании статьи 42 АПК РФ, п. 24 Постановления Пленума Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35  «О некоторых процессуальных вопросах связанных с рассмотрением дел                       о банкротстве» в Десятый арбитражный апелляционный суд обратились гражданин ФИО2 и гражданка ФИО3                                  с апелляционными жалобами, заявив ходатайства о восстановлении срока на подачу апелляционных жалоб. Гражданин ФИО2 в апелляционной жалобе просит решение суда первой инстанции отменить в части взысканной                                       суммы 5998001, 96 руб. по доводам, изложенным в жалобе, по делу принять новый судебный акт и в указанной части в удовлетворении требований истца отказать. Гражданка ФИО3 в апелляционной жалобе просит решение суда первой инстанции отменить по доводам, изложенным в жалобе, принять новый судебный акт по делу, в удовлетворении требований истца отказать. Заявители апелляционных жалоб не согласны с оценкой судом доказательств                   по делу.

Определениями от 26 мая 2023 года и от 12 июля 2023 года Десятый арбитражный апелляционный суд восстановил срок для подачи апелляционных жалоб гражданина ФИО2 и гражданки ФИО3, они были оставлены без движения в связи с допущенными процессуальными нарушениями.

Определениями от 30 июня 2023 года и от 04 августа 2023 года Десятый арбитражный апелляционный суд принял апелляционные жалобы гражданина ФИО2 и гражданки ФИО3                        к производству.

В обоснование подачи апелляционной жалобы ФИО2 и ФИО3  ссылались на то обстоятельство, что определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2021 по делу                                           № А56-111898/2019 заявление АО «Газпром теплоэнерго» о признании ООО «СтройИнвест» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении ООО «СтройИнвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (ответчик по настоящему делу) введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2021, резолютивная часть которого объявлена 26.11.2021,                            ООО «СтройИнвест» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом),                    в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Определением Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.03.2023 по делу № А56-111898/2019 принято                         к производству заявление конкурсного управляющего ООО «СтройИнвест» ФИО4 о привлечении ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СтройИнвест».

Определением Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.03.2023 по делу № А56-111898/2019 принято                            к производству заявление АО «Газпром теплоэнерго» о привлечении ФИО3, ФИО5, ФИО2, ФИО6 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «СтройИнвест».

Как указано в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ                     от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», при применении статей 257, 272, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражным судам апелляционной инстанции следует принимать во внимание, что право на обжалование судебных актов в порядке апелляционного производства имеют как лица, участвующие в деле, так и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ. К иным лицам в силу части 3 статьи 16                              и статьи 42 Кодекса относятся лица, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт. В связи с этим лица, не участвующие в деле, как указанные, так и не указанные в мотивировочной и/или резолютивной части судебного акта, вправе его обжаловать в порядке апелляционного производства в случае, если он принят об их правах и обязанностях, то есть данным судебным актом непосредственно затрагиваются их права и обязанности, в том числе создаются препятствия для реализации их субъективного права или надлежащего исполнения обязанности по отношению к одной из сторон спора.

В силу положений пункта 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. Копия такой жалобы направляется ее заявителем представителю собрания (комитета) кредиторов (при его наличии), который также извещается судом о рассмотрении жалобы. Все конкурсные кредиторы, требования которых заявлены в деле                                    о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие                              в рассмотрении жалобы, в том числе представить новые доказательства и заявить новые доводы. Повторное обжалование названными лицами по тем же основаниям того же судебного акта не допускается.

С учётом изложенного, принимая во внимание наличие у гр. ФИО2                      и гр. ФИО3 права на апелляционное обжалование решения суда                           по настоящему делу, суд апелляционной инстанции полагает возможным рассмотрение апелляционных жалоб ФИО2 и ФИО3 по существу.     

В соответствии с пунктом 5 Обзора судебной практики разрешения споров                  о несостоятельности (банкротстве) за 2022 год, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.04.2023, обжалование судебных актов                       в порядке, предусмотренном пунктом 24 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 г. № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", осуществляется применительно к правилам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по аналогии (часть 5 статьи 3 АПК РФ).

АО «Газпром теплоэнерго» в материалы дела представило письменный отзыв              на апелляционную жалобу, в котором истец просит решение суда первой инстанции по делу № А41-98200/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

На основании статей 123, 156 АПК РФ суд апелляционной инстанции рассмотрел дело в отсутствие представителей истца и ответчика, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальном сайте Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив в совокупности представленные в материалы дела письменные доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции и усматривается из материалов дела, 30.11.2017 между АО «Газпром теплоэнерго» (заказчик) и ООО «Стройинвест» (подрядчик) заключены договоры:

-  от 01.07.2011 № 40-СМР/2011;

-  от 01.07.2011 № 36-СМР/2011;

-  от 30.01.2012 № 21-СМР/2012;

-  от 25.01.2012 № 11- СМР/2012;

-  от 25.07.2013 № 188-ПР/2013;

-  от 30.01.2012 № 20-СМР/2012;

-  от 16.05.2012 № 70-СМР/2012.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 01.07.2011 № 40-СМР/2011 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 4 201 400 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 01.07.2011 № 36-СМР/2011 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 4 281 400 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 30.01.2012 № 21-СМР/2012 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 6 673 500 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 25.01.2012 № 11- СМР/2012 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 2 089 400 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.2.1 договора от 25.07.2013 № 188-ПР/2013 заказчик в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора перечисляет подрядчику                     в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50%, что составляет                            401 750 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 30.01.2012 № 20-СМР/2012 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 5 800 000 руб. 00 коп.

Согласно пункту 2.3.1 договора от 16.05.2012 № 70-СМР/2012 в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора сторонами заказчик перечисляет подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50 % от общей стоимости работ по договору, что составляет 5 032 960 руб. 00 коп.

08.11.2012 ЗАО «Межрегионэнергогаз» прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «Межрегионтеплоэнерго».

Все имущество, права и обязанности ЗАО «Межрегионэнергогаз» перешли                  к ОАО «Межрегионтеплоэнерго» на основании договора о присоединении                          от 10.04.2012 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ГРН 8127747407395                      от 08.11.2012 серии 77 № 015692350).

20.11.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46                     по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись                   о смене наименования организации ОАО «Межрегионтеплоэнерго» на ОАО «Газпром теплоэнерго», что подтверждается листом о внесении записи в ЕГРЮЛ                    от 21.11.2013.

09.12.2014 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46                  по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене наименования организации с ОАО «Газпром теплоэнерго» на АО «Газпром теплоэнерго», что подтверждается листом о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.12.2014.

Таким образом, в силу положений пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации АО «Газпром теплоэнерго» стало правопреемником                     ЗАО «Межрегионэнергогаз» по всем правам и обязанностям, в том числе возникшим из спорных договоров.

Во исполнение указанных условий договоров заказчик авансировал работы на общую сумму 65 290 122 руб. 60 коп., что подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями.

Между тем, подрядчик исполнил обязательства по договорам частично, размер неотработанного аванса по всем договорам составил 8 497 789 руб. 41 коп.

В соответствии с пунктом 10.1 договоров от 01.07.2011 № 40-СМР/2011,                         от 01.07.2011 № 36-СМР/2011, от 30.01.2012 № 21-СМР/2012, от 25.01.2012                     № 11- СМР/2012, основаниями для одностороннего расторжения настоящего договора, помимо предусмотренных разделом 8 договоров, являются:

-   просрочка подрядчиком всех, предусмотренных договором сроков выполнения работ на срок свыше 50 календарных дней, возбуждение в отношении подрядчика процедуры банкротства или лишение подрядчика допуска в СРО, необходимого для исполнения обязательств по настоящему договору;

-     отступления подрядчиком от условий договора или иные недостатки результата работ, которые не устранены в течение 30 (тридцати) дней, либо являются существенными или неустранимыми, а также систематическое неисполнение подрядчиком иных возложенных договором обязательств.

Согласно пункту 10.2 договоров, сторона, принявшая решение о расторжении договора, направляет письменное уведомление другой стороне за 15 календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.

23.10.2018 заказчиком в адрес подрядчика было направлено уведомление                        о расторжении договоров с требованием о возврате денежных средств, перечисленных в качестве авансовых платежей по договорам. 24.10.2018 телеграмма поступила в место вручения, однако, получена ООО «Стройинвест» не была.

Таким образом, договоры считаются расторгнутыми с 09.11.2018.

Поскольку задолженность ответчиком не погашена, истец обратился                                  в арбитражный суд с настоящим иском.

Проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции и не находит оснований для удовлетворения апелляционных жалоб, руководствуясь следующим.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение                        его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации            по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику,                  а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Из пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что возникновение обязанности заказчика по оплате работ обусловлено их выполнением подрядчиком и сдачей результатов заказчику.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами                           или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение                       как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

При нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков наступают последствия просрочки исполнения, указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора,          он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Следовательно, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться                        от исполнения договора на выполнение работ в случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ и утраты интереса к результатам этих работ.

Пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Ответчик по существу заявленных требований по договорам от 01.07.2011                    № 40- СМР/2011, от 01.07.2011 № 36-СМР/2011, от 30.01.2012 № 21-СМР/2012,                от 25.01.2012 № 11- СМР/2012, от 25.07.2013 № 188-ПР/2013, от 30.01.2012                      № 20-СМР/2012 и от 16.05.2012 № 70-СМР/2012 мотивированных возражений                                         не представил, указал только на не предоставление истцом доказательств возникновения неосновательного обогащения в том размере, который указан в иске.

Данный довод ответчика опровергается представленными в материалы дела платежными поручениями, подтверждающими перечисление авансовых платежей по договорам.

Заявители апелляционных жалоб представили в материалы дела разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, а также акты осмотра теплопотребляющих установок и тепловых сетей, которые, по их мнению подтверждают факт выполнения ответчиком обязательств в полном объёме.

Оценив представленных заявителями апелляционных жалоб новые доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что они не подтверждают факт выполнения ответчиком работ в спорном объёме и не опровергают выводов суда первой инстанции по настоящему делу.

В силу ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В силу ч. 4 ст. 753 ГК РФ факт выполнения работ по договору подряда подтверждается актом приёмки выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При необоснованном отказе от подписания акта приёмки выполненных работ со стороны заказчика подрядчик может подтвердить факт выполнения работ первичными учётными документами, оформленными в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Представленные апеллянтами документы не являются первичными учётными документами и не содержат сведений о видах, объёме и стоимости выполненных ответчиком работ, в связи с чем при отсутствии подписанных сторонами актов приёмки выполненных работ на спорную сумму не подтверждают факт выполнения ответчиком работ на заявленную истцом сумму.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Информационном письме от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснил, что при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась. Положения пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

Таким образом, взыскание неотработанного аванса является следствием отказа истца от договора в части работ, к выполнению которых ответчик не приступил, на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Поскольку доказательств возврата денежных средств либо выполнения работ на данную сумму ответчиком в материалы дела не представлено, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в размере 8 497 789 руб. 41 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 260 АПК РФ в апелляционной жалобе должны быть указаны требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства.

Согласно разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в абзаце 3 пункта 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел                                   в арбитражном суде апелляционной инстанции", по собственной инициативе суд апелляционной инстанции не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы,                    за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд апелляционной инстанции оценивает приведенные в апелляционной жалобе доводы, соблюдая процессуальные гарантии лиц, участвующих в деле (абзац 5 пункта 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36).

Доводы гр. ФИО2 и гр. ФИО3, изложенные в апелляционных жалобах, документально не подтверждены, направлены на переоценку судебного акта, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены оспариваемого решения суда.

Несогласие с выводами суда первой инстанции, иная оценка фактических обстоятельств дела и представленных доказательств не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки и не является основанием для отмены судебных актов судом апелляционной инстанции.

Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности, при правильном применении норм материального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется, апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 18 апреля 2019 года по делу                                № А41-98200/18 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня его изготовления в полном объёме в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области.

 

Председательствующий судья                                                    Е.А. Стрелкова

 

Судьи                                                                                             Н.В. Диаковская

 

                                                                                                       Н.А. Панкратьева