АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-10016/18

28 сентября 2018 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента  социального развития г. Азова ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>  

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***> об обязании передать исполнительную документацию (уточненные  требования)  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> передать Департаменту социального развития г. Азова  ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> в течении 30 дней с момента вступления  настоящего судебного акта в законную силу исполнительную документацию по  муниципальному контракту № 41от 30.08.2016 исполнительную документацию на  выполненные работы по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки  муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П.  Лакомова», 

<

...> (1-й этап  строительства)»:  

1. По локальной смете № 01-01 «Демонтаж»: Демонтаж административного блока;  Демонтаж модульного блока-раздевалки для спортсменов и тренеров; Демонтаж  санитарно-бытовой пристройки; Демонтаж гаражей; Демонтаж туалетов; Демонтаж  беседки; Демонтаж резервуара для воды; Демонтаж щитовой; Демонтаж насосной;  Демонтаж ограждения резервуара; Демонтаж флагштоков; Демонтаж навеса для трибуны;  Демонтаж трибуны; Демонтаж вышки для оператора; Демонтаж ограждения спортивного  комплекса; Демонтаж ограждения беговых дорожек из труб; Демонтаж забора между  спортивными площадками внутри стадиона; Демонтаж ограждения скейтпарка; Демонтаж  навесов и площадок с металлоломом; Демонтаж электротехнического оборудования -  акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа  конструкций;  

2. По локальной смете № 01-02 «Снос и пересадка зеленых насаждений»: снос  зеленых насаждений; пересадка деревьев - порубочные листы, исполнительные схемы  благоустройства, перечетная ведомость зеленых насаждений;  

3. По локальной смете № 01-03 «Разборка существующих покрытий» - акты  освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы;  

4. По локальной смете № 02-01-01 «Общестроительные работы. Физкультурно- оздоровительный комплекс»: Земляные работы; Фундламенты; Каркас ниже отм.0.000;  Стены; Лестницы; Перегородки; Окна; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы;  Каркас выше отм.О.ООО; Стены; Перегородки; Лестницы; Шахты лифтов; Кровля; Окна;  Витражи; Двери; Полы; Внутренние отделочные работы; Наружная отделка; Разные  работы (короб на радиаторы, крышная венткамера, конструкции крепления дымовой  трубы, лестница, водосточная система, приямки, узлы герметизации); Подиум - акты  освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы демонтажа конструкций,  акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта, исполнительные  схемы расположения пунктов ГРО, исполнительная съемка выемки грунта котлована, акт  осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты, акт разбивки осей капитального  строительства на местности, исполнительная схема закрепления осей ФОК, паспорта на  материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты, документы о качестве  бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси, исполнительная съемка гидроизоляции  стен;  

5. По локальной смете № 02-01-13 «Усиление грунтов основания под ФОК  армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы,  рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной смеси,  паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;  

6. По локальной смете № 02-02-02 «Дренаж. Ливневая канализация. Спортивное  ядро»: Земляные работы (футбольное поле в натуральной траве, зона безопасности,  беговые дорожки и сектора); Система дренажа и линейного водоотвода; Система  ливневой канализации; Устройство круглых сборных железобетонных колодцев - акты  освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, исполнительные съемки,  исполнительная съемка выемки грунта, паспорта на материалы, паспорта качества,  сертификаты;  

7. По локальной смете № 04-01 «Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4  кВт. Наружное освещение. Вынос сетей наружного освещения»: Общестроительные  работы; Монтажные работы; Материалы не учтенные ценником; Оборудование - акты  освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты  испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества,  сертификаты;  

8. По локальной смете № 06-01 «Внутриплощадочные сети водоснабжения и  водоотведения»: Земляные работы; Строительные работы; Трубопроводы -акты  освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, ведомости и акты  испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества,  сертификаты;  

9. По локальной смете № 06-02 «Дождевая канализация»: Земляные работы;  Строительные работы; Трубопроводы - акты освидетельствования скрытых работ,  исполнительные схемы, ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на  материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты;  

10. По локальной смете № 07-04 «Дорожные покрытия в границах участка  реконструируемой тренировочной площадки»: Устройство покрытий; Укладка плитки  тактильной - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы,  ведомости и акты испытаний, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование,  паспорта качества, сертификаты;  

11. По локальной смете № 07-05 «Дорожное благоустройство в границах  благоустраиваемой территории» - акты освидетельствования скрытых работ,  исполнительные схемы, рабочие чертежи, паспорта на материалы и оборудование,  паспорта качества, сертификаты;  

12. По локальной смете № 07-09 «Ограждение территории стадиона»: Земляные  работы, Фундаменты, Ограждение - акты освидетельствования скрытых работ,  исполнительные схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты  отбора бетонной смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества,  сертификаты;  

13. По локальной смете № 02-02-04 «Усиление грунтов основания под мачты  освещения армоэлементами» - акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные  схемы, рабочие чертежи, документы о качестве бетонной смеси, акты отбора бетонной  смеси, паспорта на материалы и оборудование, паспорта качества, сертификаты.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЕЙМА" ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова