Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

07. 03. 2018 года.                                                                                   Дело № А40-150803/17-43-1346

Резолютивная часть решения объявлена 21. 02. 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 07. 03. 2018 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы " УКРиС " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Экми групп " (ОГРН 

<

***>)

об обязании ООО " Экми групп " выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная, в объеме указанном в Рекламационном акте от 28.04.2017 г. и о взыскании 51 572 руб. 24 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № у-09-171/7 от 17.05.2017 г., от ответчика – не явился.

            Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен об обязании ООО " Экми групп " выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная, в объеме указанном в Рекламационном акте от 28.04.2017 г. и о взыскании 51 572 руб. 24 коп. – неустойки, на основании статей 11, 12, 309, 330, 721-724, 755 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст. 41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, в отсутствие возражений со стороны ответчика, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между Государственным казенным учреждением города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (Государственный заказчик, Истец) и ООО « Экми групп» (Генподрядчик, Ответчик) заключен Государственный контракт № 14Р44/0173200001415000149 от 18.05.2015г. на выполнение строительно-монтажных работ в 2015 году по комплексному благоустройству магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах по адресу: г. Москва, ЦАО, улица Мытная.

На основании п. 1.10 Контракта - Гарантийный срок - Период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Государственным заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

На основании п. 10.1. Контракта - Генподрядчик гарантирует по каждому из Объектов: наличие у себя всех допусков  и разрешений,  необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Контрактом Работ; выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам; возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; высокое качество всех работ, смонтированного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ; достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

Цена Контракта составляет 217 789 585,70 руб. 

В соответствии с абз. 1 п. 10.3. Контракта - Гарантийный срок начинается с даты утверждения, в установленном порядке, Акта государственной/приемочной комиссии по приемке работ, а в случае досрочного расторжения Контракта (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Контракта и принятые Государственным заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Контракта, и составляет: на качество выполненных по благоустройству территории (локальные мероприятия), материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(-ах) и составляет 2 (Два) года.

Работы по комплексному благоустройству магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах по адресу: г. Москва, ЦАО/ЮАО, ул. Мытная выполнены и приняты Государственным заказчиком по Акту приемочной комиссии, утвержденному Распоряжением ГКУ «УКРиС» от 18.02.2016г. №у-08-35/6.

В соответствии с п. 10.4. Контракта, если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов).

В соответствии с п. 10.6 Контракта, Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Генподрядчика на Объект(-ы) для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то Государственный заказчик применяет к Генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

Также, на основании п. 10.15 Контракта - Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

25.04.2017г. ГКУ «УКРиС» направило ООО «Экми групп» извещение №у-18-891/7 о проведении комиссионного обследования и составлении Рекламационного акта 28.04.2017г. в 10:00 по адресу: 

<

...>.

28.04.2017г. комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», представителя организации ООО «НЕОН» (ведущей авторский надзор) и представителя Генподрядчика, в лице Исполняющего директора ООО «Экми групп» ФИО2, составила Рекламационный акт, в котором описаны обнаруженные недостатки (дефекты).

В рекламационном акте от 28.04.2017г. указаны причины возникновения недостатков (дефектов), обстоятельств, при которых они возникли и были обнаружены, соблюдение правил эксплуатации. При производстве строительных работ были применены некачественные материалы.

В Рекламационном акте от 28.04.2017г. установлен срок начала выполнения работ - 28.04.2017г. и срок окончания выполнения работ -01.06.2017г.

Продолжительность выполнения работ составляет 35 (Тридцать пять) дней.

04.05.2017г. ГКУ «УКРиС» уведомлением №у-18-989/7 направило ООО «Экми групп» оригинал Рекламационного акта от 28.04.2017г.

Согласно данным с сайта https://www.pochta.ru корреспонденция с номером почтового идентификатора 11509511010165 получена адресатом (ООО «Экми - групп») - 17.05.2017г.

09.06.2017г. ГКУ «УКРиС» направило ООО «Экми групп» уведомление №у-18-1370/7 о том, что 16.06.2017г. в 11:00 по адресу: 

<

...> состоится комиссия для фиксации устранения/неустранения недостатков (дефектов), зафиксированных в Рекламационном акте от 28.04.2017г.

Согласно данным с сайта https://www.pochta.ru корреспонденция с номером почтового идентификатора 11509512004712 имеет статус «Срок хранения истек» с 21.07.2017г.

16.06.2017г. комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», представителя организации ООО «НЕОН» (ведущей, авторский надзор) составила   Акт   об   устранении   (неустранении)   недостатков   (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения работ по комплексному благоустройству магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная.

Надлежащим образом извещенный представитель ООО «Экми групп» на составление Акта об устранении (не устранении) недостатков (дефектов), не явился, о чем свидетельствует соответствующая запись.

ООО «Экми групп» выявленные замечания, указанные в Рекламационном акте от 28.04.2017г., не устранены, тем самым, ООО «Экми - групп» нарушено обязательство по Контракту, предусмотренное абз. 8 п. 10.1 Контракта - своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

В соответствии с локальной сметой на устранение недостатков (дефектов) по объекту: Комплексное благоустройство магистралей, улиц окружного, районного, внутрирайонного значения, а также расположенных в производственных зонах по адресу: 

<

...> - стоимость работ по устранению недостатков составляет 987 973,97 руб.

10.07.2017 г. ГКУ «УКРиС» направило ООО «Экми групп» Претензию № у-06-2117/7 от 30.06.2017 г. с требованием выполнить гарантийные обязательства, устранив недостатки, указанные в Рекламационном акте от 28.04.2017 г. и оплатить неустойку в размере 51 572,24 руб. 

На основании п. 1. ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу абз. 1 п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно с п. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

В соответствии со ст. 309 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из договоров.

На основании ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Требование истца об обязании ООО " Экми групп " выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная, в объеме указанном в Рекламационном акте от 28.04.2017 г., законное обоснованное, соответствует условиям договора и подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании п. 12.3 Контракта - За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Указанная неустойка (пени) начисляется за следующие нарушения по настоящему Государственному контракту: за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок и/или предписанием Государственного заказчика, либо Рекламационным актом (12.3.4 Контракта).

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 51 572 руб. 24 коп. – законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 722, 723 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 12-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Иск Государственного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы " УКРиС " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Экми групп " (ОГРН 

<

***>) об обязании ООО " Экми групп " выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная, в объеме указанном в Рекламационном акте от 28.04.2017 г. и о взыскании 51 572 руб. 24 коп. – неустойки удовлетворить.

Обязать ООО " Экми групп " (ОГРН 

<

***>), в срок не превышающий 90 календарных со дня вступления решения суда в законную силу, выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Мытная, в объеме указанном в Рекламационном акте от 28.04.2017 г.

Взыскать с ООО " Экми групп " (ОГРН 

<

***>) в пользу Государственного учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы " УКРиС " (ОГРН 

<

***>) 51 572 руб. 24 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 8 063 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                                                               О.В. Романов