44_5808924 

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ

 

(резолютивная часть)

Дело № А41-91546/16

27 апреля 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Петровой О.О., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  АО "Мособлэнерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании неустойки и обязании исполнить мероприятия по технологическому  присоединению  

при участии в судебном заседании: согласно протоколу установил: 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН" выполнить мероприятия по  технологическому присоединению, предусмотренные договором № ТП-05-14-164-102-55 от  06.03.2014г. и Техническими условиями:  

1. Выполнить однолинейную схему вводных распределительных устройств и  согласовать в установленном порядке.  

2. Установить вводно-распределительные устройства. Работы по монтажу выполнить  в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и нормативно- технической документацией.  

3. Границы балансовой принадлежности – кабельные наконечники питающих  низковольтных кабельных линий во ВРУ-0,4 кВ жилого дома со встроенными нежилыми  помещениями и подземной автостоянкой.  

4. Узел учета электроэнергии выполнить в соответствии с Приложением –  техническими условиями на организацию учета.  

5. После монтажа электрооборудования провести наладочные работы и  профилактические испытания оборудования и защиты.  

6. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах  границ участка заявителя, предусмотренных Техническими условиями, уведомить сетевую  организацию о выполнении Технических условий.  

7. Принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по  технологическому надзору.  

Обязать ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН" получить разрешение уполномоченного  федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в  эксплуатацию присоединяемых объектов в течение 31 календарного дня со дня принятия  участия в осмотре и составления акта осмотра электроустановки.  

Обязать ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН" в течение 10 рабочих дней после  осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих  устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и  мощности подписать акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт  разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении  технологического присоединения.  

Взыскать с ООО "ИНВЕСТСТРОЙРЕГИОН" в пользу АО «Мособлэнерго» неустойку  в размере 9.701.734 руб. 05 коп., расходы по госпошлине в размере 77.508 руб. 67 коп.  

Выдать исполнительный лист в соответствии со статьей 319 Арбитражного