АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-11021/2023

г. Архангельск

27 декабря 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 декабря 2023 года  

Полный текст решения изготовлен 27 декабря 2023 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Козловой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 13, 20 декабря 2023 года (с объявлением перерыва в судебном заседании) дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Глория" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия, 346431, г. Новочеркасск, Ростовская область, ш Харьковское, дом 48Б)

к ответчику - администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия, 165430, с.Красноборск, Архангельская область, ул.Гагарина, дом 7-а)

о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта,

при участии в судебном заседании:

от истца посредством онлайн связи – ФИО2 по доверенности от 14.07. 2023, 

от ответчика посредством онлайн-связи – ФИО3 по доверенности от 25.10.2023,  ФИО4 по доверенности от 24.10.2023;

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Глория" (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области (далее - ответчик, Администрация) с требованием: признать недействительным решение администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области  об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборско Красноборского муниципального района Архангельской области № 21 от 18.04.2022.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, представил дополнительные документы.

Ответчик с заявленными требованиями не согласен по доводам, изложенным в отзыве, представил дополнительные документы.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 20 декабря 2023 года.

Изучив письменные материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, принявших участие в судебном заседании, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению с учетом следующих обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства.

Как следует из материалов дела, между ООО «Глория» и Администрацией муниципального образования «Красиоборский муниципальный район» Архангельской области» в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен муниципальный контракт от 18.04.2022 года № 21 (ИКЗ 223291400023029140100100310017112414) на выполнение работ по разработке проектно-сметиой документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборск Красиоборского муниципального района Архангельской области (далее - Контракт).

Согласно условиям Контракта Общество (подрядчик по контракту) обязалось разработать проектно-сметную документацию в соответствии с заданием, а Администрация (заказчик по контракту) обязалось принять и оплатить разработанную документацию (п. 1.1 Контракта). 

Цена Контракта 6 240 000,00 руб. (п. 3.1 Контракта). Оплата производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Авансирование не предусмотрено (п. 3.2 Контракта). 

Общий срок разработки и согласования проектной документации составляет - 16 месяцев с даты заключения Контракта, а именно 17.08.2023 (Приложение № 2 Календарный график выполнения работ и стоимости). 

Между сторонами заключены дополнительное соглашение № 1 к Контракту от 09.12.23 г. (увеличена протяженность магистральных сетей водоотведения с 1364 м до 2000 м), дополнительное соглашение № 4 от 22.05.23 г. (увеличена цена Контракта с 6 240 000,00 руб. до 6 864 000,00 руб., увеличен срок выполнения Контракта на 1 один месяц).

Предметом Контракта явилась разработка проектно-сметиой документации на канализационные сети (линейный объект). Результат работ - проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий (технический отчет) при наличии положительного заключения государственной экспертизы (п. 1.2 Контракта).

Согласно п. 1.3 Контракта при выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик руководствуется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) на выполнение проектно-изыскательских работ, действующими нормативно-техническими документами, касающимися дорожной деятельности, законодательством Российской Федерации, а также иными исходными данными, необходимыми для составления проектной документации.

Согласно п.5 Технического задания перед началом работ Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимой исходной документацией:

- документы о праве собственности на очистные сооружения канализации, канализационную насосную станцию и сети водоотведения в с. Красноборск СП «Алексеевское» Красноборского муниципального района Архангельской области;

- технические паспорта на очистные сооружения канализации, канализационную насосную станцию и сети водоотведения в с. Красноборск СП «Алексеевское» Красноборского муниципального района Архангельской области;

- акт технического обследования системы водоотведения с. Красноборск СП «Алексеевское» Красноборского муниципального района Архангельской области;

- протоколы качества очистки сточных вод за 2021 год;

- схема водоснабжения и водоотведения СП «Алексеевское» Красноборскогомуниципального района Архангельской области;

- данные о количестве отведенных сточных вод за 2018-2020 годы;

- технические условия ресурсоснабжающих организаций (при наличии) (п. 5 Технического задания - Приложение № 1 к Контракту).

Письмом от 28.04.2022 Общество запросило у Администрации перечень исходных данных, необходимых для проектирования, в том числе: утвержденный баланс водопотребления и водоотведения или количество жителей с учетом перспективного прироста, нормой водопотребления к т.д; пожелание Заказчика об автономности (степени автоматизации) очистных сооружений канализации (КОС) и канализационной насосной станции (КНС). В случае необходимости постоянного присутствия людей расписание; существующие технические условия на воду, электроэнергию для КОС и КНС; существующие лабораторные протоколы анализов поступающих сточных вод в течение 3-х лет; объем планируемых стоков, которые планируется привозить ассенизаторскими машинами; планы существующих сетей водоснабжения и канализации; информация о наличии гидрантов в пределах (радиусе) 200 метров от объектов (КОС и КНС); данные от территориального органа Федерального агентства водных ресурсов со сведениями об идентификационных характеристиках водного объекта, в который планируется запроектировать сброс очищенных сточных вод; градостроительные планы на земельные участки с объектами КОС и КНС; правоустанавливающие документы на эти участки; правоустанавливающие документы на существующие здания КОС, КНС и другие существующие сооружения на площадке КОС, технические паспорта на эти здания, строения, сооружения; существующий план площадки КОС со всеми зданиями и сооружениями; ситуационный план; сведения о наличии в районе полигона ТБО (или ближайших районах, их удаленность); сведения о подразделениях пожарной охраны относительно проектируемого объекта и расчетное время их прибытия на пожар (л.д. 30).

Письмом от 06.05.2022 Администрация направила Обществу документы о праве собственности, технические паспорта на очистные сооружения канализации, канализационную насосную станцию и сети водоотведения в с. Красноборск СП «Алексеевское» Красноборского муниципального района Архангельской области, технические паспорта на существующие очистные сооружения; акт технического обследования системы водоотведения от декабря 2020 года, протокол качества очистки сточных вод за 2021 год, а так же данные о количестве отведенных сточных вод за 2020 год (представлено в электронном виде 10.11.2023).

Письмом от 21.06.2022 Общество повторно запросило у Администрации утвержденный баланс водопотребления и водоотведения, существующие технические условия на воду, электроэнергию для КОС и КНС; планы существующих сетей водоснабжения и водоотведения, градостроительные планы на земельные участки с объектами КОС и КНС, правоустанавливающие документы на земельные участки, ситуационный план (л.д. 32).

Письмом от 20.07.2022 Администрация уведомила Общество, что земельный участок для расположения КОС будет сформирован на территории существующих КОС и гарантировал формирование земельного участка и выдачу ГПЗУ до марта 2023 года.

Письмами от 17.02.2023, 25.05.2023 Общество повторно запросило у Администрации градостроительный план на земельный участок, правоустанавливающие документы на земельный участок, актуализированную балансовую схему водоснабжения и водоотведения.

Письмом от 28.06.2023 Администрация направила Обществу схему земельного участка и гарантировала формирование земельного участка и выдачу ГПЗУ до 15.08.2023 (л.д.35).

Претензией от 27.06.2023 Администрация уведомила Обществу о нарушении последним графика производства работ, в частности, что до 18.06.20023 исполнитель должен был предоставить для согласования и согласовать проектно-сметную документацию (л.д.37). 

Письмом от 29.06.2023 подрядчик уведомил заказчика о приостановке работ в связи с непредоставлением исходных данных, в том числе градостроительного плана. (л.д.38).

Градостроительный план земельного участка направлен Подрядчику письмом 14.07.2023 исх. № 01.1-21/153 (представлено в электронном виде 10.11.2023).

Администрацией 11.08.2022 исх. № 01.1-19/198 в адрес Подрядчика направлено письмо о необходимости ускорения выполнения работ с целью обеспечения исполнения календарного графика, графика финансирования проектно-изыскательских работ, недопущения срыва исполнения контракта.

31.08.2023 Заказчиком в адрес Подрядчика направлена претензия о недопустимости нарушения сроков исполнения Муниципального контракта и на возможность расторжения Муниципального контракта в одностороннем порядке.

Пунктом 12.4. Муниципального контракта предусмотрено право заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях задержки Подрядчиком сроков начала и (или) окончания выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ (при их наличии), установленных в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

25.08.2023 администрацией МО «Красноборский муниципальный район» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Муниципальному контракту, о чем в адрес Общества направлено соответствующее уведомление (исх. № 01.1-14/67).

Посчитав односторонний отказ Администрации от исполнения контракта безосновательным, принятым без учета фактических обстоятельств, Общество обратилось в суд с настоящим иском.

Возражая по иску, Администрация ссылается, что ссылка истца на непредоставление Ответчиком исходных данных не соответствует действительности, информация о потребителях, частоте и объемах привозных стоков ЖБО, необходимая для разработки проектной документации, направлена Заказчиком в адрес Подрядчика письмом от 02.11.2022 исх. № 01.1-19/258. Обосновывая позднее (спустя 1 год и 3 месяца после заключения контракта) предоставление градостроительного плана земельного участка Администрация ссылается, что не были установлены границы земельного участка, а также то, что муниципальным контрактом не предусмотрена обязанность Заказчика перед началом работ обеспечить предоставление Подрядчику градостроительного плана земельного участка.

К дате принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Муниципального контракта - 25.08.2023, Подрядчиком были завершены работы по 1 и 2 этапам Муниципального контракта. Работы, произведенные Подрядчиком, были приняты Заказчиком и оплачены на сумму 3 120 000,00 руб. (акт от 22.12.2022 № 87, платежное поручение от 29.12.2022 №518605).

В соответствии с положениями статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расторжение договора возможно по соглашению сторон, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных названным  Кодексом, другими законами или договором, а также в одностороннем внесудебном порядке в случае, когда такое право предоставлено Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В пункте 2 статьи 450.1 ГК РФ предусмотрено, что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Между сторонами возникли правоотношения по выполнению проектных и изыскательских работ для государственных нужд, которые регулируются положениями параграфа 4 главы 37 ГК РФ, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), а также общими нормами гражданского законодательства об обязательствах и ответственности за их нарушение.

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Разновидностью договора подряда выступает подряд на выполнение проектных работ.

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В соответствии с частью 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с частью 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (статья 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В силу части 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом

Пунктом 12.4. Муниципального контракта предусмотрено право заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях задержки Подрядчиком сроков начала и (или) окончания выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ (при их наличии), установленных в графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

В соответствии с контрактом в редакции дополнительного соглашения срок окончания работ - 17.09.2023.

Материалами дела подтверждается, что в установленный контрактом срок результат работ Обществом Администрации не передан.

Согласно пункту 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора, при этом в силу пункта 1 статьи 406 указанного Кодекса кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Указанные обстоятельства подтверждаются в первую очередь письменными доказательствами.

В соответствии с частью 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если подготовка проектной документации осуществляется индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом на основании договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор обязаны предоставить таким индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу:

1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, а также случая, предусмотренного частью 11.1 настоящей статьи);

2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором подряда на подготовку проектной документации должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

3) технические условия подключения (технологического присоединения), предусмотренные статьей 52.1 настоящего Кодекса (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения).

Согласно пункту 1 статьи 759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Статьей 762 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре.

О том, что заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, также указано в пункте 1 статьи 718 ГК РФ.

В соответствии со статьей 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Заказчик, получивший соответствующее сообщение от подрядчика, обязан принять необходимые меры для устранения обстоятельств, препятствующих выполнению работ подрядчиком (пункт 3 статьи 716  ГК РФ).

В соответствии со статьей 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

Общество не оспаривает, что контракт не был полностью исполнен им, однако настаивает на том, что неисполнение в полном объеме произошло по вине Администрации, которая уклонилась от содействия в исполнении контракта.

Исследовав и оценив в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, представленные сторонами в материалы дела доказательства в том числе, письма Общества от 28.04.2022, 21.06.2022, 17.02.2023, 25.05.2023 в адрес Администрации о передаче градостроительного плана и правоустанавливающих документов на земельный участок, учитывая, что градостроительный план, который относится к исходным данным передан Администрацией Обществу только 14.07.2023 (за 2 месяца до окончания срока выполнения работ по контракту), учитывая, что письмом от 20.07.2022 Администрация уведомила Общество, что земельный участок для расположения КОС будет сформирован на территории существующих КОС, и изыскания выполнены Обществом по фактическому размещению зданий, строений и сооружений, в то время как согласно представленному градостроительному плану выделен иной земельный участок для строительства КОС,  учитывая положения части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о просрочке со стороны заказчика, выразившейся в длительном уклонении Администрацией от предоставления исходных данных, что привело к искусственной просрочке, созданной самим заказчиком.

Возражения ответчика, что передача градостроительного плана не была предусмотрена техническим заданием и указанный документ не мог быть передан ввиду несформированности земельного участка, отклоняются судом как несостоятельные, поскольку передача градостроительного плана в составе исходных данных закреплена в части 6 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В отношении иных документов, на просрочку в передаче которых Администрацией ссылается Общество, в том числе утвержденный баланс водопотребления или информация о количестве жителей с учетом перспективного прироста, информация о существующих лабораторных протоколах анализов поступающих сточных вод в течение 3 лет, суд приходит к выводу, что факт просрочки их передачи со стороны Администрации истцом не доказан, поскольку опровергается представленными документами, так информация о потребителях, частоте и объемах привозных стоков ЖБО, необходимая для разработки проектной документации, направлена Заказчиком в адрес Подрядчика письмом от 02.11.2022 исх. № 01.1-19/258, Администрацией в адрес Подрядчика 06.05.2022 исх. № 01.1-20/83 направлен протокол об административном правонарушении № 06-01-06/2021 от 16.03.2021, приложением к которому являются акты отбора проб воды (стр. 6 протокола), протоколы лабораторных испытаний сточных вод до очистки № 639 от 27.02.2023, № 1032 от 27.03.2023, № 1169 от 07.04.2023 направлены Подрядчику 07.04.2023 года посредством электронной почты.

Между тем, учитывая значительную просрочку Администрации в передаче исходных данных в части передачи градостроительного плана и формировании земельного участка, допущенную Администрацией (контракт заключен 18.04.2022, а данные переданы 14.07.2023), принимая во внимание, что в материалы дела представлены доказательства приостановления работ подрядчиком в порядке части  1 статьи 719 ГК РФ, что просрочка в исполнении контракта вызвана действиями Администрации, недобросовестного поведения со стороны подрядчика судом при рассмотрении настоящего спора не установлено, суд приходит к выводу, что оснований для одностороннего отказа от исполнения государственного контракта не имелось.

Кроме того, в период исполнения контракта (со дня заключения по день получения уведомления подрядчика об отказе от контракта) Администрация не заявляла подрядчику об утрате интереса в исполнении контракта в виду нарушения конечного срока выполнения работ по контракту.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчик неправомерно на основании пункта 2  статьи 715 ГК РФ в одностороннем порядке отказался от исполнения договора.

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование Общества и признает недействительным решение №01.1-14/67 от 25.08.2023 администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области № 21 от 18.04.2022.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине по результатам рассмотрения заявленного требования относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Признать недействительным решение №01.1-14/67 от 25.08.2023 администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области № 21 от 18.04.2022.

Взыскать с администрации муниципального образования "Красноборский муниципальный район" Архангельской области (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Глория" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Судья

 

М.А. Козлова