АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

09 августа 2019 года

Дело №

А55-14572/2019

Арбитражный суд Самарской области

в составе

ФИО1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бачурихиной Г.Н. 

рассмотрев в судебном заседании  02 августа 2019 года02 августа 2019 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "НПО Технология"

От  20 мая 2019 года   № 

к Акционерному обществу "Ленводоканалпроект"

о взыскании 6 580 120 руб.41 коп.

при участии в заседании

от истца - ФИО2 директор (личность установлена)

                  Трух Д.А., представитель по доверенности от 17.06.2019 от ответчика - не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Технология" обратилось в суд с иском к Акционерному обществу "Ленводоканалпроект" с требованиями:

1.о взыскании задолженности по договору №1618/01 от 23.11.2016:

-пени в размере 62 250 руб. за просрочку оплаты работ по этапу №3;

-по оплате работ по этапу №4 в размере 2 208 249 руб.;

-пени в сумме 110 412 руб. 45 коп. за просрочку оплаты работ по этапу №4;

-проценты по ст. 395 ГК РФ за период с 04.06.2018 по 18.02.2019 в сумме 117 354 руб. 82 коп. по этапу работ №4.

2.о взыскании  задолженности по договору № 1538/01 от 09.01.2018:

-по оплате этапа работ №2 в размере 3 879 420 руб.;

-пени в размере 193 971 руб. за просрочку оплаты работ этапа №2 с 07.09.2018 по 18.02.2019;

-проценты в соответствии с требованиями ст. 395 ГК РФ по состоянию с 07.09.2018 по 18.02.2019 в сумме 132 963 руб. 14 коп. по этапу работ №2.

В настоящем судебном заседании руководствуясь ст. 49 АПК РФ суд принимает частичный отказ от требований истца о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 250 317 руб. 96 коп.

Ответчик отзыв не представил, заявленные требования не оспорил.

Спор рассматривается в соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив обоснованность доводов, изложенных в исковом заявлении, суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

23.11.2016 между Обществом с ограниченной ответственностью «НПО ТЕХНОЛОГИЯ» (далее - Подрядчик) и Акционерным обществом «Ленводоканалпроект» (далее - Заказчик) заключен Договор № 1618/01 по выполнению работ по разработке комплекса инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство системы водоподготовки в цехе ОС и ВК (Водозабор), производительностью 40000 мЗ\в сутки" с прохождением экспертизы проектно-изыскательской документации(далее — Договор № 1618\01).

Согласно указанному Договору Подрядчик обязуется провести работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с ценой установленной для каждого этапа выполненных работ.

В соответствии с вышеуказанным договором и приложениями к нему (являющимися неотъемлемой часть договора), а также дополнительным соглашением № 1 договору № 1618/01 от 19.02.2018 стоимость работ составляет:

по этапу № 3 - сопровождение государственной экспертизы проектной документации в размере 1 245 000 рублей;

по этапу № 4 - разработка рабочей документации в размере 2 208 249 рублей.

Подрядчиком работы по этапу:

№ 3 выполнены в полном объеме и переданы Заказчику по акту приема-передачи № 3 от 10.01.2018г.;

№ 4 выполнены в полном объеме и переданы Заказчику по акту приема-передачи № 4 от 03.05.2018.

В соответствии с требованиями п. 2.4 Договора № 1618/01 основанием для оплаты выполненных работ (этапов работ) является акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет фактура, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Оплата производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки, выполненных работ по каждому этапу работ, согласно календарного плана при отсутствии мотивированных замечаний Заказчика.

Вышеуказанные работы по этапу № 3 и № 4 приняты Заказчиком в полном объеме, без каких-либо замечаний или недостатков как выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора № 1618\01.

В месте с тем, в установленные Договором № 1618\01, дополнительным соглашением № 1 к нему  от   19.02.2018,   протоколом согласования договорной цены (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 19.02.2018) сроки Заказчиком оплата по указанным этапам Подрядчику произведена не была.

06.06.2018 за № 18-324 в адрес Заказчика направлена претензия № 1 с предложением добровольно исполнить свои обязательства по оплате работ по этапу № 3 в размере 1 250 000  рублей и пеней в сумме 62 250 рублей.

Заказчиком в ответе от 18.06.2018 № 01-10X1618\28 на вышеуказанную претензию подтверждена задолженность по оплате работ по этапу № 3 и указан срок оплаты 14.09.2018г.

25.09.2018г. Заказчик оплатил Подрядчику денежные средства в размере 1 250 000 рублей. Вместе с тем, пени в размере 62 250  рублей до настоящего времени Заказчиком Подрядчику не выплачены в полном размере.

22.10.2018г. за № 18-573 в адрес Заказчика направлена претензия № 2 с предложением добровольно исполнить свои обязательства по оплате работ по этапу № 4 в размере 2 208 249 рублей и пени в размере 110 412 рублей 45 копеек.

Заказчиком в ответе от 02.11.2018 № 01-10\1618\30 на вышеуказанную претензию подтверждена задолженность в вышеуказанном размере по оплате работ по этапу № 4 и указан срок оплаты 15.02.2019г.

Вместе с тем, по состоянию на 18.02.2019г. Заказчик не оплатил Подрядчику работы по этапу № 4 в размере 2 208 249 и пени в размере 110 412,45 (сто десять тысяч четыреста двенадцать) рублей 45 копеек.

В связи с неисполнением своих обязанностей по договору № 1618\01 с Заказчика подлежит взысканию следующие суммы:

1) Пени за несвоевременную выплату денежных средств по этапу № 3

В соответствии с п. 2.3 Договора № 1618\01 обязанность Заказчика оплатить работу возникает по истечению 30 календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Акт приема передачи результатов работы по этапу № 3 подписан 10.01.2018 года, установленные п.2.3 Договора 30-ти суточный срок истек 09.02.2018. В связи с тем, что первый день просрочки пришелся на 10.02.2018 года, то есть выходной день, первым днем просрочки является первый рабочий день, то есть 12.02.2018. Денежные средства заказчиком по этапу работ № 3 перечислены Подрядчику 25.09.2018. Срок просрочки составил 224 дня (с 12.02.2018 по 24.09.2018 включительно).

В соответствии с п. 6.6 Договора 1618\01 за просрочку оплату работ Заказчику по требованию Подрядчика начисляются пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости этапа работ.

Требование Заказчику по выплате пени было выставлено Подрядчиком претензией 06.06.2018.

Таким образом, начисление 0,1 % за каждый день просрочки составит 1 245 000*0,1%*224=278 880 рублей. Однако, учитывая, что в соответствии с требованием п. 6.6 Договора 1618\01 пени могут быть начислены не более чем 5% от стоимости этапа работ взыскание подлежат пени в размере 62 250 рублей (1 245 000/100*5=62 250).

2) Неисполнение Заказчиком обязанности по оплате этапа работ № 4 в размере 2 208 249 (два миллиона двести восемь тысяч двести сорок девять). Акт приема передачи № 4 подписан 03.05.20 1 8. Претензия направлена 22.10.2018 года. По состоянию на 18.02.2019 Заказчиком обязанности по оплате работ не исполнены.

3) Пени за несвоевременную выплату денежных средств по этапу № 4

В соответствии с п. 2.3 Договора № 1618\01 обязанность Заказчика оплатить работу возникает по истечению 30 календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Акт приема передачи результатов работы по этапу № 4 подписан 03.05.2018 года, установленные п.2.3 Договора 30-ти суточный срок истек 01.06.2018. В связи с тем, что первый день просрочки пришелся на 01.06.2018 года, то есть выходной день, первым днем просрочки является первый рабочий день, то есть 04.06.2018. Срок просрочки составил 260 дней (с 04.06.2018 по 18.02.2018 включительно).

В соответствии с п. 6.6 Договора 1618\01 за каждый день просрочки Заказчику по требованию Подрядчика начисляется пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости этапа работ.

Требование Заказчику по выплате пени было выставлено Подрядчиком претензией 22.10.2018г.

Таким образом, начисление 0,1% за каждый день просрочки составит 2 208 249 *0,1*260=574 144 рубля 74 копейки. Однако, учитывая, что в соответствии с требованием п. 6.6 Договора 1618\01 пени могут быть начислены не более чем 5% от стоимости этапа работ взысканию подлежат пени в размере 110 412 рублей 45 копеек (2 208 249/100*5=110 412,45).

09.01.2017 между Обществом с ограниченной ответственностью «НПО ТЕХНОЛОГИЯ» (далее - Подрядчик) и Акционерным обществом «Ленводоканалпроект» (далее - Заказчик) заключен Договор № 1538/01 по выполнению работ по разработке рабочей документации и обследования существующих строительных конструкций и сооружений по объекту "Техническое перевооружение системы водоподготовки в цехе ОС и ВК (Водозабор)" с прохождением экспертизы промышленной безопасности рабочей документации (далее - Договор № 1538X01).

Согласно указанному Договору Подрядчик обязуется провести работы в соответствии с указанным Договором № 1538X01 и приложениями к указанному договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с ценой установленной для каждого этапа выполненных работ (далее -Работа).

В соответствии с вышеуказанным договором и приложениями к нему (являющимися неотъемлемой частью договора), а также дополнительным соглашением № 1 к договору

№ 1538/01 от 19.01.2018 стоимость работ:

- по этапу № 2 - выдача заказной технической документации на основное и вспомогательное оборудование, разработка рабочей документации установлена в размере 3 879 420 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей.

Подрядчиком работы по этапу № 2 выполнены в полном объеме и переданы Заказчику по акту приема-передачи № 2 от 07.08.2018г.

В соответствии с требованиями п. 2.4 Договора № 1538X01 основанием для оплаты выполненных работ (этапов работ) является акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет фактура, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Оплата производится Заказчиком в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки, выполненных работ по каждому этапу работ, согласно календарного плана при отсутствии мотивированных замечаний Заказчика.

Вышеуказанные работы по этапу № 2 приняты Заказчиком в полном объеме, без каких-либо замечаний или недостатков как выполненные Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора № 1538X01.

В месте с тем, в установленные Договором № 1538X01, дополнительным соглашением № 1 к нему, протоколом согласования договорной цены (приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 19.01.2018) сроки Заказчиком оплата Подрядчику произведена не была.

22.10.2018 за № 18-574 в адрес Заказчика направлена претензия № 1 с предложением добровольно исполнить свои обязательства по оплате работ по этапу № 2 в сумме 3 879 420 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей и пени в размере 193 971 (сто девяносто три тысячи девятьсот семьдесят один) рубль.

Заказчиком в ответе от 14.11.2018 № 01-10\1538\6 на вышеуказанную претензию подтверждена задолженность по оплате работ по этапу № 2. Однако в связи с имеющимися финансовыми проблемами Заказчик отказался от выплаты, указав, что при наличии возможности оплата будет произведена частями до 15.03.2019г.

В связи с неисполнением своих обязанностей по договору № 1538X01 с Заказчика подлежит взысканию следующие суммы:

1) денежные средства по оплате этапа работ № 2 в размере 3 879 420 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать) рублей. Акт приема передачи № 2 подписан 07.08.2018. Претензия направлена 22.10.2018 года. По состоянию на 18.02.2019 Заказчиком обязанности по оплате работ не исполнены.

2) Пени за несвоевременную выплату денежных средств по этапу № 2

В соответствии с п. 2.3 Договора № 1538X01 обязанность Заказчика оплатить работу возникает по истечению 30 календарных дней после подписания акта приема-передачи.

Акт приема передачи результатов работы по этапу № 2 подписан 07.08.2018 года, установленные п. 2.3 Договора 30-ти суточный срок истек 06.09.2018 (воскресенье). Таким образом, первым днем просрочки является 07.09.2018г. Срок просрочки составил 165 дней (с

07.09.2018по 18.02.2019 включительно).

В соответствии с п. 6.6 Договора 1538X01 за каждый день просрочки Заказчику по требованию Подрядчика начисляются пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 5% стоимости этапа работ.

Требование Заказчику по выплате пени выставлено Подрядчиком претензий 22.10.2018.

Таким образом, начисление 0,1% за каждый день просрочки составит 3 879 420 *0,1* 165=640 104 рублей 30 копеек. Однако, учитывая, что в соответствии с требованием п. 6.6 Договора 1538X01 пени могут быть начислены не более чем 5% от стоимости этапа работ взыскание подлежат пени в размере 193 971 рублей (3879420 /100*5=193 971).

На письменные претензии от 06.06.2018 и 22.10.2018 (по договору 1618X01 от 23.11.2016) и 22.10.2018 (по договору 1538X01 от 09.01.2018) полученные АО "Ленводоканалпроект" поступили ответы о невозможности АО "Ленводоканалпроект" исполнить свои обязательства по указанным договорам.

Таким образом, ООО "НПО ТЕХНОЛОГИЯ" исполнило условия п. 7.6. договоров № 1638X01 от 23.11.2016 и № 1518X01 от 09.01.2018 о досудебном урегулировании неисполнения АО "Ленводоканалпроект" своих обязательств по оплате проведенных работ и выплате пени, однако споры и разногласия не разрешены по вышеуказанным причинам.

В соответствии с п. 7.7. договоров № 1638X01 от 23.11.2013 и № 1518X01 от 09.01.2018 при невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда; при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику (статьи 702 и 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Часть 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит о том, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

Согласно статье 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу абзаца второго статьи 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик, в частности, обязан, если иное не предусмотрено договором, уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статьи 64 (часть 1), 65 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу, что требования по взысканию задолженности по договору подряда подлежат удовлетворению.

Статьей 330 ГК РФ установлено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Расчет неустойки судом признан верным.

Расходы по государственной пошлине и расходы на представителя, согласно ст. 110, 112 АПК РФ распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. 167-171, 180, 181, ч. 1 ст. 259, ч.3 ст.319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Отказ от иска в части взыскания 250 317 руб. 96 коп. принять, производство в этой части прекратить.

Взыскать с Акционерного общества "Ленводоканалпроект" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "НПО Технология" 6 580 120 руб.41 коп., в т.ч. по договору №1618/01 от 23.11.2016: 62 250 руб.- пени по оплате этапа №3, 2 208 249 руб. -задолженность по оплате этапа №4, 110 412 руб. 45 коп.- пени по оплате этапа №4; по договору №1538/1 от 09.01.2018: 3 879 420 руб.- задолженность по оплате этапа №2, 193 971 руб.- пени по оплате по оплате этапа №2, а также расходы по госпошлине в размере 55 901 руб.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "НПО Технология" справку на ' возврат государственной пошлины в сумме 622 руб.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

ФИО1