28_4724603  

 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-11183/2023

город Мурманск

11 марта 2024 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

исковые требования Муниципального казенного учреждения «Управление  жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕВЕР» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)) в течение месяца с момента вступления в законную  силу решения устранить недостатки работ выполненных по муниципальному контракту №  65-2021 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории пр. Металлургов,  д.48 в городе Мончегорске от 07.06.2021, обнаруженные в течение гарантийного срока:  

Устранить провал асфальтобетонного покрытия напротив пятого подъезда МКД №  48/1 по пр. Металлургов в соответствии с техническим заданием. Асфальтобетонное  покрытие Тип I:  

1) Фрезерование асфальтобетонных покрытий толщиной слоя до 70 мм. - п. 2  технического задания к МК № 65-2021 от 07.06.2021 и п. 5 локальной сметы № 02-2021 (1  этап).  

2) Розлив вяжущих материалов - п. 3 технического задания к МК № 65-2021 от  07.06.2021 и п. 1 локальной сметы № 02-2021 (2 этап).  

3) Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси - п. 4 технического  задания к МК № 65-2021 от 07.06.2021 и п. 2 локальной сметы № 02-2021 (2 этап).  

4) Розлив вяжущих материалов – п. 5 технического задания к МК № 65-2021 от  07.06.2021 и п. 3 локальной сметы № 02-2021 (2 этап).  

5) Устройство покрытия толщиной 5 см. из горячих асфальтобетонных смесей  мелкозернистых марки II, тип Б - п. 6 технического задания к МК № 65-2021 от 07.06.2021  и п. 4 локальной сметы № 02-2021 (2 этап).  

Выполнить работы по окрашиванию металлических ограждений в соответствии с  техническим заданием.  

Общестроительные работы: 

1) Огрунтовка металлических ограждений за один раз грунтовкой ГФ-021 - п. 18, 21  технического задания к МК № 65-2021 от 07.06.2021 и п. 26, 31 локальной сметы № 022021 (2 этап).  

2) Окраска металлических поверхностей ограждения эмалью ПФ-115 (в два слоя) - п.  19, 22 технического задания к МК № 65-2021 от 07.06.2021 и п. 27, 32 локальной сметы   № 02-2021 (2 этап).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСЕВЕР» (ИНН  

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» (ИНН 

<

***>) судебные расходы по  оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня принятия.  

Судья О.О. Новикова