АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-18334/2019

г. Барнаул

16 июля 2020 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  

протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств  

аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Магистраль»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

«Детский сад № 43» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Славгород,  

о внесении изменений в муниципальный контракт № Ф.2018.622067 от 17.12.2018,  и по иску  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Славгород,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

Магистраль», (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

о взыскании неустойки в размере 1 188 077 руб. 92 коп. и штрафа в размере 60 000  

руб., 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  

самостоятельных требований относительно предмета спора, 

Администрации города Славгорода Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН  

22210002135), г. Славгород, 

акционерного общества «Проектный институт «Алтайкоммунпроект» (ОГРН  

1162225106780, ИНН 

<

***>), г. Барнаул, 

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (ОГРН  

1165476182101, ИНН 

<

***>), г. Новосибирск, 

при участии в судебном заседании: 

от истца по первоначальному иску – представитель ФИО2 по  доверенности от 05.03.2020,  

от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом, 

Руководствуясь статьями 110, 148, 167-170, 171, 173, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

внести изменения в существенные условия Муниципального контракта   № Ф.2018.622094 от 17.12.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте  «Детский сад № 43 г. Славгорода», Идентификационный код закупки: 18  3221000969122100100100070014120000, в части конечного срока выполнения работ; а  именно пункт 5.3 Муниципального контракта, изложив его в следующей редакции: «5.3.  Работа должна быть закончена в срок не позднее 01.07.2020 года»;  

А также в Приложении № 3 к Контракту изложить графу «срок выполнения работ»  в следующей редакции: «Окончание выполнения работ - не позднее 01.07.2020 года».  

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 43» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания Магистраль» 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении искового заявления муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 43» в части требований о взыскании  неустойки и штрафов по пунктам 4.4.16 и 4.4.21 отказать.  

Исковое заявление муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 43» в части требования о взыскании штрафа по пункту  4.4.27.1 контракта оставить без рассмотрения.  

Взыскать с муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 43» в доход федерального бюджета Российской Федерации  37 329 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно- Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Разъяснить сторонам, что в силу положений части 3 статьи 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по  ходатайству взыскателя.  

Судья В.Н. Прохоров