АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-171872/19-96-1460

г. Москва

12 августа 2019 года

Резолютивная часть объявлена 06 августа 2019 года

Решение изготовлено в полном объеме 12 августа 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Гутник П.С. 

при ведении протокола помощником судьи Пятковым В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «БКИ ГРУПП» 

к ответчику ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН»

 о взыскании 1 009 694,05 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, по доверенности от 01.08.2019 года; 

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ООО «БКИ ГРУПП» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» о взыскании задолженности по Договорам № 265/П/2017 от 17.01.2017, № 027/П/2018 от 16.02.2018, № 49/18(м) от 14.11.2018 в общей сумме 961 613,38 руб., неустойки в размере 48 080,67 руб., а также почтовых расходов в размере 540,01 руб.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме, сослался на неисполнение ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» обязательств по оплате выполненных истцом в рамках указанных Договоров работ.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. В материалах дела имеются документы, подтверждающие надлежащее извещение ответчика о времени и месте предварительного судебного заседания и рассмотрения дела по существу.

Учитывая надлежащее уведомление ответчика о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, отсутствие возражений истца на переход к рассмотрению дела по существу, в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №65 от 20.12.2006 г., суд завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в отсутствие представителя ответчика в соответствии с требованиями ст.ст. 123, 124, 156 АПК РФ.

При этом суд особо отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда суд обязывал Ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ заблаговременно до даты судебного заседания.

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ Ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

Суд, исследовав материалы дела, выслушав доводы истца, оценив представленные доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «БКИ ГРУПП» (далее - «Истец», «Подрядчик») и ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» (далее - «Ответчик», «Генподрядчик») были заключены следующие договоры подряда № 265/П/2017 от 17.01.2017, № 027/П/2018 от 16.02.2018, № 49/18(м) от 14.11.2018 (далее – Договоры).

I. В соответствии с условиями Договора  № 265/П/2017 от 17.01.2017 ООО «БКИ ГРУПП» по заданию ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» и в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Договору) обязалось выполнить работы по разработке рабочей документации (стадия «РП»), в том числе сметной документации, систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией бытового городка (148 бытовых помещений) на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе 

<

...>) (далее - Объект), а ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» - принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Общая стоимость работ (цена Договора) в соответствии с п.3.1 Договора, Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) составляет 187 734,48 руб.

Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: аванс в размере 70% от общей стоимости работ, что составляет 131 414,13 руб. подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора; оплата выполненных работ в полном объеме производится в течение 10 банковских дней с даты подписания Генподрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и передачи Подрядчиком разработанной документации по накладной (проектно-сметной документации) (п.3.2 Договора).

Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика (п.2.1 Договора).

II. В соответствии с условиями Договора № 027/П/2018 от 16.02.2018 ООО «БКИ ГРУПП» по заданию ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» и в соответствии с проектной документацией обязалось выполнить строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по устройству системы пожарной сигнализации (АПС), системы дымоудаления (АДУ), системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на Объекте «Многоквартирный дом № 12 (в составе корпусов №№12.1, 12.2, 12.3, подземного паркинга на 144 м/мест многоквартирного дома № 12, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:2109 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д. Николо-Хованское», а также работы, прямо не предусмотренные Договором, но необходимые для надлежащего выполнения работ по Договору, а ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» - принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Общая стоимость работ (цена Договора) в соответствии с п.2.1 Договора, Перечнем стоимости по видам и объемам работ (Приложение № 1 к Договору) составляет 5 259 900 руб.

Пунктом 2.3 Договора предусмотрено, что Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс в размере 2 259 995 руб.

Вместе с тем, 02.10.2018 в связи с увеличением объема работ в рамках Договора между сторонами было подписано Дополнительное соглашение № 1, по условиям которого Субподрядчик обязался выполнить работы по монтажу дополнительного оборудования системы автоматизации пожарной сигнализации и пусокналадочные работы на объекте «Многоквартирный дом № 12 (в составе корпусов №№12.1, 12.2, 12.3, подземного паркинга на 144 м/мест многоквартирного дома № 12, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:2109 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д. Николо-Хованское», общая стоимость которых составила 80 390,93 руб.

Пунктом 3 Дополнительного соглашения № 1 к Договору также предусмотрено, что Подрядчик вправе выплатить Субподрядчику аванс в размере 40 195,46 руб.

Оплата фактически выполненных работ за вычетом ранее выплаченного аванса пропорционально объему и стоимости работ, выполненных в каждом отчетном периоде, с удержанием генподрядных услуг в размере 10% о стоимости выполненных работ производится в течение 20 рабочих дней с даты получения оригинала счета, выставленного Субподрядчиком после подписания сторонами Актов выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат, а за последний отчетный период Акта о выполнении работ и начале гарантийного срока (п.2.4 Договора).

Субподрядчик обязался приступить к выполнению работ по Договору с даты перечисления Подрядчиком  авансового платежа, при этом общий срок выполнения работ составляет 45 календарных дней с даты начала выполнения работ (п.п.3.1, 3.2 Договора).

Субподрядчик обязался приступить к выполнению дополнительных работ, предусмотренных Дополнительным соглашением № 1 к Договору с даты перечисления Подрядчиком  авансового платежа, при этом общий срок выполнения данных работ составляет 30 календарных дней с даты начала выполнения работ (п.5 Дополнительного соглашения № 1 к Договору).

III. В соответствии с условиями Договора  № 49/18(м) от 14.11.2018 ООО «БКИ ГРУПП» по заданию ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» обязалось выполнить монтажные и пусконаладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией бытовых помещений (150 бытовых помещений), расположенных на территории строительного объекта «Многоквартирный жилой дом № 1, № 2 (в составе корпусов 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:5880 по адресу: г. Москва, п. Сосенское, дер. Николо-Хованское» (далее – Объект), а ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» - принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Общая стоимость работ (цена Договора) в соответствии с п.2.1 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.12.2018, Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) составляет 970 167,85 руб.

Пунктом 3.1 Договора в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.12.2018 предусмотрено, что Генподрядчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере 349 025,11 руб. 

Оплата выполненных работ в полном объеме производится в течение 14 рабочих дней с даты подписания актов КС-2 и КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета с учетом ранее выплаченного аванса (п.3.5 Договора).

Подрядчик обязался приступить к выполнению работ по Договору с даты перечисления Генподрядчиком авансового платежа, при этом общий срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с даты начала выполнения работ (п.1.4 Договора).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Из представленных истцом в материалы дела двусторонне подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ

по Договору № 265/П/2017 от 17.01.2017 - № БКИ-0226-01 от 26.02.2018 (187 734,48 руб.), 

по Договору № 027/П/2018 от 16.02.2018 - БКИ-0415-01 от 15.04.2018 (632 168,07 руб.), № БКИ-0430-01 от 30.04.2018 (1 989 058,34 руб.), № БКИ-0515-01 от 15.05.2018 (856 044,48 руб.), № БКИ-0615-01 от 15.06.2018 (823 926,16 руб.), № БКИ-0731-01 от 31.07.2018 (366 300,89 руб.), № БКИ-1015-01 от 15.10.2018 (592 402,06 руб.), № БКИ-1211-02 от 11.12.2018 (80 390,93 руб.),

  по Договору № 49/18(м) от 14.11.2018 – БКИ-1219-04 от 19.12.2018 (970 167,85 руб.)

следует, что истцом выполнены работы, предусмотренные указанными Договорами на сумму 187 734,48 руб., 5 259 900 руб., 970 167,85 руб. соответственно, а ответчиком приняты данные работы.

Однако оплата выполненных работ не была произведена ответчиком в полном объеме, в связи с чем истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 5 от 19.03.2019 с требованием погасить образовавшуюся по Договорам № 265/П/2017 от 17.01.2017, № 027/П/2018 от 16.02.2018, № 49/18(м) от 14.11.2018 задолженность в общей сумме 961 613,38 руб. в течение 5 рабочих дней с даты получения указанной претензии.

Требование истца не было исполнено ответчиком, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договоров, суд пришел к выводу о том, что работы истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных по Договорам работ в размере 48 080,67 руб.,

Пунктом 6.4, 14.1 Договоров № 265/П/2017 от 17.01.2017, № 49/18(м) от 14.11.2018 соответственно предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты выполненных работ ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» по письменному требованию ООО «БКИ ГРУПП» уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

Пунктом 8.9 Договора № 027/П/2018 от 16.02.2018 предусмотрено, что за нарушение сроков оплаты выполненных работ ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» по письменному требованию ООО «БКИ ГРУПП» уплачивает последнему неустойку в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно представленному истцом расчету неустойка, начисленная по Договору № 265/П/2017 от 17.01.2017 составила 514,73 руб., по Договору № 027/П/2018 от 16.02.2018 – 19 321,88 руб., по Договору № 49/18(м) от 14.11.2018 – 28 244,06 руб.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, признан составленным верно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, условиями Договора.

Считая факт наличия задолженности и просрочки установленным, суд удовлетворяет требования истца о взыскании с ответчика неустойки по Договорам № 265/П/2017 от 17.01.2017, № 027/П/2018 от 16.02.2018, № 49/18(м) от 14.11.2018 в заявленном размере.

Также Истцом заявлено требование о взыскании почтовых расходов в размере 540,01 руб.

Согласно ст.101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В соответствии со ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В подтверждение судебных расходов истцом представлены квитанции от 03.04.2019, 20.03.2019. 

Таким образом, рассматриваемые расходы относятся к судебным издержкам и подлежат по правилам распределения судебных расходов взысканию при удовлетворении иска с ответчика.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ  расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 12, 309, 310, 330, 702, 711, 746, 753 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 64-68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «СИНТЕРРА КОНСТРАКШН» в пользу ООО «БКИ ГРУПП» по договору № 265/П/2017 от 17.01.2017 задолженность в размере 10294,58 руб., неустойку в размере 514,73 руб.; по договору № 027/П/2018 от 16.02.2018 задолженность в размере 386437 руб. 69 коп., неустойку в размере 19321 руб. 88 коп.; по договору № 49/18(м) от 14.11.2018 задолженность в размере 564881 руб. 11 коп., неустойку в размере 28244 руб. 06 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 097 руб., почтовые расходы в размере 540,01 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

СУДЬЯ

П.С. Гутник