ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-145586/25-67-858

г. Москва

06 октября 2025 г.

Резолютивная часть решения оглашена 24 сентября 2025 года

Полный текст решения изготовлен 06 октября 2025 года

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕЛИЙМАШ" (Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.07.2002, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 585 227,82 руб.

при участии:

от истца: ФИО1 по дов-ти от 17.09.2024

от ответчика: ФИО2 по дов-ти от 09.01.2025

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕЛИЙМАШ" (далее – ответчик) о взыскании неустойки по контракту от 19 января 2023 г. № 2325187922071412208209651 в размере 585 227 руб. 82 коп.

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком своих обязательств по договору строительного подряда в установленные сроки.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований

Исследовав и оценив, имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (далее -Заказчик) и АО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» (далее - Поставщик) заключен государственный контракт от 19 января 2023 г. № 2325187922071412208209651 на изготовление и поставку установки газифицированной стационарной СГУ-7КМ-У (далее - товар) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2023 - 2025 годах (далее - Контракт).

В соответствии с пунктом 1.1.8 Контракта этап исполнения Контракта -часть обязательств Поставщика, в соответствии с подпунктом 3.2.2 Контракта, в отношении которой Контрактом установлена обязанность Заказчика обеспечить приёмку (с оформлением документа о приёмке) и оплату поставленного товара.

Согласно подпункту 3.2.2 пункта 3.2 Контракта и подпункту 4.2.1 пункта 4.2 Контракта (в редакции дополнительного соглашения от 3 декабря 2024 г. № 4 к Контракту) Поставщик обязан осуществить доставку товара Грузополучателю по этапу 2 (2024 год) стоимостью 18 174 776,98 руб. до 10 ноября 2024 г.

Однако 10 ноября 2024 г. нерабочий день (воскресенье).

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, т.е. 11 ноября 2024 г.

Пунктом 7.6 Контракта установлено, что датой поставки товара является дата подписания Грузополучателем акта приёма-передачи товара.

Товар поставлен с просрочкой на сумму 18 174 776,98 руб. этап 2 (2024 год), что подтверждает акт приёма-передачи товара № 1, этап 2, подписанный Грузополучателем 27 декабря 2024 г.

Просрочка исполнения обязательства за период с 12 ноября 2024 г. по 27 декабря 2024 г. составляет 46 дней.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом (обязательства по соответствующему отдельному этапу исполнения Контракта (этапу поставки товара), в том числе срока поставки товара Заказчик требует уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (от цены соответствующего отдельного этапа исполнения Контракта (этапа поставки товара), по которому допущена просрочка), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств предусмотренных Контрактом (предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта (этапом поставки товара), и фактически исполненных Поставщиком (пункт 11.2 Контракта).

Расчет неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту складывается из следующих показателей:

(цена    отдельного    этапа    исполнения     Контракта сумма, пропорциональная объему обязательств, предусмотренных отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных Поставщиком х 1/300 х размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее -ЦБ РФ) х количество дней просрочки.

Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату исполнения обязательств, на 27 декабря 2024 г. - 21 %.

Расчет неустойки составляет:

(18 174 776,98 руб. - 0) х 1/300 х 21 % х 46 дней (за период с 12 ноября 2024 г. по 27 декабря 2024 г.) = 585 227,82 руб.

Итого размер неустойки составляет 585 227,82 руб.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства сторон по договору должны исполняться надлежащим образом.

Исходя из положений ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, проверен судом, является правильным, не оспорен по существу ответчиком.

Доводы отзыва ответчика признаны судом необоснованными и не состоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела, представленным в дело доказательствам и неправильным применением норм материального права. 

Относительно довода ответчика о списании неустойки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783, которым утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (далее - Правила) суд отмечает следующее.

Согласно пункту 2 Правил установлено, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.

Согласно пункту 3 Правил списания предусматривает случаи и порядок списания, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта.

Сумма неустойки по настоящему делу действительно составляет менее 5 %, однако, обязательства по Контракту не исполнены в полном объеме, в настоящее время Контракт является действующим, пунктом 16.1 Контракта установлено, что Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2025 г.

Учитывая то, что в настоящее время обязательства по Контракту не исполнены в полном объеме, доводы Ответчика являются необоснованными.

Таким образом, оснований для списания неустойки не имеется.

Таким образом, требования истца о взыскании с ответчика неустойки по контракту от 19 января 2023 г. № 2325187922071412208209651 в размере 585 227 руб. 82 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии с ч. 3 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕЛИЙМАШ" (ИНН: 

<

***>) в пользу Министерства обороны Российской Федерации (ИНН: 

<

***>) неустойку по контракту от 19 января 2023 г. № 2325187922071412208209651 в размере 585 227 (пятьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать семь) руб. 82 коп.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГЕЛИЙМАШ" (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 10 278 (десять тысяч двести семьдесят восемь) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                          В.Г. Джиоев