Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«22» марта 2022 года

Дело №А12-36530/2021

Резолютивная часть оглашена 17 марта 2022 года 

Полный текст изготовлен 22 марта 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к муниципальному бюджетному учреждению г. Камышина «Служба капитального строительства и эксплуатации» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Представители сторон в судебное заседание не явились.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению г. Камышина «Служба капитального строительства и эксплуатации» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 0329200062219003971 от 30 сентября 2019 года в размере 3 494 500 рублей, неустойки за период с 20.11.2021 по 09.12.2021 в размере 17 472 руб. 50 коп., а также судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 40 560 рублей.

До принятия по делу решения, истец  в порядке ст. 49 АПК РФ поступило заявил об увеличении  исковых требований в части взыскания неустойки, окончательно просил взыскать с ответчика задолженность по муниципальному контракту № 0329200062219003971 от 30 сентября 2019 года в размере 3 494 500 рублей, неустойку за период с 20.11.2021 по 12.01.2022 в размере 49 971 руб. 35 коп., неустойку с 13.01.2022 начисленную на сумму задолженности до момента фактического исполнения обязательств, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 40 560 рублей.

Заявление об уточнении исковых требований принято судом к рассмотрению.

Исследовав материалы дела, суд

установил:

Между ООО «Стройинтерьер» (Подрядчик) и МБУ «СЛУЖБА КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ» (Заказчик) 30.09.2019 был заключен муниципальный контракт № 0329200062219003971 (далее Контракт), согласно которому Подрядчик принял на себя выполнение комплекса проектно-изыскательских работ для строительства объекта- «Городское кладбище» в г. Камышине Волгоградской области в соответствии с техническим заданием (Приложением №1), конкурсной документацией, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, СП. 

Согласно п. 1.2 Контракта Подрядчик обязался своевременно выполнить работы на условиях Контракта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

Срок выполнения работ (п. 3.1. Контракта) по  I этапу  в течение 30 дней послезаключения контракта, II этапу - до 20.12.2019 г.

Согласно п.11.6  контракт вступает в силу со дня подписания его сторонамии действует по 31 декабря 2019 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки,исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своихобязательств по контракту.

В связи с задержкой выдачи градостроительного плана для исполнения обязательств по контракту стороны пришли к соглашению о не взыскании неустойки с Подрядчика сроком до 31.03.2020, о чем заключили дополнительное соглашение №1 от 24 декабря 2019 г. к Контракту. В пункте  11.6 договора в редакции названного дополнительного соглашения стороны  указали, что Контракт действует по 30 июня 2020 года, а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Дополнительным соглашение № 2 от 15 февраля 2021 г. к Контракту, стороны пришли к соглашению о переносе срока исполнения контракта no I этапу и II этапу - до 30.09.2021 г. (п.3.1 Контракта) и не взыскании неустойки с Подрядчика сроком до 30.09.2021 г.

Истец выполнил свои обязательства по контракту в полном объеме, что подтверждается актами приемки выполненных работ и накладными. Претензий по качеству от Заказчика  не поступало, акты выполненных работ  и накладные на получение материалов  подписаны Заказчиком без возражений.

Общая сумма по контракту  (п. 2.1.) составила 3 494 500  руб. Согласно п. 2.4.3 Контракта, оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте не позднее 30 дней после подписания Заказчиком актов выполненных работ.

Заказчик оплату выполненных работ не произвел.

Задолженность  ответчика перед Истцом составляет 3 494 500  руб., что подтверждается актом приемки выполненных работ №120 от 20.10.2021 на сумму 2 712 264,49 руб., актом приемки выполненных работ № 116 от 20.10.2021 на сумму 782 235,51 руб.

Претензия о погашении долга была оставлена Ответчиком без ответа и соответствующей оплаты.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерацииодносторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п.7.9 Контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств,предусмотренных контрактом подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Неустойка за период с 20.11.2021 по 12.01.2022 составляет сумму в размере  49 971,35 руб.

Согласно пункту 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Доводы ответчика, положенные в основу отзыва на иск об отсутствии финансирования,  не могут быть приняты судом  в качестве оснований для отказа в иске.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  муниципального бюджетного учреждения г. Камышина «Служба капитального строительства и эксплуатации» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройинтерьер» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность  в размере  3 494 500 руб., неустойку в размере  49 971,35 руб. за период с 20.11.2021 по 12.01.2022, всего 3 544 471,35 руб., а также  неустойку, начисленную на сумму долга в размере 3 494 500 руб. за период с 13.01.2022 года до момента фактического погашения долга исходя из 1/300 ставки ключевой  ставки ЦБ РФ, действующей на  дату уплаты,  за каждый  день просрочки и государственную пошлину в размере  40 560 руб. 

Полный текст решения изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова