АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

 Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А82-14780/2019

г. Ярославль

18 марта 2020 года

Резолютивная часть решения оглашена  04 марта 2020 года.

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Шадриновой Л.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Давыдовой М.В., Котляром И.О.    

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью   "Прогресс-Н" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к муниципальному автономному учреждению города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о взыскании   784896.22  руб.

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>), Автономная некоммерческая организацию «Арена-2018» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)

при участии

от истца – ФИО2 представитель по доверенности от 07.10.2019,

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности от 27.02.2019

от третьих лиц – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Н" обратилось в суд с иском к Муниципальному автономному учреждению города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений" о взыскании с учетом уточнения  684 500 руб. 38 коп. неустойки.

В судебном заседании представитель истца уточненные требования поддерживает в полном объеме.

Представитель ответчика против иска возражает по основаниям, изложенным в отзыве, представил контррасчет.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил.

21.06.2017 между муниципальным автономным учреждением города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений"  /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Прогресс-Н" /Подрядчик/ заключен контракт № 585/50 от 21.06.2017 ( л.д. 8-23), согласно п. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.3.7, 6.3, 6.5, 6.6, 10.1, 10.2 которого Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по организации реконструкции согласно которому общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Н" (Подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работы по организации тренировочной площадки на стадионе «Шинник» 

<

...> в соответствии с условиями настоящего Контракта, сдать их результат Заказчику в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные Работы и оплатить их. Объем выполняемых Работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту), разделами проектной документации (Приложение № 3 к Контракту). Результатом выполненной Работы по Контракту является законченный реконструкцией Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии законченного реконструкцией Объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Цена настоящего Контракта определяется на основании сметной документации (Приложение №2 к Контракту) с учетом коэффициента снижения (рассчитывается как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта) К = 0,995 и составляет 92 975 048,70 рублей.

Сумма оплаты в 2017-2018 годах составляет 92 975 048,70 рублей, в том числе на 2017 год: 56 794 400,00 рублей, на 2018 год: 36 180 648,70  рублей. 

Расчеты между Сторонами производятся путем безналичных перечислений денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных Работ осуществляется в российских рублях в течение 30 календарных дней, после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на основании выставленного Подрядчиком оригинала счета на оплату и счета-фактуры, если Подрядчик является плательщиком НДС, в размере стоимости работ за вычетом 5% резерва. 

Денежные средства, удержанные Заказчиком как резерв (5% от общей стоимости выполненных работ по настоящему контракту) выплачиваются Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Акта приемки законченного реконструкцией Объекта. 

Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в сроки, определенные календарным графиком производства работ (Приложение № 4 к Контракту). 

Срок начала выполнения работ - с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2017 года; срок окончания выполнения работ - 15.04.2018 года (п. 3.2 контракта). 

Заказчик обязуется ежемесячно для подтверждения объемов и качества выполненных работ принимать от Подрядчика и подписывать в течение 5 (пяти) рабочих дней Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). В случае несогласия направлять Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменном виде. Одновременно принимать от Подрядчика для рассмотрения исполнительную документацию в объеме выполненных Работ, в том числе: исполнительные съемки, заключения испытаний выполненных Работ, а также паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы.

Ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца Подрядчик предъявляет Заказчику для подтверждения объемов и качества работ Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оригинал счета на оплату и счет-фактуру (если подрядчик является плательщиком НДС). Одновременно предоставлять Заказчику для рассмотрения исполнительную документацию в объеме выполненных Работ, в том числе: исполнительные  съемки, заключения  испытаний  выполненных  Работ,  а также  паспорта, сертификаты качества, протоколы испытаний на применяемые материалы, гарантийные талоны и другие документы. Копии документов, удостоверяющих качество выполненных Работ, должны быть заверены подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет объем и качество выполненных Подрядчиком Работ на соответствие их требованиям Технического задания (Приложение № I к Контракту), сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), разделам проектной документации (Приложение 3 к Контракту). Также Заказчик рассматривает представленные Подрядчиком исполнительную документацию в объеме выполненных Работ и другие документы, указанные в п. 6.3., п.6.9. настоящего Контракта. 

После проведения проверки Заказчиком объема и качества выполненных работ, Заказчик подписывает Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт приемки законченного реконструкцией Объекта и иные документы, предусмотренные действующим законодательством в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае не согласования предоставленной документации предоставляет мотивированный отказ от подписания. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком, 15.05.2018 между сторонами подписан акт приемки объекта капитального строительства.

Ссылаясь на просрочку оплаты выполненных работ, а также просрочку оплаты резерва в размере 5 % от стоимости выполненных работ, подрядчик направил заказчику претензию исх. № 428 от 27.11.2018.(л.д. 24).

Неисполнение ответчиком требований истца послужило поводом для обращения в  арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд считает заявленные требования подлежащими   частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 Гражданского кодекса РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

По расчету истца неустойка, начисленная за период с 28.08.2017 по 26.10.2018 за просрочку оплаты по актам № 1 от 25.07.20179, № 2 от 31.07.2017, № 3 от 15.09.2017, № 4 от 20.10.2017, № 5 от 23.11.2017, № 5/1 от 04.12.2017, № 6 от 11.12.2017, № 7 от 13.04.2018, № 8 от 29.05.2018, № 9 от 30.05.2018, а также за просрочку оплаты резерва в размере 5% от стоимости выполненных работ по указанным актам, с применением ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату частичного исполнения обязательства, составляет 684 500 руб. 38 коп.

Ответчик представил контррасчет неустойки составляет 543 860,13 руб.

В силу ст. 190 Гражданского кодекса РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

Согласно ст. 193 Гражданского кодекса РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока читается ближайший следующий за ним рабочий день.

В соответствии с условиями контракта к расчету неустойки применяется ставка рефинансирования Центрального банка РФ (ключевая ставка), действующая на дату уплаты пени.

При взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), а также Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017.

Наличие нарушения сроков оплаты подтверждается представленными в дело доказательствами, требование о взыскании неустойки судом признается обоснованным, однако по расчету суда размер неустойки составляет 677 262, 66 руб. (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Оснований для применения положений ст. 333 Гражданского кодекса РФ у суда не имеется.

Доводы ответчика судом не принимаются как несоответствующие материалам дела.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального автономного учреждения города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Прогресс-Н" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 677 262, 66 руб. неустойки, 16 513, 53 руб. госпошлины в возмещение расходов по уплате госпошлины. Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс-Н" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета 2 007,92 руб. госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 928 от 23.07.2019.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

Шадринова Л.А.