АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

г.Краснодар Дело № А32-29640/2019 16.01.2020 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А Баганиной, при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.В. Поляшевой, рассмотрев  в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (ИНН  2309071138) к обществу с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» (ИНН  2635130408) об обязании устранить недостатки проектно-сметной документации, о  взыскании штрафа и неустойки, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора ГАУ КК  "Краснодаркрайгосэкспертиза" , руководствуясь статьями 49, 65, 70, 101, 106, 110, 167- 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Удовлетворить ходатайство истца об уточнении исковых требований путем  указания начальной и конечной даты периода просрочки.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» (ИНН  2635130408) в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу  судебного акта устранить выявленные при прохождении государственной экспертизы  недостатки в проектно-сметной документации по объекту: «Газификация жилого массива  в границах улиц Лесопосадочная-Средняя-Окраинная» в г.Краснодаре, переделать  техническую документацию, произвести необходимые изыскательские работы;  согласовать готовую техническую документацию с владельцами и с эксплуатирующими  инженерные сети организациями, со всеми землепользователями, органами  государственного контроля; в течение 20 календарных дней со дня вступления в законную  силу судебного акта предоставить в адрес МКУ «Единая служба заказчика» на  утверждение откорректированные по результатам государственной экспертизы  инженерные изыскания и проектно-сметную документацию стадии «ПД»; оплатить  стоимость повторной государственной экспертизы и направить откорректированные  инженерные изыскания и проектно-сметную документацию на повторную  государственную экспертизу; выполнить экспертное сопровождение; при получении  замечаний государственной экспертизы в течение 10-ти рабочих дней за свой счет  устранить выявленные замечания; в течение 10 календарных дней с даты получения  положительного заключения государственной экспертизы передать МКУ «Единая служба  заказчика»: проектно-сметную документацию по объекту : «Газификация жилого массива  в границах улиц Лесопосадочная-Средняя-Окраинная в г.Краснодаре» - 8 экз. на  бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (в форматах AutoCAD, Adobe Reader;  сметная документация в формате «Гранд смета», XML и Excel), технический отчет по  

инженерным изысканиям – 3 экз. в печатном виде, 1 экз. в электронном виде (чертежи в  форматах pdf и dwq, текстовая часть в формате doc и pdf), сведения о материалах и  товарах применяемых при строительстве объекта - 2 экз. в бумажном виде, 1 экз. в  электронном виде (в формате Excel, XML), положительные заключения по результатам  государственной экспертизы проектной документации, результатам инженерных  изысканий и сметной документации.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» (ИНН  2635130408) в пользу муниципального казенного учреждения муниципального  образования город Краснодар «Единая служба заказчика» (ИНН 2309071138) 3358446,78  руб, в том числе 71 153 руб. 53 коп. штрафа и 3 287 293,25 руб. неустойки за  нарушение сроков устранения недостатков.  

В удовлетворении оставшейся части имущественных требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РосСтройПроект» (ИНН  2635130408) в доход федерального бюджета 33235,91 руб госпошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья С.А. Баганина