РЕШЕНИЕ

 

именем Российской Федерации

г.Москва 

20.08.2018                                                                        Дело № А40-114653/18-110-812 

Арбитражный суд города Москвы в составе

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску государственной корпорации по космической деятельности "РОСКОСМОС" (ОГРН 

<

***>, 129110, 

<

...>) к государственному унитарному предприятию "ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (ОГРН 

<

***>, 450065, 

<

...>)     

о взыскании 152 450,25 руб. пени за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам №1 и 2 государственного контракта от 05.12.2016 №189-Л786/16/296 (шифр: ОКР «Битум»),

УСТАНОВИЛ:

государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" обратился к государственному унитарному предприятию "ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"  о взыскании 152 450,25 руб. пени за нарушение сроков исполнения обязательств по этапам №1 и 2 государственного контракта от 05.12.2016 №189-Л786/16/296 (шифр: ОКР «Битум»).

Ответчик отзыв не представил, иск не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Между Госкорпорацией «Роскосмос» (далее - Заказчик, Истец) и ГУП ИНХП РБ (далее - Головной исполнитель, Ответчик) был заключен государственный контракт от 05.12.2016 № 189-Л786/16/296 (шифр: ОКР «Битум») (далее - государственный контракт), согласно которому Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта опытно-конструкторскую работу на тему: «Разработка технологии производства битумов нефтяных хрупких» (далееОКР)    и    своевременно    сдать    Заказчику    созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные государственным контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом (пункты 1.1 и 1.2 государственного контракта).

В соответствии с пунктом 3.5 государственного контракта оплата ОКР (этапа ОКР) производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки этапа ОКР путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Головного исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса.

Истцом обязательства по оплате этапов № 1 и 2 государственного контракта выполнены своевременно и в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания на ОКР (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов ОКР и сроки выполнения установлены в ведомости исполнения (приложение № 2 к государственному контракту).

В соответствии с ведомостью исполнения к государственному контракту срок выполнения работ по этапу № 1 - начало 05.12.2016 - окончание 25.04.2017, цена этапа № 1 - 5 340 000,00 рублей; по этапу № 2 - начало 20.12.2016 - окончание 25.11.2017, цена этапа № 2 - 3 090 000,00 рублей.

Пунктом 4.3. государственного контракта установлено, что датой исполнения обязательств Головного исполнителя по этапам государственного контракта является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки этапа ОКР.

В установленный срок обязательства по государственному контракту Головным исполнителем не выполнены:

акт сдачи-приемки этапа ОКР по этапу № 1 утвержден Заказчиком 22.05.2017;

акт сдачи-приемки этапа ОКР по этапу № 2 утвержден Заказчиком 12.12.2017.

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательств по этапу № 1 составляет 27 дней (с 26.04.2017 по 22.05.2017), по этапу № 2 -17 дней (с 26.11.2017 по 12.12.2017) в размере152 450,25  руб.

В связи с тем, что Ответчиком нарушены сроки исполнения обязательств, Истец в адрес Ответчика направил требование исх. от 29.12.2017 № АН-13261 об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.

Ответ требование не удовлетворил, однако, иск не оспорил,  доказательств отсутствия просрочки или вины не представил,  в связи с чем в силу  п. 3.1 ст. 70 АПК РФ   считает обстоятельства доказанными,  а иск –подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 101, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Взыскать с государственного унитарного предприятия "ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" в пользу государственной корпорации по космической деятельности "РОСКОСМОС" 152 450,25 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят рублей 25 копеек) руб. пени.

Взыскать с государственного унитарного предприятия "ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 574 (Пять тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек) руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:                                                                                             А.В.Мищенко