АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-9325/2020

27 октября 2020 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения оглашена 20 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2020 года.

 

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Луговика С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании безвозмездно устранить недостатки работ, о взыскании 1 077 853 руб. 97 коп.,

в судебном заседании приняли участие:

от истца - ФИО2 по доверенности от 10.09.2020 № Исх Дс/1444,

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 24.09.2020 № 3 сроком на 1 год, 

 

УСТАНОВИЛ:

департамент строительства Администрации города Омска обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» о взыскании 1 077 853 руб. 97 коп. штрафа за нарушение установленных муниципальным заказчиком сроков устранения обнаруженных им дефектов (недоделок) в выполненной работе и о понуждении безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 26.09.2014 № 38-2014/С на объекте «Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 13», расположенном по адресу: 644013, 

<

...>, а именно:

- во входных группах 1 -3 подъездов выполнить ремонтные и отделочные работы по восстановлению штукатурного слоя, устранению горизонтальных и вертикальных трещин в местах сопряжения панелей, а также устранению трещин и выбоин в стяжке пола.

Определением Арбитражного суда Омской области от 28.05.2020 по делу № А46-9325/2020 исковое заявление департамента строительства Администрации города Омска принято, возбуждено производство по делу, дело назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 07.07.2020 на 12 час. 10 мин.

Протокольным определением Арбитражного суда Омской области от 09.07.2020 по делу № А46-9325/2020 при отсутствии возражений сторон, суд завершил предварительное судебное заседание и перешёл к рассмотрению дела по существу, рассмотрение дела отложил на 24.08.2020 на 12 час. 25 мин.

Определением Арбитражного суда Омской области от 31.08.2020 по делу № А46-9325/2020 назначена судебная экспертиза, проведение экспертизы поручено эксперту/экспертам общества с ограниченной ответственностью «ОМЭКС» ФИО4, ФИО5, срок для представления заключения эксперта установлен до 18.09.2020, производство по делу № А46-9325/2020 приостановлено до получения заключения экспертизы.

Определением Арбитражного суда Омской области от 25.09.2020 по делу № А46-9325/2020 в связи с поступлением 17.09.2020 в материалы дела от общества с ограниченной ответственностью «ОМЭКС» заключения эксперта от 16.09.2020 № 431/20-РО вопрос о возобновлении производства по делу назначен к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 20.10.2020.

Протокольным определением Арбитражного суда Омской области от 20.10.2020 производство по делу № А46-9325/2020 возобновлено.

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые требования поддержал в полном объёме.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, поддержал доводы, изложенные в отзыве на иск.

В ходе рассмотрения дела судом приняты во внимание следующие обстоятельства.

26.09.2014 между департаментом строительства Администрации города Омска от имени муниципального образования городской округ город Омск Омской области (муниципальный заказчик) и общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» (генподрядчик) был заключён муниципальный контракт на выполнение подрядных работ № 38-2014/С (далее - контракт).

Объектом контракта является объект капитального строительства, многоквартирный жилой дом, строящийся в соответствии с Адресной инвестиционной программы города Омска на 2014 год и Адресной инвестиционной программы города Омска на плановый период 2016 и 2017 годов. «Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 13», строительство которого необходимо осуществить в соответствии с разрешением на строительство, градостроительным планом земельного участка, проектной документацией, в отношении которой поручено положительное заключение государственной экспертизы (далее - объект).

Распоряжением Департамента от 21.10.2015 № 358 и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 21.10.2015 № 55-ru55301000-1728-2015 подтверждается выполнение обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» работ, предусмотренных спорным контрактом, и сдача их результата истцу.

В разделе 6 контракта стороны согласовали гарантийные условия.

Гарантийный срок устранения генподрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования и материалов составляет 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пункт 6.2 контракта).

В силу пункта 6.3 контракта муниципальный заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на объект (в том числе эксплуатирующая организация), вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков в период гарантийного срока эксплуатации объекта, которые не позволят его нормальную эксплуатацию до их устранения. Муниципальный заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на объект (в том числе эксплуатирующая организация), составляет соответствующий акт, в котором указываются сроки устранения недостатков. В период гарантийного срока генподрядчик устраняет недостатки и проводит необходимый ремонт за свой счёт в соответствии с уведомлениями муниципального заказчика или иного лица, к которому перейдут права на объект (в том числе эксплуатирующей организации).

16.08.2019 комиссией в составе представителей сторон, эксплуатирующей организации и ОАО «Омский СоюзДорНИИ» произведён осмотр работ, выполненных по указанному контракту, по результатам которого составлен акт осмотра недостатков результатов строительно-монтажных работ в период гарантийной эксплуатации объекта, срок для устранения выявленных недостатков установлен до 22.09.2019.

По условиям пункта 7.4 контракта генподрядчик обязан по требованию муниципального заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять дефекты (недоделки), обнаруженные муниципальным заказчиком в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации объекта.

В случае нарушения установленных муниципальным заказчиком сроков устранения обнаруженных им дефектов (недоделок) в выполненной работе, генподрядчик уплачивает муниципальному заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа и пени - 0,5% цены контракта, что составляет 1 077 853 руб. 97 коп. (пункт 7.6 контракта).

25.11.2019 истец направил в адрес общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» претензию № Исх-ДС/1784 с требованием устранить недостатки, указанные в акте осмотра от 24.09.2019 в срок до 09.12.2019, а также выплатить штраф в размере 1 077 853 руб. 97 коп. в срок до 20.11.2019.

Поскольку претензия истца оставлена ответчиком без исполнения, департамент строительства Администрации города Омска обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд удовлетворяет заявленные требования в части по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 65 АПК РФ установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Статьёй 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В силу статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить для другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведённого самим заказчиком или привлечёнными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 755 ГК РФ при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 ГК РФ, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В силу положений пункта 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

Как указано в статье 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определёнными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1). Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (пункт 2).

В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Ответчик возражал относительно удовлетворения требований по доводам, изложенным в отзыве, а именно, общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» указало, что является добросовестным контрагентом, надлежащим образом выполняло свои обязательства по спорному муниципальному контракту и продолжает добросовестно выполнять гарантийные обязательства. Выявленные департаментом строительства Администрации города Омска недостатки относятся к нормальному износу объекта либо являются недостатками, относящимися к текущему ремонту, за что ответчик не может нести ответственность.

В целях проверки указанных доводов ответчика судом по ходатайству ответчика по настоящему делу была назначена судебная экспертиза, производство которой было поручено эксперту/экспертам общества с ограниченной ответственностью «ОМЭКС» ФИО4, ФИО5, о чём вынесено соответствующее определение арбитражного суда Омской области от 31.08.2020. по делу № А46-9325/2020.

Как следует из поступившего 17.09.2020 от общества с ограниченной ответственностью «ОМЭКС» поступило заключение эксперта от 16.09.2020 № 431/20-РО, эксперт пришёл к следующим выводам.

По поставленному вопросу № 1: Являются ли причиной возникновения недостатков, а именно: нарушение штукатурного слоя, горизонтальные и вертикальные трещины в местах сопряжения панелей, а также трещины и выбоины в стяжке пола во входных группах 1-3 подъездов многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...>, некачественное выполнение работ по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 26.09.2014 №38-2014/С (в том числе применение некачественных материалов), либо нормальный износ и неправильная эксплуатация?

Ответ: По результату произведенного визуального и инструментального осмотра 13.08.2020 года недостатков, а именно: нарушение штукатурного слоя, горизонтальные и вертикальные трещины в местах сопряжения панелей, а также трещины и выбоины в стяжке пола во входных группах 1-3 подъездов многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...>, эксперт пришел к выводу, что причины для каждого недостатка различные, более подробно описаны причины возникновения имеющихся недостатков в Таблице 3.

Таблица 3 Описание причин возникновения недостатков

№ п/п

Наименование элемента

Использованные материалы (вид

отделки), характеристики

Состояние на момент осмотра

Причины образования выявленных недостатков

Входная группа 1-го подъезда

1

Поверхность стен

Ошпатлеваны, окрашены

1.  Образование вертикальных и горизонтальных трещин шириной

раскрытия до 2 мм;

2.  отслоение краски кусками со

шпатлевкой

1. естественная усадка дома

(нормальный износ).

2. некачественное выполнение

работ ввиду нарушения

технологии работ

Входная группа 2-го подъезда

2

Поверхность стен

Ошпатлеваны, окрашены

1.  Образование вертикальных и горизонтальных трещин шириной

раскрытия до 2 мм;

2.  отслоение краски кусками со

шпатлевкой

1. естественная усадка дома

(нормальный износ).

2. некачественное выполнение

работ ввиду нарушения

технологии работ

Входная группа 3-го подъезда

3

Поверхность стен

Ошпатлеваны, окрашены

Образование вертикальных и

горизонтальных трещин шириной

раскрытия до 2 мм

естественная усадка дома (нормальный износ).

По поставленному вопросу №2: Какова стоимость устранения недостатков, возникших в результате некачественного выполнения работ (применения некачественных материалов) если таковые имеются?

Ответ: Стоимость устранения недостатков, возникших в результате некачественного выполнения работ (применения некачественных материалов) по работы по восстановлению шпатлевочно-окрасочного слоя поверхности стен 1 и 2 входных групп, составляет 12 602 руб. 24 коп.

В силу части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются заключения экспертов.

Заключение эксперта оценено судом в соответствии со ст. 86 АПК РФ наряду с другими доказательствами по делу. Доказательств, опровергающих выводы эксперта, стороны в материалы дела не представили. Оснований для оценки экспертного заключения как недопустимого доказательства судом не установлено.

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признаётся арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нём сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

По смыслу разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в АПК РФ, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности заключения эксперта ФИО5, судом не установлено.

Противоречий выводов эксперта иным имеющимся в деле доказательствам судом не усмотрено. Выбор способов и методов исследования входит в компетенцию эксперта. Последним описана методика проведённого исследования, указаны используемые справочно-нормативные и научно-технические документы, обосновано их применение.

Относимых и допустимых доказательств, опровергающих выводы эксперта, в материалы дела не представлено.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учётом требований статьи 71 АПК РФ, установив, что наличие недостатков в выполненных обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» работах зафиксировано комиссией в составе представителей сторон и эксплуатирующей организации и организации, осуществляющей строительный контроль, а также отражено в заключении эксперта, суд приходит к выводу, что ответчик обязан устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ от 26.09.2014 № 38-2014/С, в части выполнения ремонтных работ по устранению просадки асфальтового покрытия по периметру многоквартирного дома путём восстановления асфальтового покрытия.

Иные выявленные истцом недостатки обусловлены либо естественной усадкой дома (нормальный износ), либо неправильной его эксплуатацией, что в силу пункта 2 статьи 755 исключает ответственность подрядчика.

Ответчик, полагая несоразмерным размер штрафных санкций, установленных контрактом, последствиям нарушения, заявил о применении статьи 333 ГК РФ.

Исполнение обязательств, в силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ, может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно пункту 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ» основанием для снижения в порядке статьи 333 ГК РФ предъявленной к взысканию неустойки может быть только её явная несоразмерность последствиям нарушения обязательства.

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательства и др.

Как разъяснено в пункте 73 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжёлого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки.

Правила о снижении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ применяются также в случаях, когда неустойка определена законом (пункт 78 приводимого постановления).

В силу пункта 75 цитируемого постановления высшей судебной инстанции при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 № 263-О указывается, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной её несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

В соответствии со статьёй 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации именно законодатель устанавливает основания и пределы необходимых ограничений прав и свобод гражданина в целях защиты прав и законных интересов других лиц. Это касается и свободы договора при определении на основе федерального закона таких его условий, как размеры неустойки - они должны быть соразмерны указанным в этой конституционной норме целям.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае её чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 ГК РФ речь идёт не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причинённого в результате конкретного правонарушения.

Возложив решение вопроса об уменьшении размера неустойки при её явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства на суды, законодатель исходил из конституционных прерогатив правосудия, которое по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года).

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле материалов и конкретных обстоятельств дела.

Как указывалось выше, в рассматриваемом случае размер штрафа определён сторонами в пункте 7.6 контракта, отсылающем к Правилам № 1063, действовавшим на момент подписания контракта.

Впоследствии аналогичная норма была закреплена и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063».

Вместе с тем, указанная сумма штрафа значительно превышает фактическую стоимость устранения недостатков.

Суд, принимая во внимание изложенное, пришёл к выводу о наличии оснований для уменьшения штрафа, взыскав таковой в размере 12 602 руб. 24 коп., что, по мнению суда, установит баланс интересов сторон.

В связи с изложенным суд удовлетворяет ходатайство общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» и уменьшает размер штрафа до 12 602 руб. 24 коп. с учётом обстоятельств настоящего спора, в целях соблюдения баланса интересов сторон.

По правилам части 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворён частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых исковых требований.

Истцом заявлены два самостоятельных требования, носящих имущественный и неимущественный характер. Оба удовлетворены частично.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине» при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета её уменьшения.

Что касается неимущественного требования, в этом случае принцип пропорционального распределения расходов не применим (пункты 20, 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

При изложенных обстоятельствах расходы по уплате государственной пошлины, а также на проведение экспертизы (поскольку она установила отступления от контракта) подлежат отнесению на общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» в полном объёме.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Понудить общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 26.09.2014 № 38-2014/С на объекте «Строительство многоквартирных домов в районе ул. Завертяева для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 13», расположенном по адресу: 644013, 

<

...>, а именно:

- во входных группах 1-2 подъездов выполнить работы по устранению отслоения краски кусками со шпатлевкой

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 12 602 руб. 24 коп. штрафа.

В удовлетворении оставшейся части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление - 2 Стройбетон «Космическое» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 29 779 руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Омской области.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Омской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья                                                                                                         С.В. Луговик