ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-19501/2022

12 мая 2023 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     03 мая 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме  12 мая 2023 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе   

председательствующего Мельниковой Н.А.,  судей Пономаревой О.С., Савиной Е.В.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

при участии:  

от истца (заявителя): ФИО2 – дов от 21.01.23

от ответчика (должника): ФИО3 – дов от 17.02.23

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-8797/2023) общества с ограниченной ответственностью «Фортуна» на решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2023 по делу № А56-19501/2022, принятое

по иску общества с ограниченной ответственностью «Фортуна»

к  обществу с ограниченной ответственностью «Принцип Ново»

3-и лица: 1) местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна; 

2) Федеральное бюджетное учреждение Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации; 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Дортехнологии»

о взыскании 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Принцип Ново» (далее - ответчик) о взыскании 1 017 142 руб. задолженности по договору подряда от 24.09.2021 № 24/9. 

Решением суда от 26.01.2023 в иске отказано. 

К участию в деле в качестве 3-х лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна (далее - Администрация), общество с ограниченной ответственностью «Дортехнологии» (далее – ООО «Дортехнологии»).

Не согласившись с вынесенным решением, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства возникновения неблагоприятных последствий по вине исполнителя по договору. Кроме того, истец ссылается на то, что дефекты являются устранимыми.

В судебном заседании истец доводы апелляционной жалобы поддержал, ответчик против удовлетворения жалобы возражал.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор подряда от 24.09.20221 № 24/9 в редакции дополнительных соглашений на проведение дополнительных работ, в соответствии с которым исполнитель обязуется в установленный срок выполнить дорожные работы по адресу: Санкт-Петербург, ул. Летчика ФИО4, д. 5, а заказчик обязуется обеспечить оплату по договору. 

Истец передал на подписание заказчику акты выполненных работ с протоколами испытаний от 05.11.2021 № 05.1-11-2021, от 22.11.2021 № 465.

Договор заключен во исполнение муниципального контракта № 0172300007821000017-МК. Заказчиком работ является местная администрация по муниципальному контракту от №0172300007821000017-МК, ООО «Принцип Ново» (подрядчик по муниципальному контракту) выполняло работы с привлечением ООО «Фортуна» (субподрядчика).

В ходе приемки работ по муниципальному контракту Администрация обратилась к ООО «Дортехнологии», осуществляющей технический надзор, которое выполнило отбор проб и лабораторные испытания асфальтобетона. По результатам испытаний СПБ ГКУ «ЦБК» оформлен протокол от 22.11.2021 № 465, согласно которому толщина нижнего слоя асфальтобетона не соответствует ТЗ, отобранные пробы (проба № 260) не соответствуют требованиям ГОСТа 9128-2009. 

Заказчиком обнаружены недостатки, в связи с чем в приемке работ отказано.

Вместе с тем, ссылаясь на то, что с учетом ранее выплаченного аванса задолженность ответчика перед истцом составила 1 017 142 руб. (по основному договору – 720 342 руб. и по дополнительным соглашениям – 296 800 руб.), истец направил в адрес ответчика претензию с требованием об оплате задолженности, неудовлетворение которой явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, правомерно руководствовался следующим.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

Поскольку между сторонами возник спор относительно качества и стоимости выполненных работ, по делу назначена судебная экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО «Эксперт центр».

Согласно заключению эксперта от 08.12.2022 № А56-19501/2022-Э стоимость надлежаще выполненных работ – 1 333 390 руб.

Полученное экспертное заключение соответствует требованиям статей 82, 83 и 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При проведении экспертизы по настоящему делу эксперт руководствовался соответствующими нормативными документами, справочной и методической литературой, его профессиональная подготовка и квалификация подтверждена приложенными к заключению документами об образовании. Ответы эксперта на поставленные судом вопросы понятны, непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены фактическими данными, эксперт в судебном заседании ответил на дополнительные вопросы сторон и суда, связанные с проведенным им исследованием.

Нарушений законодательства о судебно-экспертной деятельности при проведении экспертизы не установлено, экспертиза проведена лицом, обладающим специальными познаниями для разрешения поставленных перед ним вопросов, экспертному исследованию подвергнут необходимый и достаточный материал. Проведенные исследования, ход которых подробно указан в исследовательской части заключения, и методы, использованные при экспертных исследованиях, а также сделанные на их основе выводы научно обоснованы.

Несогласие с выводами эксперта само по себе о необъективности результатов не свидетельствует.

Доводы истца о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства возникновения неблагоприятных последствий по вине исполнителя по договору, подлежат отклонению в силу следующего.

В силу части 1 статьи 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в части 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (часть 2 статьи 716 ГК РФ).

Следовательно, истец, являясь профессиональным участником в сфере строительства, должен был выявить недостатки переданной сметной документации в части отсутствия санации трещин, с учетом обязательных строительных норм и правил, и своевременно сообщить об этом заказчику, чего подрядчиком не сделано.

При этом, ссылаясь на отсутствие своей вины в образовании дефектов, истец не представил соответствующих доказательств, однозначно свидетельствующие о том, что выявленные дефекты возникли по вине заказчика.

Ссылки подателя жалобы на то, что выявленные дефекты являются устранимыми, подлежат отклонению, поскольку при наличии таких недостатков пункт 1 статьи 723 ГК РФ предоставляет право заказчику по выбору потребовать от подрядчика, в том числе и соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

Учитывая изложенное, руководствуясь выводами эксперта по качеству работ и стоимости надлежащих работ, суд первой инстанции принял обоснованное решение об отказе в иске, поскольку стоимость выполненных работ покрыта авансом.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права судом первой инстанции не допущено, в связи с чем оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 26.01.2023  по делу №  А56-19501/2022  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

Н.А. Мельникова

Судьи

 

О.С. Пономарева

 Е.В. Савина