РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-273162/22-110-2066

г. Москва

03 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения от 16 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 03 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства экономического развития Российской Федерации (123112, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1027700575385) к обществу с ограниченной ответственностью "РУНЕТСОФТ" (193091, ГОРОД САНКТПЕТЕРБУРГ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 10, КОРПУС 1СТР1, ПОМЕЩЕНИЕ 9-Н, ОГРН: 1107847109831) о взыскании 350 288,69 руб. пеней по государственному контракту от 20.11.2019 №0173100008619000060, 

 

УСТАНОВИЛ:

Министерство экономического развития Российской Федерации обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РУНЕТСОФТ" о взыскании 350 288,69 руб. пени по государственному контракту от 20.11.2019 №0173100008619000060.

Определением суда от 23 декабря 2022 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

16 марта 2023 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Истец, Министерство) и обществом с ограниченной ответственностью «РуНетСофт» (далее - Ответчик, Исполнитель) на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 29 октября 2019 г. № 0173100008619000060-4 заключен государственный контракт от 20 ноября 2019 г. № 0173100008619000060 на выполнение работ, оказание услуг в интересах Министерства экономического развития Российской Федерации в 2019 году в рамках основного мероприятия «Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти» подпрограммы «Информационное государство» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» по теме: «Выполнение работ по настройке, оптимизации и оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления» (далее соответственно - Работы, Услуги, Контракт, АИС «Мониторинг Госсайтов»).

В соответствии с разделом 2 Контракта Исполнителю надлежало обеспечить выполнение Работ с даты заключения Контракта по 2 декабря 2019 г. включительно, оказание Услуг с даты заключения Контракта по 10 декабря 2019 г. включительно.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ, оказания Услуг Исполнитель передает Государственному заказчику уведомление о готовности сдать выполненные Работы, оказанные Услуги и отчетные документы в соответствии с разделами 7 и 8 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) (далее - Техническое задания). Одновременно с уведомлением о готовности сдать выполненные Работы Исполнитель предоставляет обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренное разделом 11 Контракта. Датой представления Исполнителем уведомления о готовности сдать выполненные Работы, оказанные Услуги Государственному заказчику считается дата регистрации уведомления в системе электронного документооборота Государственного заказчика.

Письмом от 16 декабря 2019 г. № 163668 Исполнитель уведомил Заказчика о готовности сдать оказанные услуги по Контракту и направил отчетные документы (Копия письма прилагается).

В ходе приемки оказанных Услуг 20 декабря 2019 г. была проведена экспертиза состава и содержания оказанных исполнителем услуг в части их соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленные Исполнителем результаты оказания услуг не соответствуют условиям, указанным в разделах 6 и 7 Технического задания. Исполнителю был предоставлен срок устранения выявленных несоответствий и недостатков в течение 5 календарных дней (Заключение приемочной комиссии от 20 декабря 2019 г. № ЗПК-375/Д21 по приемке выполненных Работ и оказанных Услуг прилагается).

Письмом от 27 декабря 2019 г. № 0173100008619000060/29 Исполнитель представил Минэкономразвития России уведомление о готовности повторно сдать результаты оказанных Услуг (копия письма прилагается).

В ходе повторной приемки оказанных Услуг была проведена экспертиза состава и содержания оказанных исполнителем услуг в части их соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленные Исполнителем результаты оказания услуг не соответствуют условиям, указанным в разделах 6 и 7 Технического задания.

Исполнителю был предоставлен срок устранения выявленных несоответствий и недостатков в течение 5 календарных дней (Заключение приемочной комиссии от 13 января 2020 г. № 4/Д21 по приемке выполненных Работ и оказанных Услуг прилагается).

Письмом от 8 мая 2020 г. № 0173100008619000060/54 Исполнитель уведомил Минэкономразвития России о готовности сдать в полном объеме результаты оказанных услуг, определенные условиями Контракта, расчетом стоимости Услуг и Техническим заданием (Копия письма прилагается).

В ходе приемки оказанных услуг приемочной комиссией проведена экспертиза состава и содержания оказанных Исполнителем услуг в части соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленные Исполнителем результаты оказания Услуг не полностью соответствуют условиям, указанным в разделах 6 и 8 Технического задания.

Исполнителю был предоставлен срок устранения выявленных несоответствий и недостатков в течение 5 календарных дней (Заключение приемочной комиссии от 13 мая 2020 г. № ЗПК-58/Д31 по приемке выполненных Работ и оказанных Услуг прилагается).

Письмом от 27 мая 2020 г. № 0173100008619000060/58 Исполнитель уведомил Минэкономразвития России о готовности сдать в полном объеме результаты оказанных услуг, определенные условиями Контракта, расчетом стоимости Услуг и Техническим заданием (копия письма прилагается).

В ходе приемки оказанных услуг приемочной комиссией проведена экспертиза состава и содержания оказанных Исполнителем услуг в части их соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленные Исполнителем результаты оказания Услуг в целом соответствуют условиям, указанным в разделах 6 и 8 Технического задания. Обязательства Исполнителя по Контракту в части оказания Услуг выполнены в полном объеме, но в ненадлежащий срок.

В соответствии с согласованным с ответчиком заключением Комиссии от 11 июня 2020 г. № ЗПК-73/Д21 было принято решение принять оказанные услуги, взыскать с Исполнителя пеню за ненадлежащее исполнение и просрочку обязательств, предусмотренных Контрактом (Копия заключения прилагается).

11 июня 2020 г. Стороны согласовали акт приемки оказанных услуг по Контракту 20 ноября 2019 г. № 0173100008619000060 от 11 июня 2020 г. № АП-86/Д21 (далее - Акт оказанных Услуг), в котором установлены факты просрочки исполнения обязательств со стороны Исполнителя (Копия акта прилагается).

Письмом от 5 декабря 2019 г. № 158257 Исполнитель представил в Минэкономразвития уведомление о готовности сдать выполненные работы по Контракту (Копия письма прилагается).

В ходе приемки выполненных работ приемочной комиссией проведена экспертиза состава и содержания выполненных Исполнителем работ в части их соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленные Исполнителем результаты Работ не соответствуют условиям, указанным в разделе 5 Технического задания. Исполнителю был предоставлен срок устранения выявленных нарушений в течение 5 календарных дней (заключение приемочной комиссии от 20 декабря 2019 г. № ЗПК-376/Д21 по приемке выполненных Работ и оказанных Услуг прилагается).

Письмом от 23 апреля 2020 г. № 0173100008619000060/53 Исполнитель представил в Минэкономразвития уведомление о готовности повторно сдать выполненные работы по Контракту (Копия письма прилагается).

В ходе приемки выполненных работ приемочной комиссией проведена экспертиза состава и содержания выполненных Исполнителем работ в части их соответствия условиям Контракта. При проведении экспертизы установлено, что представленный Исполнителем объем выполненных работ и их качество в целом соответствуют условиям, указанным в разделах 5 и 8 Технического задания. Обязательства Исполнителя по Контракту в части выполнения Работ выполнены в полном объеме, но в ненадлежащий срок.

В соответствии с согласованным с ответчиком заключением Комиссии от 13 мая 2020 г. № ЗПК-57/Д31 было принято решение принять выполненные работы, взыскать с Исполнителя пеню за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (копия заключения прилагается).

18 мая 2020 г. Стороны согласовали акт приемки выполненных работ по Контракту 20 ноября 2019 г. № 0173100008619000060 от 18 июня 2020 г. № АП-66/Д21 (далее - Акт выполненных Работ), в котором установлены факты просрочки исполнения обязательств со стороны Исполнителя (копия акта прилагается).

В соответствии с пунктом 6.3 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

В соответствии с пунктом 6.2. и 6.3. Контракта в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, со стороны Исполнителя, Заказчиком направляется Исполнителю требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Минэкономразвития России направило Ответчику Требование об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом от 28 октября 2022 г. № 41167-ВД/Д31и (копия требования прилагается).

На дату составления искового заявления ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации составляет 7,5 %.

Цена контракта: 7 851 000 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек НДС не облагается на основании статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость выполнения Работ: 2 714 327 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 14 копеек;

Период просрочки: 3 декабря 2019 года - 18 мая 2020 года;

Количество дней просрочки: 168 дней.

Стоимость оказания Услуг: 5 136 672 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 86 копеек;

Период просрочки: 11 декабря 2019 г. - 11 июня 2020 г.; Количество дней просрочки: 184 дня.

Одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации: 7,5/300 = 0,025%.

С учетом количества дней просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом:

За выполнение Работ: 0,025%*168 = 4,2%;

За оказание Услуг: 0,025%*184 = 4,6%;

Размер пени, подлежащей уплате Исполнителем:

За выполнение Работ: 2 714 327,14/100*4,2% = 114 001 (Сто четырнадцать тысяч один) рубль 74 копейки.

За оказание Услуг: 5 136 672,86/100*4,6% = 236 286 (Двести тридцать шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 95 копеек.

Итого размер пени, подлежащей уплате Исполнителем за выполнение Работ и оказание Услуг: 114 001,74 + 236 286,95 = 350 288 (Триста пятьдесят тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 69 копеек.

Вместе с тем,  согласно пункту 6.2. Контракта в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), в том числе неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 5.1.2 Контракта, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Ответчик представил контррасчет,  который принимается судом,  а именно:.

Контрактом установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем (Пункт 6.3 Контракта).

Неустойка за выполнение работ.

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

2 714 327,14

03.12.2019

Новая задолженность на 2 714 327,14 руб.

2 714 327,14

03.12.2019

15.12.2019

13

6.5

2 714 327,14 ? 13 ? 1/300 ? 6.5%

7 645,35 р.

2 714 327,14

16.12.2019

09.02.2020

56

6.25

2 714 327,14 ? 56 ? 1/300 ? 6.25%

31 667,15 р.

2 714 327,14

10.02.2020

26.04.2020

77

6

2 714 327,14 ? 77 ? 1/300 ? 6%

41 800,64 р.

2 714 327,14

27.04.2020

18.05.2020

22

5.5

2 714 327,14 ? 22 ? 1/300 ? 5.5%

10 947,79 р.

Сумма основного долга: 2 714 327,14 руб.

Сумма неустойки: 92 060,93 руб.

Неустойка за оказание услуг:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

с

по

дней

5 136 672,86

11.12.2019

Новая задолженность на 5 136 672,86 руб.

5 136 672,86

11.12.2019

15.12.2019

5

6.5

5 136 672,86 ? 5 ? 1/300 ? 6.5%

5 564,73 р.

5 136 672,86

16.12.2019

09.02.2020

56

6.25

5 136 672,86 ? 56 ? 1/300 ? 6.25%

59 927,85 р.

5 136 672,86

10.02.2020

26.04.2020

77

6

5 136 672,86 ? 77 ? 1/300 ? 6%

79 104,76 р.

5 136 672,86

27.04.2020

11.06.2020

46

5.5

5 136 672,86 ? 46 ? 1/300 ? 5.5%

43 319,27 р.

Сумма основного долга: 5 136 672,86 руб.

Сумма неустойки: 187 916,61 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

При  этом суд считает довод ответчика о несоблюдении претензионного порядка несостоятельным,  поскольку он противоречит представленным доказательствам

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170-171, 226-229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУНЕТСОФТ" (ОГРН: 1107847109831) в пользу Министерства экономического развития Российской Федерации (ОГРН: 1027700575385) 187 916 руб. 61 коп. пени.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РУНЕТСОФТ" (ОГРН: 1107847109831) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 5 368 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты его принятия, а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

А.В. Мищенко