АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

               634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Дело № А67-9757/18

г. Томск

03 декабря 2018 года

27 ноября 2018 года - оглашена резолютивная часть решения

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Гребенникова Д.А. 

при проведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Алекс М» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский ЛПК» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 12 882 319,19 руб.,

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 паспорт, директор, сведения из ЕГРЮЛ, Гвоздик Ж.Н. по дов. от 30.10.2018,

от ответчика – не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Алекс М» (далее – ООО «Строительная Компания Алекс М») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский ЛПК» (далее – ООО «Сибирский ЛПК») о взыскании 548 133,08 руб., из которых:

- по договору подряда № 07/01- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 60000 рублей, пени в размере 60 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.;

- по договору подряда № 07/02- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 100000 рублей;

- по договору подряда № 07/03- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 60000 рублей, пени размере 60 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.; 

- по договору подряда № 07/04- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 35935,42 рублей, пени в размере 6 792,66 рублей за период с 15.02.2018 г. по 22.08.2018 г.;

- по договору подряда № 07/05- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 60000 рублей, пени в размере 60 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.;

- по договору подряда № 07/06- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 60000 рублей, пени в размере 60 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.;

- по договору подряда № 07/08- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 60000 рублей, пени в размере 60 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.;

- по договору подряда № 07/09- СЛПК от 09.11.2017 г. сумма долга в размере 105000 рублей, пени в размере 105 рублей за период с 15.02.2018 г. по 16.02.2018 г.

В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что ответчиком обязательства по оплате выполненных работ по договорам подряда № 07/01- СЛПК от 09.11.2017, 07/02- СЛПК от 09.11.2017,  07/03- СЛПК от 09.11.2017, 07/04- СЛПК от 09.11.2017,  07/05- СЛПК от 09.11.2017, 07/06- СЛПК от 09.11.2017, 07/07- СЛПК от 09.11.2017,  07/08- СЛПК от 09.11.2017, 07/09- СЛПК от 09.11.2017  исполнены ненадлежащим образом, задолженность , с учетом пени составляет 548 133,08 руб. (л.д. 5-10 т.1).

Определением суда от 28.09.2018 исковое заявление принято производству.

В ходе рассмотрения дела от истца в материалы дела поступило заявление об увеличении размера исковых требований, в соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Алекс М» просит взыскать с ООО «Сибирский ЛПК»  сумму задолженности по договорам подряда в размере 12 882 321,53 рублей, включая сумму основного долга в размере  10 240 317,32 рублей, сумму пени в размере 2 642 004,21 рублей за период просрочки с 15.02.2018 г. по 30.10.2018 г., а именно: 

1) по договору №07/01-СЛПК от 09.11.2017 г.  сумму основного долга 1 182 360,00 рублей, в том числе НДС 18%, сумму  пени в размере 305 048,88 рублей, 

2)  по договору №07/02-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере        2 780 104,99 рублей, сумму пени в размере 717 267,09 рублей,

3) по договору №07/03-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере         2 532 374,40 рублей, сумму пени в размере  653352,60 рублей,

4) по договору №07/04-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере         35 935,42 рублей, сумму пени в размере  9271,34 рублей,

5)  по договору №07/05-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере  542 102,67 рублей, сумму пени в размере 139 862,49 рублей,

6) по договору №07/06-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере         484 588,33 рублей, сумму пени в размере 125 023,80 рублей.

7) по договору №07/08-СЛПК от 09.11.2017 г. сумму основного долга в размере         342 534,18 рублей, сумму пени в размере 88 376,14 рублей,

8)  по договору №07/09-СЛПК от 09.11.2017 г.  сумму основного долга в размере           2 340 317,33 рублей, сумму пени в размере 603 801,87 рублей. 

Увеличение требований принято определение суда от 30.10.2018 года.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил, извещен надлежащим образом.

Суд в соответствии со ст. 156 АПК РФ провел судебное разбирательство без участия представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал по основаниям, указанным в иске, уточнил размер заявленных требований в части взыскания пени до 2 642 001,87 руб. уменьшение требований принято протокольным определением от 27.11.2018.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, заслушав представителя истца, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Строительная компания «Алекс М» (заказчик) и ООО «Сибирский ЛПК» были заключены следующие договоры подряда:

- №07/01-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить работы «Устройство полов. Сушильные камеры» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: сушильные камеры №4,5, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-05 к договору и составила 1 182 360,00 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 32-38,т.1)

- №07/02-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить «Устройство полов. Цех лесопиления.» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: цех лесопиления, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-04 к договору и составила 2 780 104,99 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 44-55,т.1)

- №07/03-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить: «Устройство полов. Цех шпона.» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: цех шпона, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-06 к договору и составила 2 532 374,40 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 65-72,т.1)

- №07/04-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить: «Устройство фундаментов. АБК» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: административно-бытового корпуса, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-09 к договору и составила 187 017,46 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 79-88,т.1)

- №07/05-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить: «Устройство ростверка и приямков под оборудование. Цех шпона» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: цех шпона, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-07 к договору и составила 542 102,67 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 95-104,т.1)

- №07/06-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить: «Устройство фундаментов. ТМК» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: масленая котельная, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-08 к договору и составила 484 588,33 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 110-119,т.1)

- №07/07-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить: «Устройство железо-бетонных фундаментов. Цех лесопиления» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: цеха лесопиления., с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-01 к договору и составила 587 656,96 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 126-136,т.1)

- №07/08-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить «Устройство железо-бетонных фундаментов. Цех шпона.» на строительном объекте Заказчика по адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: цех шпона, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-03 к договору и составила 342 534,18 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 145-150,т.1, 1-5, т.2 )

- №07/09-СЛПК от 09.11.2017 г.  в соответствии  с условиями которого, подрядчик обязался по поручению заказчика, выполнить : «Устройство железо-бетонных фундаментов. Сушильные камеры» на строительном объекте Заказчика п адресу: Новосибирская обл., Северный район, Сибирский ЛПК: сушильных камер №4,5, с надлежащим качеством и в оговоренные срок по цене и в объеме, указанных в прилагаемом локальном сметном расчете, а заказчик обязался принять выполненную работу и оплатить ее на условиях, предусмотренных договором (п.п. 1.1-1.2 договора). Стоимость работ была согласована в локальном сметном расчете №02-02 к договору и составила 2 340 317,33 рублей, в том числе НДС (п. 2.1. договора).  Срок выполнения работ- 60 календарных дней, но не позднее 31.01.2018.(п. 3.2. договора). Порядок оплаты выполненных работ установлен п.п. 2.5-2.6 договора, согласно которым заказчик выплачивает подрядчику аванс 40% от цены договора на основании выставленного счета подрядчиком в течение 10 календарных дней. Оплата стоимости выполненных работ осуществляется заказчиком на основании письменного обращения подрядчика в течение 14-ти календарных дней. За нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ подрядчик, в соответствии с пунктом 10.4 договора вправе требовать уплату пени из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости выполненных, но не оплаченных работ. (л.д. 13-23, т.2 )

Во исполнение указанных  договоров  ООО «Строительная Компания Алекс М» выполнило работы на  общую сумму 10 979 056,28 руб., из них:

По договору №07/01-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 1 182 360 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №5 от 31.01.2018 (л.д. 42, т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №17 от 31.01.2018 (л.д. 43 т. 1,);

По договору №07/02-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 2 780 104,99 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №4 от 31.01.2018 (л.д. 56,58-64 т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №16 от 31.01.2018 (л.д. 57 т. 1,);

По договору №07/03-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 2 532 374,40 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №6 от 31.01.2018 (л.д. 73,75-78 т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №15 от 31.01.2018 (л.д. 74, т. 1,);

По договору №07/04-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 187 017,42 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №9 от 31.01.2018 (л.д. 89,91-94 т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №14 от 31.01.2018 (л.д. 90, т. 1,);

По договору №07/05-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 542 102,67 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №7 от 31.01.2018 (л.д. 105,106-108 т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №13 от 31.01.2018 (л.д. 109, т. 1,);

По договору №07/06-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 484 588,33 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №8 от 31.01.2018 (л.д. 120, 121-124  т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №12 от 31.01.2018 (л.д. 125, т. 1,);

По договору №07/07-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 587 656,96 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1от 31.01.2018 (л.д. 137, 138-143  т.1), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №11 от 31.01.2018 (л.д. 144, т. 1,);

По договору №07/08-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 342 534,18 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №3 от 31.01.2018 (л.д. 6, 7-11  т.2), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №10 от 31.01.2018 (л.д. 12, т. 2,);

По договору №07/09-СЛПК от 09.11.2017 на сумму 2 340 317,33 руб.,  что подтверждается актом о приемке выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 31.01.2018 (л.д. 24, 25-29  т.2), выставив на указанную сумму счет-фактуру  №9 от 31.01.2018 (л.д. 30, т. 2,).

13.02.2018 г. между Заказчиком и Подрядчиком было подписано соглашение о  зачете встречных однородных требований на сумму 5 100 000,  в том числе, в части полного погашения задолженности по договору подряда №07/07-СЛПК от 09.11.2017 г.  в размере 587 656,96 рублей, в т.ч. НДС, и частичного погашения по договору подряда №07/04-СЛПК от 09.11.2017 г. на сумму 151 082,04 руб., в т.ч НДС.  (л.д.31, т.2)

Оплату выполненных и принятых работ по остальным договорам подряда, в сумме  10 240 317, 32 руб. заказчик не произвел. 

По расчету истца задолженность ответчика составила 10 240 317, 32 руб. В связи с неоплатой принятых Заказчиком работ, ООО «СК Алекс М»  14.06.2018 г. направило в адрес ответчика претензии по договорам подряда №07/01-СЛПК, №07/02-СЛПК, №07/03-СЛПК, №07/05-СЛПК, №07/06-СЛПК, №07/08-СЛПК, №07/09-СЛПК  (л.д.13-31, т.1). Претензии были получены ответчиком 07.07.2018 г., но оставлены без ответа.

Поскольку ответчик претензию оставил без удовлетворения, истец, ссылаясь на наличие задолженности по оплате выполненных работ в сумме 10 240 317, 32 руб., обратился с настоящим иском в суд.

Расчет задолженности судом проверен и признан правильным.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ответчик доказательства уплаты долга в сумме 10 240 317, 32 руб. не представил, размер задолженности и факт выполнения работ не оспорил.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, требование истца о взыскании с ответчика  задолженности по оплате выполненных работ в сумме 10 240 317, 32 руб. является правомерным.

За просрочку оплаты истец начислил ответчику пени в соответствии с п. 10.4 каждого договора в размере 2 642 001,87 руб. за период с 15.02.2019 г. по 30.10.2018 г. Расчет пени, принятый судом в ходе судебного заседания 27.11.2018 судом проверен и признан обоснованным, ответчиком не оспорен.

Таким образом, требования истца о взыскании 2 642 001,87 руб. пени также являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина по делу в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относится на ответчика.

В связи с увеличением размера исковых требований 73 447,60 руб. государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в доход федерального бюджета (п. 3 ч. 1 ст. 333.22 Налогового кодекса РФ).

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский ЛПК» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Алекс М» 10 240 317,32 руб. основного долга, 2 642 001,87 руб. неустойки, 13 964 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего взыскать 12 896 283,19 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибирский ЛПК» в доход федерального бюджета 73 447,60 руб. государственной пошлины.  

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья                                        Д.А. Гребенников