5/2019-147914(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-15880/2019

г. Владивосток

14 октября 2019 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Администрации  Арсеньевского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, дата государственной регистрации: 23.03.1999, адрес:  692337, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ДК - СТРОЙ" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации:  25.03.2008, адрес: 692623, Приморский край, 

<

...>, А)  

об исполнении гарантийных обязательств по муниципальному контракту и  устранении недостатков, взыскании 1 798 083 рублей 16 копеек  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ДК - СТРОЙ"  в течение 30 дней с даты вступления решения суда в законную силу  исполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту №  0120300004415000032-0069961-02 от 24.04.2015 и устранить недостатки,  

допущенные при строительстве многоквартирного жилого дома № 2 по ул.  Балабина в г. Арсеньеве Приморского края, а именно:  

 - устранить дефект кровли путем демонтажа облицовки парапета и  участка облицовки наружной стены, примыкающей к балкону до уровня  второго этажа, облицовки наружной торцевой стены в пределах  помещения № 4 

<

...> с  демонтажем утеплителя и его заменой;  

 - устранить нарушения строительно-технических норм, допущенных  при выполнении вентиляционных шахт № 1 и № 2 до нормативного  значения: шахты № 1 до высоты не менее 0,5 м. над коньком кровли,  шахты № 2 не ниже уровня конька кровли или равной выступающей части  конструкции вентиляционной шахты № 1.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДК -  СТРОЙ" в пользу Администрации Арсеньевского городского округа  

1 798 083 рубля 16 копеек штрафа. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДК -  СТРОЙ" в доход федерального бюджета 30 981 рубль государственной  пошлины по иску.  

 Выдать исполнительные листы после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и  в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 27.05.2019 2:28:44

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна