Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-9731/2024

город Мурманск

29 января 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174 АПК РФ, суд  

решил:

иск МКУ «УГХ п. Мурмаши» (ИНН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать ФИО1 (ИНН 

<

***>) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ по покрытию металлочерепицей кровли дома № 7 на улице Полярная в поселке городского типа Мурмаши в рамках гарантийных обязательств по договору от 16.11.2023 № 97-11/23, а именно:  

устранить намокание стены фасада 16 м2 передней и задней части дома в местах примыкания металлочерепицы слуховых окон кровли;  

устранить протечки в местах стыка листов металлочерепицы на 418,3 м2 площади кровли, приводящий к стеканию воды по защитной мембране;  

закрепить листы металлочерепицы кровли по всему периметру кровли 418,3 м2 в местах отсутствия саморезов.  

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу МКУ «УГХ п. Мурмаши» (ИНН 

<

***>) судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый календарный день неисполнения обязанности по устранению недостатков работ. Неустойка подлежит начислению со дня вступления решения суда в законную силу по день фактического исполнения судебного акта.  

Взыскать с ФИО1 (ИНН 

<

***>) в пользу МКУ «УГХ п. Мурмаши» (ИНН 

<

***>) 50000 рублей судебных расходов.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия.  

Судья Р.С. Дубровкин