68/2017-65287(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-4023/2017

город Вологда

19 июня 2017 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Вологодской области  

р е ш и л:

внести в государственный контракт на разработку проектной  документации на реконструкцию автодороги Устюжна-Сандово, участок км  0+000 – км 5+000 в Устюженском районе Вологодской области от 09.11.2016   № 4-34 следующие изменения:  

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Сроки выполнения работ по Контракту: Начало – с даты заключения Контракта. Окончание – до 30 октября 2017 года (включительно). 

Срок окончания работ включает в себя также срок для устранения  выявленных при приемке работ замечаний.  

Считать датой выдачи (передачи) проектной документации Заказчику –  дату предоставления полного комплекта документации, предусмотренного  Техническим заданием, при наличии положительного заключения  государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности  определения сметной стоимости, предоставленными отдельными книгами.»;  

пункт 13.7 изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами  и действует до 30 октября 2017 года (включительно). Окончание срока действия  Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту в части  взаимных расчетов, штрафных санкций и гарантийных обязательств.».  

Взыскать с казенного учреждения Вологодской области «Управление  автомобильных дорог Вологодской области» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Юггипротранс» 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Фадеева