АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 г. Москва Дело № А40-4970/23-126-36  22.06.2023 года  

Резолютивная часть решения объявлена 15.06.2023 Решение в полном объеме изготовлено 22.06.2023 Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО «ЭГС» (125252, 

<

...>,  ЭТ 2 ПОМ 3 КОМ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.10.2017, ИНН:  

<

***>)  

к ООО «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» (141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЫТИЩИ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, МЫТИЩИ ГОРОД, 159 ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ 4, СТРОЕНИЕ 1,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2015, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании штрафа, неустойки В судебном заседании приняли участие: от истца: ФИО1., доверенность от 01.02.2023 от ответчика: ФИО2, доверенность от 16.01.2023 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании: 

- штрафа за непредоставление исполнительной документации по Акту о приемке  

выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  

тысяч рублей 00 копеек). 

- штрафа за непредоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штрафа за непредоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 3 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штрафа за нпредоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 4 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штрафа за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штрафа за непредоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 6 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- неустойки за непредоставление Банковской гарантии, рассчитанную за период с  10.01.2022 г. по 11.01.2022 г. (с учетом соразмерности нарушенного обязательства), в  размере 200 000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек).  

Представитель истца требования поддержал. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал по  доводам, изложенным в отзыве.  

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к  следующим выводам.  

Между ООО «ЭГС» ИНН 

<

***> («Подрядчик») и ООО  «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» ИНН 

<

***> («Субодрядчик») был заключен договор №  ЭГС720/1 от 02.11.2021 г.  

По Договору № ЭГС720/1 от 02.11.2021 г. Субподрядчик обязался в  установленный Договором срок в соответствии с Проектной и Рабочей документацией,  одобренной со штампом «В производство работ», выполнить работы по устройству  электроснабжения остановочных павильонов, систем видеонаблюдения, наружного  освещения паркового, архитектурно-ландшафтного освещения, электроснабжения  системы видеонаблюдения на объекте: Строительство мостового сооружения через  старое русло р. Москва с улично-дорожной сетью в южной части территории  публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева" с обустройством  пешеходных пешеходов, отстойно-разворотной площадки, здания конечной станции  

городского пассажирского транспорта. Обустройство набережной р. Москва в районе  территории публичного акционерного общества "Завод имени И.А. Лихачева". Этап 1.  Строительство мостового сооружения через старое русло Москва-реки с улично-дорожной сетью в южной части территории "Завод имени И.А. Лихачева" с  обустройством пешеходного перехода Этап 1.1.2 - Строительство улично-дорожной  сети по пр.пр. 4062 на участке от ул. Льва Юдина до бульвара Братьев Весниных с  обустройством набережной» (далее – Объект).  

Общая стоимость работ по Договору согласована сторонами и согласно п. 3.1  Договора составляет 702 843,24 руб. (Семьсот две тысячи восемьсот сорок три рубля 24  копейки), в том числе НДС 20 % в сумме 117 140,54 руб. (Сто семнадцать тысяч сто  сорок рублей 54 копейки).  

Согласно п. 3.1.1 Договора - Срок выполнения работ с 1-го по 60-ый  календарный день с момента заключения Договора.  

Согласно п. 4.6. и п. 6.1. Договора оплата Работ производится при условии  предоставления Субподрядчиком Подрядчику в полном объеме следующих документов:  

- подписанных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма   № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);  

- исполнительной документации; - счета и счета-фактуры . 

Согласно п. 4.10 Договора одновременно с последним Актом о приемке  выполненных работ (Форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и  затрат (Форма № КС-3) по Объекту (этапу строительства Объекта/подэтапу  строительства Объекта/пусковому комплексу), в соответствии с установленным  Графиком производства работ, Субподрядчик представляет Акт (-ы) по форме согласно  формы Раздела № 27 Приложения № 3 к Договору, полный пакет документов,  относящихся к деятельности Субподрядчика, необходимых для получения Разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности города Москвы, в  том числе: исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с  соответствующими специализированными организациями, со штампом ОПС, акты  скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты рабочих  комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП (ИТП), ТП (РТП) и т.д., а так же  обеспечение гарантийных обязательств в размере, установленном в статье 10 Договора.  Оформление последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки  стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) осуществляется после  представления Субподрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.  

До настоящего времени Ответчик исполнительную документацию и иные  документы, предусмотренные Договором не предоставил, а, следовательно, обязанность  у Истца по плате не наступила.  

Согласно п. 17.4 Договора Подрядчик вправе в случае нарушения  Субподрядчиком срока предоставления/непредоставления исполнительной  

документации отдельно по каждому виду фактически выполненных работ взыскать  штраф в размере 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый факт нарушения. Между  сторонами подписаны: КС № 1 от 30.11.2021, КС № 2 от 30.11.2021, КС № 3 от  30.11.2021, КС № 4 от 30.11.2021, КС № 5 от 30.11.2021, КС № 6 от 30.11.2021,  исполнительная документация (по каждому из актов) не предоставлена, штраф  составляет 1 200 000,00 руб. (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек), из расчета:  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 1 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 2 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 3 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 4 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 5 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

- штраф за не предоставление исполнительной документации по Акту о приемке  выполненных работ (форма № КС-2) № 6 от 30.11.2021 в размере 200 000,00 (Двести  тысяч рублей 00 копеек).  

Таким образом, размер штрафа за нарушение Субподрядчиком обязательства по  предоставлению исполнительной документации составляет 1 200 000,00 руб. (Один  миллион двести тысяч рублей 00 копеек).  

Согласно п. 10.3. Договора Субподрядчик в обеспечение исполнения  гарантийных обязательств не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента  подписания Акта сдачи-приемки результата завершенных работ (п. 6.2.6 Договора)  

предоставляет банковскую гарантию по форме Раздела № 19 Приложения № 3.  Указанная гарантия должна быть безотзывной и оплачиваться по первому письменному  требованию Подрядчика.  

Акт сдачи-приемки работ подписан сторонами 30.11.2021 г., следовательно,  Банковская гарантия должна была предоставлена в срок до 31.12.2021 г. Гарантия  должна обеспечивать исполнение Субподрядчиком обязательств, установленных на  гарантийный срок плюс 1 (Один) месяц. Сумма гарантии должна составлять 5 (Пять) %  от Фактической цены Договора.  

Согласно п. 17.4 Договора Подрядчик вправе в случае нарушения  Субподрядчиком срока предоставления банковской гарантии в случаях,  предусмотренных п. 10.3 Договора, – неустойку в размере 100 000,00 (Сто тысяч)  рублей за каждый календарный день просрочки.  

Банковская гарантия на дату составления искового заявления Субподрядчиком не  предоставлена. Срок нарушения обязательства составляет 137 дней (с учетом  моратория, действовавшего в период с 01.04.2022 до 01.10.2022.) Неустойка за  нарушение обязательства по предоставлению Банковской гарантии составляет: 100  000,00 * 137 = 13 700 000,00 рублей (Тринадцать тысяч семьсот рублей).  

Таким образом, размер неустойки за нарушение Субподрядчиком срока  предоставления Банковской гарантии составляет 13 700 000,00 рублей (Тринадцать  тысяч семьсот рублей).  

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8,  10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также  отмечает следующее.  

Истец, не имея никаких мотивированных возражений при приемке работ,  подписал Справку стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 30.11.2021 г., а также  Акты о приемке выполненных работ № 1-6 от 30.11.2021 г.  

Вступившим в законную силу решением суда от 17.01.2023 по делу № А40247600/22-83-1347 по иску ООО «Инжстройинвест» (ИНН 

<

***>) к ООО «ЭГС»  (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору № ЭГС720/1 от 02.11.2021 в  размере 702 843 руб. 24 коп., процентов по статье 395 ГК РФ за период с 01.12.2021 по  10.11.2022 в размере 71 969 руб. 23 коп., с последующим начислением, установлено:  «Факт выполнения работ обосновывается представленными актами (формы № КС-2) и  справкой (формы № КС-3), подписанными ответчиком в отсутствие замечаний и  возражений относительно объема, качества и иных характеристик результата работ. О  

фальсификации представленных истцом доказательств, ответчиком в предусмотренном  статьей 161 АПК РФ порядке не заявлено.».  

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом  арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при  рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица (ст. 69  АПК РФ).  

Учитывая, что Акты выполненных работ подписаны, истцом исполнительная  документация получена, принимая во внимание положения п. 6.1 договора, штрафы за  непредставление исполнительной документации начислены истцом не обосновано.  

В отношении доводов истца о непредставлении ответчиком банковской гарантии,  в ходе производства по делу ответчиком факт не представления банковской гарантии  признан, вместе с тем указал, что негативных последствий истцом не понесено, заявил о  применении положений ст. 333 ГК РФ.  

Цена договора – 702 843 руб. 24 коп. 

В соответствии с п. 10.3 договора, размер банковской гарантии должна  составлять 5% от фактической цены договора.  

- 5% от 702 843 руб. 24 коп. составляет 35 142 руб. 16 коп. 

Суд учитывает необходимость соблюдения баланса прав и законных интересов  сторон, а также тот факт, что неустойка не может являться средством обогащения  кредитора за счет должника, и считает необходимым в силу ст. 333 ГК РФ уменьшить  неустойку до размера банковской гарантии – 35 142 руб. 16 коп. - считая данную сумму  справедливой, разумной и соразмерной допущенному ответчиком нарушению.  

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных  требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в  материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на  всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив  также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в  отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности,  находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.  

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в  порядке ст. 110 АПК РФ.   

На основании статей 8, 10, 12, 309, 310, 330, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» (141006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  МЫТИЩИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, МЫТИЩИ ГОРОД, 159 ПРОЕЗД, ВЛАДЕНИЕ 4,  СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2015, ИНН:  

<

***>) в пользу ООО «ЭГС» (125252, 

<

...>, ЭТ 2 ПОМ 3 КОМ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  10.10.2017, ИНН: 

<

***>) 35 142 (тридцать пять тысяч сто сорок два) руб.  неустойки, а также 3 857 (три тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб. судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.С. Новиков  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:43:00Кому выдана Новиков Михаил Сергеевич