Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Волгоград « 06 » апреля 2023 г. Дело № А12-17009/2021 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «УК  «Жилищный коммунальный сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов» Волгоградской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о понуждении устранить недостатки, с привлечением к участию в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора,  общества с ограниченной ответственностью «СК «Артель», общества с ограниченной  ответственностью «Амир строй групп», общества с ограниченной ответственностью «РСП  ИнжПроект», Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 - доверенность; от ответчика – ФИО2, доверенность; от ООО «СК «Артель» - ФИО3, доверенность 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать унитарную некоммерческую организацию «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>) в течение одного года с момента вступления в законную силу решения по  настоящему делу принять все предусмотренные законодательством меры, направленные  на обеспечение выполнения подрядной организацией, в соответствии с проектной  документацией и нормативными требованиями, работ по устранению недостатков,  допущенных при проведении капитального ремонта МКД № 13 по ул. Армавирская г.  Волгограда, а именно:  

1) выполнить примыкание кровли к оголовкам вентиляционных каналов и  вентиляционным трубам в соответствии со строительными нормами СП 17.13330.2017  «Кровля», в целях обеспечения герметичности примыкания кровельного покрытия к  данным оголовкам вентиляционных каналов и вентиляционным трубам;  

2) устранить протекание кровли во всех пяти подъездах многоквартирного дома №  

13 по ул. Армавирская г. Волгограда со стороны входов в подъезды способом устройства  конструктивного уклона кровли, то есть по специально разработанному проекту  необходимо устройство стропильной системы на данных участках, обеспечивающих  уклон кровли от выступающих частей наружных стен подъездов (парапетов);  

3) выполнить обратную засыпку старого утеплителя вокруг фановых труб на  чердаке многоквартирного дома № 13 по ул. Армавирская г. Волгограда с устройством  гильзы из рубероида методом обертывания трубы;  

4) выполнить примыкание кровли к слуховому окну пятого подъезда МКД № 13 по  ул. Армавирская г. Волгограда, согласно строительных норм СП 17.13330.2017;  

5) выполнить отделку брендмауэров выше кровли между вторым - третьим,  четвертым - пятым подъездами МКД № 13 по ул. Армавирская г. Волгограда в  соответствии со строительными нормами СП 17.13330.2017, включая примыкание;  

6) восстановить штукатурный слой балконных плит, козырьков подъездов,  устройства покрытия козырьков подъездов многоквартирного дома № 13 по ул.  Армавирская г. Волгограда, согласно указаний проектной документации 111-В/ПР/2015- АС листы 1, 19,21;  

7) выполнить вывод фановых стояков за покрытие кровли МКД № 13 по ул.  Армавирская г. Волгограда (устранить конденсат на кровельном покрытии и увлажнение  конструкций крыши), согласно строительных норм СП 17.13330.2017;  

8) выполнить вывод вентиляционных коробов от квартир собственников  помещений МКД № 13 по ул. Армавирская г. Волгограда за покрытие кровли (устранить  конденсат на кровельном покрытии и увлажнение конструкций крыши), согласно  строительных норм СП 17.13330.2017;  

9) выполнить вентиляционные продухи в покрытии кровли для обеспечения  естественной просушки деревянных конструкций крыши и соблюдения требований  строительных норм по вентиляции СП 17.13330.2017 помещений холодных чердаков,  продухи в виде слуховых дополнительных окон и вытяжных коробов в коньковой части  крыши (устранить увлажнение и просушку конструкций крыши и снизить риски  выпадения конденсата);  

10) выполнить крепление кровельными саморезами в каждую волну (гребень)  профилированных листов покрытия на карнизном свесе согласно строительных норм и  провести частичную выверку покрытия из профилированного листа, обеспечив плотное  сопряжение смежных листов в гребень.  

В случае неисполнения судебного акта в течение одного года со дня вступления  решения суда в законную силу взыскать с УНО «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в пользу  ООО «УК «Жилищный коммунальный сервис» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)  судебную неустойку в размере 15 000 рублей за каждый полный месяц до дня  фактического исполнения судебного акта.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «УК «Жилищный коммунальный  сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по оплате судебной  экспертизы в размере 115 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение  месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья Э л е к т р о н н а я  п о д п и с ь   д е й с т в и т е л ь н а . Стрельникова Н.В.  

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 10.02.2023 10:35:00Кому выдана Стрельникова Наталья Викторовна