143/2020-3527(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-12376/2019

20 января 2020 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Онопрейчук И.С.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Северо-Запада»  

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьПриборМонтаж» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, временного  управляющего общества с ограниченной ответственностью  «ЭлектроСетьПриборМонтаж» ФИО2  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью  

«ЭлектроСетьПриборМонтаж» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в течение  

одного месяца с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки  

работ, выполненных в рамках договора подряда от 02.03.2017 № 54/17-Ю, а именно: 

1) произвести ручным способом расчистку трасс линий в пределах охранной зоны линии  

электропередачи и в границах существующей просеки ВЛ, с вырубкой деревьев (сильно  

ослабленных, усыхающих, сухостойных, буреломных, ветровальных), угрожающих  

падением на провода, а также образовавшихся в процессе расчистки трассы (с  

механическими повреждениями стволов, корневой системы), с последующей уборкой, в  

соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством: 

- ВЛ-10 кВ яч.9Д РП «Читаево» участок р. Луза - ЛР-905 в объеме 3,5 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.19Д ПС «Визинга» в объеме 3,87 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч.20Д ПС «Визинга» в объеме 4,03 га.; - ВЛ-10 кВ яч.7Д ПС «Пыелдино» в объеме 0,095 га.; - ВЛ-10 кВ яч.8Д ПС «Пыелдино» в объеме 0,23 га.; - ВЛ-10 кВ яч.4Д РП «Бортом-База» в объеме 0,23 га.; - ВЛ-10 кВ яч.4Д ПС «Пыелдино» в объеме 0,14 га.; - ВЛ-10 кВ яч.5Д ПС «Пыелдино» в объеме 0,11 га.; - ВЛ-10 кВ яч.6Д ПС «Пыелдино» в объеме 0,23 га.; 

- ВЛ-10 кВ яч.11Д «Койгородок-Нижняя Турунью» ПС «Койгородок» в  

объеме 10,5 га.; - ВЛ-10 кВ яч.4Д ПС «Часово» в объеме 1,6 га.; 

- ВЛ-10 кВ яч.521Д ПС «Зеленец» в объеме 0,12 га.;  - ВЛ-10 кВ яч. 16Д ПС «Сторожевск» в объеме 7,32 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.6Д ПС «Подтыбок» в объеме 2,1 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.1Д ПС «Корткерос» (без отп. на Маджу) в объеме 3,3 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч.2Д ПС «Корткерос» в объеме 0,41 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.7Д ПС «Корткерос» в объеме 0,48 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.13Д ПС «Корткерос» в объеме 0,53 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.14Д ПС «Корткерос» (отп. на Усть-Локчим, Мартеты) в объеме 3,9 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч. 11Д ПС «Приозерная» в объеме 0,72 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.11 Д ПС «Сторожевск» в объеме 0,5 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.5Д ПС «Мордино» в объеме 0,08 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.7Д ПС «Мордино» в объеме 0,44 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч.9Д ПС «Мордино» в объеме 6,25 га.; 

- ВЛ-10 кВ яч.12Д ПС «Сторожевск» в объеме 8,47 га.;  - ВЛ-10 кВ яч. 1Д ПС «Корткерос» (отпайка на Маджу) в объеме 0,26 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч.5Д ПС «Приозерная» в объеме 0,2 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.5Д ПС «Приозерная» (отп. на Биостанцию) в объеме 0,13 га.;.  

- ВЛ-10 кВ яч.19Д ПС «Помоздино» (отпайка на п. Пузла) в объеме 7,59 га.  

- ВЛ-10 кВ яч. 11Д ПС «Усть-Нем» в объеме 0,87 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Вымь» в объеме 4,232 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.4Д ПС «Усть-Вымь» в объеме 2,559 га.;  - ВЛ-10 кВ яч.1 Д ПС «Усть-Вымь» в объеме 2,230 га.;  

- ВЛ-10 кВ яч.3Д ПС «Айкино» в объеме 2,230 га.; 

2) произвести ручным способом расчистку трасс линий в пределах охранной  зоны линии электропередачи и в границах существующей просеки ВЛ порубочных  пеньков, высота которых не должна превышать 10 см. (для деревьев диаметром  менее 30 см.) и 20 см. (для деревьев диметром более 30 см.) с последующей их уборкой, в  соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством:  

- в пролетах опор 10-17,18-27,29-71, 96-97 ВЛ-10 кВ яч.19Д ПС «Визинга»;  - в пролетах опор 10-48,49-50 ВЛ-10 кВ яч.4Д ПС «Визинга»;  

- в пролетах опор 138-163, 167-168, 169-174, 175-211 ВЛ-10 кВ яч.14Д ПС  «Корткерос» (отп. на Усть-Локчим, Мартеты);  

- в пролетах опор 2-10, 23-47, 57-118, 125-125/2, 144-158, 170-171, 173-176, 178-179,  182-183,185-200 ВЛ-10 кВ яч. 11Д ПС «Сторожевск»;  

- в пролетах опор 5-18 ВЛ-10 кВ яч.7Д ПС «Пожег» (отпайка на Вомынвож)  - в пролетах опор 158-173 ВЛ-10 кВ яч. 12Д ПС «Подтыбок»;  

- в пролетах опор 13-50 ВЛ-10 кВ яч.6 Д РП «Вейпом»;  3) произвести ручным способом расчистку одиночно стоящих кустов (с  

механическими повреждениями стволов, корневой системы), с последующей их  уборкой, в соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством:  

- в пролетах опор 138-163, 167-168, 169-174, 175-211 ВЛ-10 кВ яч.14Д ПС  «Корткерос» (отп. на Усть-Локчим, Мартеты);  

4) произвести ручным способом расчистку отдельно стоящих деревьев (с  механическими повреждениями стволов, корневой системы), с последующей   уборкой, в соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством:  

- в пролетах опор 109-110, 11-112, 112-113, 116-117 охранной зоны ВЛ-10 кв.  яч.11 Д ПС «Сторожевск»;  

5) произвести ручным способом укладку срубленных деревьев в штабеля  или поленницы в местах, исключающих риски возникновения лесных пожаров:  

- в пролетах опор 138-163, 167-168, 169-174, 175-211 ВЛ-10 кВ яч. 14 Д ПС  «Корткерос» (отп. на Усть-Локчим, Мартеты);  

- в пролетах опор 2-10, 23-26, 26-47, 57-118, 125-125/2, 144-158, 170-171,173-176, 178- 179, 182-183,185-200 ВЛ-10 кВ яч.11Д ПС «Сторожевск»;  

- в пролетах опор 6-12, 30-32, 41-43, 49-51, 53-60, от ЛР 701: 15-20, 62-1, 9-15, 20-21  ВЛ-10 кВяч.7Д ПС «Мордино»;  

- в пролетах опор 3-4, 11-12, 17-18, 52-56, 60-63, 66-68, 69-71, 73-75, 78-113А 116/6- 116/7, 116/14-116/15, 116/17-116/19, 131/2-131/6, отпайка на КТП-808 «Ероздино» 1-2,13- 14,63-65,66-70,91-94 ВЛ-10 кВ яч.8Д ПС «Усть-Вымь»;  

- в пролетах опор 31-32, 33-34, 36-38, 52-53, 57-60, 74-75, 76-79, 80-85, 86-87 ВЛ 10  кВ яч.4Д ПС «Усть-Вымь»;  

- в пролетах опор 43-46 ВЛ-10 кВ яч. 6Д РП «Вейпом». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ЭлектроСетьПриборМонтаж» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу  публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая  компания Северо-Запада» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6 000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу  по заявлению взыскателя.  

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке  во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров) с подачей жалобы (в том числе  в электронном виде) через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со  дня изготовления в полном объеме.  

Судья И.С. Онопрейчук 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 05.08.2019 7:38:37

Кому выдана Онопрейчук Ирина Сергеевна